문서번호	시설과-5202
결재일자	2016.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설팀장	시설과장
협 조

관급자재(레미콘) 납품기한 연기 및 추가구매

(보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사)

2016. 9.

(시     설     과)

관급자재 납품기한 연기 및 추가구매

(보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사)

『보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사』와 관련하여 공사일정 및 사정변경에 따라 관급자재(레미콘) 납품기한 연기 및 추가구매에 대한 보고.

Ⅰ		공사개요

❍ 건축규모 : 지하0층, 지상 2층, 연면적 468.50㎡

❍ 시 공 자 : ㈜푸른종원건설 대표 : 차상민

❍ 공사기간 : 2016. 03. 07 ~ 2016. 10. 06

❍ 감 리 자 : ㈜유현준건축사사무소 대표 허진성

❍ 계약금액 : 684,812,900원(건축)

Ⅱ		납품기간 연장

❍ 구매개요

구 분	납품요구번호	수 량	계약금액	납품회사	납품기간
레미콘	12-16-1-20253-00	653.0㎥	43,185,380	서울경인레미콘	‘16.09.30

❍ 연기사유 : 준공일 연장에 따른 납품기간 연기

❍ 납품기간 연기

- 2016. 09. 30 → 2016. 10. 10

❍ 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미 부과

Ⅲ		추가구매

❍ 구매개요

구분	물품식별번호	규격	수량	단가	계	납품기간
레미콘	계		48㎥		3,115,990
	10063102	25-24-150	43㎥	65,830	2,830,690	2016.10.10
	10063091	25-18-120	5㎥	57,060	285,300	2016.10.10

❍ 사    유 : 물량증가(설계변경 사항 적용)

Ⅳ		조치의견

❍ 관급자재 납품기한 연기 및 추가구매코자 합니다.