투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	관급자재(아스콘) 수량 변경 요청

1. 시설관리과-1627(2014.6.12.)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행하고 있는 뚝섬공원 자전거도로 이전공사에 사용되는 관급자재(아스콘)에 대하여 아래와 같이 수량변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건       명 : 관급자재 아스콘 구매 – 뚝섬자전거도로 이전공사

나. 납품요구번호 : 12-14-1-32516-00

다. 계 약 업 체 : 서울, 경인아스콘공업협동조합

라. 변 경 내 용

품 명	규격	단위	단가	당초		변경		증․감
				수량	금액	수량	금액
아스팔트 콘크리트	WC-2	톤	78,125	294	22,968,750	425	33,203,125	10,234,375
아스팔트 콘크리트	BB-2	톤	63,320	189	11,967,480	95	6,015,400	-5,952,080
소계					34,936,230		39,218,520	4,282,290
조달수수료					179,220		211,780	32,560
합계					35,115,450		39,430,300	4,314,850

마. 변경사유 : 현장 여건에 따른 시공물량 변경.  끝.

	시설관리과장
주무관			주무관			시설관리과장
협조자	주무관
시행	시설관리과-2916	(	2014.10.22.	)	접수	총무과-16033	(	2014.10.22.	)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25 (강변북로 257)	/
전화	02-3780-0644	/전송	02-3780-0744	/	ahndy@seoul.go.kr	/	대시민공개