월드컵대교 건설공사

6차공사 관급자재(특수레미콘) 증량 검토서

2015. 01

	서울특별시 도시기반시설본부 월드컵대교 건설공사

6차공사 관급자재(특수레미콘) 증량 검토서

□ 6차공사 관급자재(특수레미콘)추가 발주현황

○ 관급자재(특수레미콘) 계약변경

구 분	규 격		단위	기발주분 (계약분)		‘15년(6차공사) 변경요청		증 감		타설부위	비 고 (업체명/계약번호)
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
레미콘	특수	19-60-150	㎥	525	56,398,650	567	60,910,542	42	4,511,892	복합말뚝속채움	아주산업(주) 2014060452700
		19-45-150	㎥	2,241	226,475,460	6,093	615,758,580	3,852	389,283,120	P11 주두부
		단수정리			-110
		소 계			282,874,000		676,669,122		393,795,012
		19-50-150	㎥	397	42,737,050	3,605	388,078,250	3,208	345,341,200	역T형거더	당진기업(주) 2014120901
		소 계			42,737,050		388,078,250		345,341,200
	합 계				325,611,050		1,064,747,372		739,136,212

○ 지출품의행위

구 분	규 격		단위	‘14년 지출품의 (A)		‘15년 추가 지출품의 (B)		최종 지출품의 (C=A+B)		타설부위	비 고 (업체명/계약번호)
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
레미콘	특수	19-60-150	㎥	62	6,660,412	505	54,250,130	567	60,910,542	복합말뚝속채움	아주산업(주) 2014060452700
		19-45-150	㎥	1,936	195,936,922	4,157	419,821,658	6,093	615,758,580	P11 주두부
		소 계			202,597,334		474,071,788		676,669,122
		19-50-150	㎥	-	-	3,605	388,078,250	3,605	388,078,250	역T형거더	당진기업(주) 2014120901
		소 계			-		388,078,250		388,078,250
	합 계				202,597,334		862,150,038		1,064,747,372

□ 업체별 계약변경 상세내용

1)아주산업(주) : (증)물량, (증)계약기간

- 계약번호(수의계약) : 2014060452700

- 품의여부 : ‘14.12월 품의 완료 → 추가 품의

- 납품기한 : (당초) 2015. 1.31. (변경) 2015.12.31.

- 변경현황

규 격	단 위	수 량			비 고
		기발주	변경요청	증 감
19-60-150	㎥	525	567	(증) 42	복합말뚝속채움
19-45-150	㎥	2,241	6,093	(증) 3,852	P11 주두부

- 증량신청 사유

① 입찰결과

물품명	공고일			유찰사유	비 고
월드컵대교 건설공사(5차)관급자재(특수레미콘) 구매	1차	2014.04.10	2014.04.16	무응찰	재무과- 21383호
	2차	2014.04.17	2014.04.23

②수의사유

- 2014년 관급자재(특수레미콘) 입찰결과 상기 표와 같이 2회 유찰(무응찰)로 당시           수의계약【신청후 5개월 소요(2월~6월 계약)】을 진행하였으며, 증량에 대한 6차           공사 재입찰시에도 이전 입찰결과와 같은 무응찰(유찰)로 입찰 대기기간만 증가           되고, 동일업체로 선정될것으로 확실시 되므로 원만한 공정진행을 위해 금회 증량           신청을 함.

2)당진기업(주) : (증)물량, (증)계약기간

- 계약번호(수의계약) : 2014120901

- 품의여부 : ‘14.12월 미품의 → 신규 품의

- 납품기한 : (당초) 2015.02.28. (변경) 2015.12.31.

- 변경현황

규 격	단 위	수 량			비 고
		기발주	변경요청	증 감
19-50-150	㎥	397	3,605	(증) 3,208	역T형거더

- 증량신청 사유

① 입찰결과

물품명	공고일			유찰사유	비 고
관급자재 고강도 레미콘구매(월드컵대교)	1차	2014.08.11	2014.08.18	무응찰
	2차	2014.08.21	2014.08.25

②수의사유

- 2014년 관급자재 고강도 레미콘(특수레미콘)구매 입찰결과 2회 유찰(무응찰)로            당시 수의계약【신청후 6개월 소요(7월~12월 계약)】을 진행하였으며, 증량에 대한           6차공사 재입찰시에도 이전 입찰결과와 같은 무응찰(유찰)로 입찰 대기기간만 증가           되고, 동일업체로 선정될것으로 확실시 되며,

- 월드컵대교 북단IC 적기개통(‘15.05.31)을 위해 금회 증량신청을 긴급히 요청함.