문서번호	정수시설과-5163
결재일자	2016.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
협조
	주무관

천만 시민과 함게 하는 맛있는 아리수!

관내노후시설물보수공사 예비준공검사 결과 보고

2016. 7.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

관내노후시설물 보수공사 예비준공검사 결과보고

○ 우리 정수센터 2014년 정밀안전진단결과 적출된 배출수 처리시설인 농축조 및 배출수지의 내․외부 벽면의 균열, 백태, 단면열화 등 노후 및 기능 저하 배출수처리시설에 대한 보수공사가 설계도서와 같이 완료되어 예비준공검사 결과를 보고드림

1		공사개요

○ 공 사 명 : 관내 노후시설물 보수공사

○ 공 사 비 : 174,598,900원

○ 공사내용  : 표면처리 1,574㎡, 단면복구 264㎡, 균열보수 298m

○ 착 공 일 : 2016. 4. 15.

○ 준공기한 : 2016. 8. 08.

○ 하자보수 보증기간 : 준공검사일로부터 3년

○ 도 급 자 : 미래종합개발(주)  대표 최 해 순

2		예비준공검사 결과

□ 주요공사 현황

구 분	규격별	설계수량	준공수량	비 고
표면처리	㎡	2,115	1,594	감) 546,000
단면복구	T=20mm	0	156
	T=30mm	264	264
균열보수	m	288	300
철근노출단면복구	㎥	1	0
콘크리크단면제거	㎥	7.9	11

□ 공사 확인점검 결과

○ 점검대상 : 준공대상 물량

○ 점검일시 : 2016. 7. 11(월)

○ 점검방법 : 관내 노후시설물 보수공사(시공상태)

○ 점검내용

연번	점 검 위 치	공 사 내 용	시공 적정성	비 고
1	배출지처리장	농축조 단면복구등	적 정	시공상태확인
2	착수정처리장	착수정 타일및벽체보수	적 정	시공상태확인

○ 입회확인자 : 지방공업서기보 엄주원, 지방시설서기보 서한빈

○ 점검결과 : 농축조및 착수정, 분배조 정비공사 적정여부 확인결과 설계도서 및 시방서와 같이 시공되었으며, 시공상태 점검결과 이상없음

3		보고자 의견

○ 정수센터 관내노후시설물보수공사가 설계도서 및 시방서와 같이 완료되어 예비 준공검사를 실시하였으며,

○ 공사완료 현장에 대한 예비준공검사결과 시공상태가 적정하다고 판단되어 따로붙임의 준공내역과 같이 준공처리 하고자 함.

붙임 : 1. 입회 및 예비준공사진 1부

2. 준공내역서 1부. 끝.