문서번호	도로보수과-5906
보존기간	년
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	주무관	도로보수과장		동부도로사업소장
협 조

관내포장도로굴착복구 설계변경 검토보고(3회)

2014. 10.

동부도로사업소

(도로보수과)

관내포장도로 굴착복구 설계변경 검토 보고(3회)

우리사업소에서 시행중인 『관내포장도로굴착복구공사(연간단가)』와 관련, 시공물량 증감사항이 발생하여 검토하고 그 결과를 보고드림

	1		공 사 개 요

공 사 명 : 관내포장도로굴착복구공사(연간단가)

공사개요 : 소규모포장복구 A=110a, 차로단위복구 A=350a

공사기간 : 2014. 3.26 ~ 2015. 2. 28

도 급 비 : 1,625,284천원

도 급 자 : (유)다라니산업건설 대표 최형근

	2		주 요 변 경 내 용

❍ 우리구 관내 자치구청장으로부터 굴착승인되어 우리사업소로 복구 의뢰한 포장도로 굴착복구물량과 차로별 복구물량(논현로, 밤고개로 등)의 증·감으로 인한 계약물량 조정

❍ 밤고개로 배수성 포장 설계 반영

- 밤고개로(수서IC~수서역 교차로)는 차로단위 복구구간으로 기 시공된 배수성포장의 기능 유지 및 도로시설물의 유지관리에 유리한 동일포장재(배수성포장)로 설계에 반영

❍ 집행잔액 및 낙찰차액 설계 반영

- ‘14년도 굴착복구물량이 당초 예측물량보다 증가함에 따라 포장도로굴착복구공사의 원활한 추진과 도로관리과로부터 재배정된 예산의 효율적 사용을 위해 집행잔액 및 낙찰차액 281백만원 설계에 반영

	3		조 치 계 획

❍ 굴착복구 시행도로정비와 자치구에서 우리사업소로 복구의뢰한 굴착복구 물량과 차로별 복구물량 변경사항을 반영하여 설계변경 시행코자 함.

▶ 주요설계변경내역

- 굴착복구공사 시공물량 변경사항

┏ 아스팔트 포장(소규모굴착복구): 110a → 132a(증22a)

┗ 아스팔트 포장(차로복구)       : 350a → 428a(증78a)

구 분		계약물량 (a)	변경물량 (a)	증 ․ 감	비 고
소규모포장복구		110	132	증22
소 계		350	428	증78
차로복구	평삭후 덧씌우기 (20a미만기준)	155	135	감20
	평삭후 덧씌우기 (50a기준)	195	293	증98

- 관급자재비

구 분	규 격	계약물량 (톤)	변경물량 (톤)	증 ․ 감	비 고
아스콘	계	29,804	26,461.5
	#67	9,050	9,072	증22
	#78	400	400	-
	#467	9,754	9,759	증5
	#67(재생)	600	600	-
	#467(재생)	6,930	4,558	감2,372
	미끄럼방지포장(㎡)	1,000	1,021	증21
	배수성	-	1,051.5	증1,051.5

- 폐아스콘처리용역 : 변경사항 없음

구 분		계약물량(톤)	변경물량(톤)	증 ․ 감	비 고
계		12,440	12,440	-
운 반 량	편도	1,110	1,110	-
	왕복	11,330	11,330	-

- 설계변경 예정금액

구 분		당 초 금 액(원)	변 경 금 액(원)	증 ․ 감	비 고
총 공 사 비		3,369,284,700	3,650,000,000	증280,715,300
굴착복구 공사	도 급 비	1,625,284,700	1,906,000,000	증280,715,300
	관 급 비	1,744,000,000	1,744,000,000	-
폐아스콘처리용역		132,651,000	132,651,000	-

※ 예산과목

1) 도시안전실, 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구지원, 시설비및부대비, 시설비(굴착기금)

2) 도시안전실, 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로유지보수, 시설비및부대비, 시설비

3) 도시안전실, 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속속물관리, 제설대책추진, 일반운영비, 사무관리비

따로붙임 : 설계변경내역서 1부.  끝.