관악소방서 냉․난방 설비 보수공사 계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

청사 준공이후 본서 냉․난방 설비의 노후로 사용상 문제가 발생한 시설을 보수․보강을 실시하여 건물의 유지관리에 효율을 기하고 직원복지 및 재난 출동태세에 만전을 기하기 위하여 공사를 시행하고자 함.

Ⅰ. 청사 개요

위     치 : 서울시 관악구 관악로 97(구.청룡동 1593-3)

건축면적 : 대지면적 4,770.8㎡, 연면적 4,895.39㎡

청사 건축년도 : 1994년 11월(2003년 증축)

Ⅱ. 현실태

본서 1994년 준공 및 증측 공사 이후 냉․난방 설비에 대하여 사용기간의 오랜 경과로 및 장비 및 배관이 노후화 되어 냉․난방 기능의 저하 등 효율이 떨어지고 누수 등 발생으로 시설 보수가 필요한 상태임.

Ⅲ. 보수 내용

보수 대상 : 본서 기계실 및 복지동 배관

기계실내 펌프보수(메카니칼씰펌프교체) 및 증기햇더 응축수 배관교체. 안전변 교체(냉온수 및 냉각수펌프 20HP 2대, 30HP 2대)

복지동 차고 상부 배관 누수 보수 및 전체배관 보온작업(보온테이프마무리)

옥상 수조탱크 직수배관설치. 냉각탑 충진물 및 베아링 교체.

지하 정화조內 오수 배관 등 시설물 교체

냉․난방의 안정적 운영과 설비 시설물의 전체적 가동

Ⅳ. 예산 및 계약 현황

예 산 액 : 20,000천원

계약방법 : 수의계약(g2b를 이용한 전자계약)

계약근거

- 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행규칙 제25조

- 지방자치단체입찰 및 계약집행기준 제5장 수의계약 운용요령

Ⅴ. 추진계획

2014. 07. 09 ~ 07. 10 : 공사 계획수립 및 발주 보고

2014. 07. 11 ~ 07. 16 :  전자 시담

2014. 07. 17 ~ 07. 18 : 공사 계약(조달청g2B이용)

2014. 07. 18 ~ 08. 11 : 공사 준공

Ⅵ. 기대 효과

설비 공사을 통한 직원의 근무 환경 및 청사 환경 개선 효과 기대

노후된 청사 시설물 개선으로 청사 유지관리의 효율적 운영

냉․난발 설비 교체로인한 에너지 절감 기대

Ⅶ. 냉․난방 설비 전경