문서번호	시설보수과-5567
결재일자	2016.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
협 조

광평교 내구성 향상을 위한

보도낮춤 구조개선공사 변경계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8.

동부도로사업소

(시설보수과)

광평교 내구성 향상을 위한 보도낮춤 구조개선 공사 변경계획

광평교 내구성 향상을 위한 보도낮춤 구조개선 공사를 당초 편도로 계획하였으나, 교량의 내구성 확보 및 효율적 유지관리를 위해 양방향 보도낮춤 계획으로 변경시행코자 함

추진 경위

□ 보도낮춤 구조개선을 통한 도로시설물 내구성 향상 시범시공계획

(시설보수과-4920호, 2016.7.12.)

□ 2016년 도로시설물일상유지보수공사 작업지시(6차 광평교 보도낮춤)

(시설보수과-5287호, 2016.7.22.)

공사 개요

❍ 교량개요 : 광평교 구조형식(PF Girder + RC슬래브(B=25.1m,L=325m)

❍ 주요 공사내용

- 보도부 슬래브 상면(포장층 하부) 체수방지를 위한 보도낮춤구조개선(t=25→8㎝)

- 보도내 통행불편 초래 가로등 이설 병행시공(보도내측 → 방호울타리 외측)

변경 사항

❍ 공사 내용

- 당초 : 보도낮춤 구조개선 B=1.7m, L=325m(편도)

- 변경 : 보도낮춤 구조개선 B=1.7m, L=650m(양방향)

❍ 공사 기간

- 당초 : 2016.7.30.~7.17(19일간)

- 변경 : 2016.8.04.~9.13(40일간)

❍ 개략 공사비

- 당초 : 266백만원(도급비 179, 관급비 87)

- 변경 : 370백만원(도급비 370)

※ 추가 소요예산 104백만원

변경 사유

❍ 교량의 내구성 확보 및 효율적 유지관리를 위해서는 양방향 보도낮춤 시공이 필요함

❍ 방호울타리 철거 후 상태를 확인한 바, 방호울타리 상태가 양호하여 재 설치를 하여도 품질과 미관에 큰 문제가 없다고 판단됨

조치 계획

❍ 방호울타리 재설치에 따라 절감되는 예산을 활용하여 양방향 보도낮춤 공사를 시행코자 하며,

❍ 추가 소요되는 예산(104백만원)은 “2016년 도로시설물 일상유지보수공사” 집행잔액 및 낙찰차액(269백만원)으로 조치코자 함

행정 사항

❍ 기 구매한 관급자재(방호울타리는)는 기존 방호울타리를 재설치 함에 따라 구매 취소코자 함

❍ 기 작업지시한 편도 보도 낮춤 구조개선공사를 양방향 보도 낮춤 구조개선공사로 변경 작업지시코자 함

붙임 : 1. 보도낮춤 위치도 및 현황도  1부.

2. 변경 작업지시서 1부.  끝.