문서번호	역사도심재생과-2690
결재일자	2018.3.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관	광장관리팀장	광화문광장기획반장

2017~18년 광화문광장 제설작업 용역(장기계속)

설계변경 및 정산보고

2018. 03.

도시재생본부

광화문광장추진반

2017~18년 광화문광장 제설작업 용역(장기계속)

설계변경 및 정산보고

광화문광장 제설작업 용역이 강설량에 따른 물량 변경분이 발생되어(총 금액변경은 없음) 설계변경  및 정산을 시행코자 함

□ 용역개요

○ 건    명 : 2017~18년 광화문광장 제설작업용역(장기계속)

○ 계 약 자 : ㈜상익공영(대표 ***)

○ 계약금액 : 금33,894,000원(금삼천삼백팔십구만사천원)

○ 용역기간 : 2017.11.20. ~ 2018.03.20.

□ 설계변경 내역 및 금액

○ 변경사유 : 강설량에 따른 용역 물량 투입량의 변화

○ 주요 설계변경 내역

제설작업 공종	수 량		증․감	비 고
	당초	변경
제설인력	1,344	1,402	증58
제설장비	2,66	157	감109

○ 설계변경 금액 : 없음

□ 향후 추진계획

○ 물량 변화에 따른 설계변경 사항으로서 변경 계약 시행코자 함.

따로붙임 : 설계변경내역서 1부.

제설작업사진 및 제설작업일지 1부.  끝.