광화문광장 차도 돌포장 정비계획

□ 공사개요

○ 공 사 명 : ‘14년 세종로 차도구간 일상유지보수공사(연간단가)

○ 규    모 : 화강석 포장보수 950㎡, 차도줄눈정비 200a 등

○ 공 사 비 : 720백만원

○ 공사기간 : ‘14.05.15~’15.02.28

○ 도 급 사 : ㈜사림엔지니어링

□ ‘14년 보수현황

○ 보수개요

계		기 보 수(1차)		보 수 중(2차)		비고
포장보수	줄눈정비	포장보수	줄눈정비	포장보수	줄눈정비
1,042㎡	164a	829㎡	84a	213㎡	80a

※ 작업완료 후 물량정산 및 설계변경 시행 예정

○ 투입계획   ※ 작업상황에 따라 변경될 수 있음

- 인원 : 12명/일(석공 5, 특별인부 4․보통인부 2, 신호수 1)

- 장비 : 사인보드 2, LED전광판 1, 차량 2, 백호 1 등

○ 작업기간(2차) : ‘14.10.14~11.30

□ 향후계획

○ 돌포장 보수는 시민불편 최소화 및 품질관리를 위해 동절기전 완료

○ 동절기 돌포장 파손 등 긴급복구 외는 상온아스콘 사용 지양

○ ’14년 세종로 돌포장 보수는 사업비내에서 시행