문서번호	토목부-11096
결재일자	2015.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
협조

광희중학교 담장 설치 등 검토보고

(응봉교 확장 및 성능개선 공사)

2015. 5.

광희중학교 담장 설치 등 검토보고

(응봉교 확장 및 성능개선 공사)

․ 교통우회용 가설교량 설치를 위해 철거한 학교 담장(메쉬휀스)에 대하여 광희중학교 요구사항과 주민자치위원회 의견을 반영한

담장(조적+휀스) 설치 및 쪽문 설치에 대한 검토보고임

Ⅰ		관련근거

○ 광희중학교-2861호(2015. 3.20.) 및 응봉동 주민자치회(2015.4.6.)

- 수차례 학교장 면담, 응봉동 주민자지위원, 응봉동장 합동 회의

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 응봉교 확장 및 성능개선 공사

○ 공사위치 : 성동구 응봉동 ~ 성수동(기존 응봉교 구간)

○ 공사규모 : 응봉교 확장 및 성능개선

- 왕복 4차로 → 6차로, 연장 693m(교량 625m, 옹벽 68m)

- 성능개선 : DB18 → DB24

○ 공사기간 : 2008.10. ~ 2015.12.

○ 도 급 비 : 738억원

○ 시 공 사 : 한신공영(주)       ○ 감 리 사 : ㈜건화엔지니어링

Ⅲ		감리단 보고내용

○ 건    명 : 시점부 하부 광희중학교 담장 설치

○ 검토사유 : 교통우회용 가설교량 설치를 위해 철거하였던 담장을    원상복구 함에 있어 광희중학교 및 주민자차위원회의 요구사항을 반영하여 주변 환경과 조화를 이루도록 정비코자 함.

- 광희중학교 담장(조적 + 휀스) 및 쪽문 설치

· 담장  H=2.2m,  L=86.5m   쪽문 H=2.2m, B=1.0m

○ 수량 증·감 현황

구 분	규 격	단위	수 량		증·감	비고
			당 초	변 경
광희중학교 담장 설치 (L=86.5m)
1) 치장벽돌	1.0B 쌓기	㎡	-	117	증) 117
2) 벽돌운반		EA	-	17,925	증) 17,925
3) 담장기초	W:0.4×H:0.2	M	-	86.5	증) 86.5
4) 기초 CON'C타설	25-180-15	㎥	-	6.9	증) 6.9
5) 창살형 휀스	W:2.0, H:1.2	M	-	70	증) 70
6) 출입문	W:2.0, H:1.2	EA	-	1.0	증) 1.0
7) 터파기 및 유용토처리 (사토)		㎥	-	6.9	증) 6.9

○ 공사비 증·감 현황                           (단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	학교 담장설치	-	46,640	46,640
	소 계	-	46,640	46,640
관급비자재비		-	400	400
총 계		-	47,040	증) 47,040

※ 단가적용 : 공사계약일반조건 제20조 2항에 의거 계약상대자의 책임 없는 사유로 협의율(84.874%) 적용이 타당함.

○ 감리 검토의견

- 공사로 인해 철거된 광희중학교 담장에 대하여 학교 측 및 주민자치위원회 의견을 반영하여 주변 환경과 조화토록 정비하고 추후 설계 변경시 실 시공 물량대로 정산 반영 조치함이 타당함.

Ⅳ		검토의견 및 조치계획

○ 감리단 보고내용과 같이 광희중학교 및 주민자치위원회 요구사항을 반영한 담장을 설치하는 것이 적정하므로 우선 승인하고, 추후 설계변경시 실 시공 물량대로 정산 반영토록  조치하고자 함.

붙 임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.