교각 구조물 보강 방안 검토

□ 검토 목적

○「하남선 (5호선 연장)1-2공구 건설공사」입출고선 설치공사 중 성토로 인하여 기존지하철 5호선 교량의 교각(P11~P26) 일부가 매립됨으로 인하여 최소피복두께 부족에 따른 보강 방안에 대하여 서울교통공사 협의사항에 대하여 검토코자 함.

□ 성토로 인한 기존 지하철 교각 매립 현황도(예시)

□ 교각구조물 보강 방안 검토

○ 보강공법은 서울교통공사에서 기 시행한 공법과 동일한 단면확대공법 적용

○ 보강범위는 기존 원지반 하단-0.3m에서 성토+0.3m 까지 시행

○ 성토 계획고가 원지반보다 낮은 교각과 피복두께가 8cm이상인 교각(P22, P23)은 보강범위에서 제외.

<보강범위 현황도>

□ 조치계획

○ 보강방안에 대하여 서울교통공사와 협의하여 시행