관련문서	임광(강남)제2014-574호 (2014.12.15)	검토일자	2014.12.
검토건명	교량방호벽난간 및 물빼기공 삭제	검토자	최 용 연

감 리 검 토 의 견 서

□ 개 요

강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사를 수행함에 있어 임광토건(주)로부터 교량 방호벽 난간 및 물빼기공 삭제에 대한 실정보고가 접수되어 적정성 여부를 검토하고자함.

□ 위치도

□ 검토내용

1. 실정보고 경위

. 2014.10.23. : 강교 교량구간 방호벽 및 교면 물빼기공 설계자 의견 요청

. 2014.10.31. : 교량구간 방호벽 및 LMC 교면 물빼기공 설계자 의 견 접수

. 2014. 11.04 : 강교 교량구간 방호벽 및 LMC 포장 교면 물빼기공 실정보고 요청

. 2014.11.26. : 강교 교량구간 방호벽 및 LMC 포장 교면 물빼기공 실정보고 접수

. 2014.12.05. : 강교 교량구간 방호벽 및 LMC 포장 교면 물빼기공 검토결과 통보

. 2014.12.15. : 강교 교량구간 방호벽 및 LMC 포장 교면 물빼기공 삭제보완 접수

2. 실정보고 내용 검토

1) 강교 교량구간 방호벽 및 LMC 교면포장 물빼기공 설계자 의견 요청서 내용

공 종	설계내역(M)		검토 요청내용				비고
			내역서	도면	종합보고서	현장검토
방호벽	본선(직결노선)	749	방호벽+난간	방호벽	방호벽	도면및종합보고서가 적정한 것으로 사료됨
	본선(직결연결노선)	502
	소하JCT UPRAMP	939
	소하JCT DOWN RAMP-A	1,094
	소하JCT DOWN RAMP-B	771
	소계	4,055
교면 물빼기공	본선(직결노선)	1,329	포함	포함	-	LMC포장과 ASPHALT 포장 단면도 검토 결과 LMC 포장에는 교면 물빼기공 없음
	본선(직결연결노선)	528
	소하JCT UPRAMP	504
	소하JCT DOWN RAMP-A	643
	소하JCT DOWN RAMP-B	201
	소계	3,205

2) 설계자 검토 의견 내용

. 감리현장 검토의견과 같이 방호벽에 대하여 도면 및 보고서에 나타난 바와같이 시공하는 것이 적정한 것으로 판단됨.

. LMC포장면 물빼기공에 대하여 검토한 결과 콘크리트 포장계역인 LMC포장은 불투수층 포장에 해당되며, 기 시행된 LMC포장의 사례를 참조한 결과 감리 현장 검토 의견과 같이 교면 물빼기공을 별도로 시공하지 않아도 별문제가 없을것으로 판단됨.

3. 설계변경 수량 현황 검토

1) 방호벽 수량 증,감 현황

공 종	단위	당초		변경		증.감	비고
		규격	수량	규격	수량
본선(직결노선)	m	방호벽+난간	749	방호벽	749	-
본선(직결연결노선)	m		502		502	-
소하JCT UPRAMP	m		939		939	-
소하JCT DOWNRAMP-A	m		1,094		1,094	-
소하JCT DOWNRAMP-B	m		771		771	-
소 계			4,055		4,055	-

2) 교면포장 물빼기공 수량 증,감 현황

공 종	단위	당초		변경		증.감	비고
		규격	수량	규격	수량
본선(직결노선)	m	유공관 (D=10mm)	1,329	유공관 (D=10mm)	-	1,329
본선(직결연결노선)	m		528		-	528
소하JCT UPRAMP	m		504		-	504
소하JCT DOWNRAMP-A	m		643		-	643
소하JCT DOWNRAMP-B	m		201		-	201
소 계			3,205		-	3,205

3. 신규단가 검토

⦁방호벽 신규 설계단가 86,182원에 강남순환4공구 협의율 82.25% 적용

단위:원

구 분	단위	설계단가 (원)	낙찰율(%)	도급단가(원)	비고
방호벽	m	86,182	82.25	70,884

4. 공사비 설계변경 현황

비 목	당초	변경	증․(감)	비고
총 공 사 비	1,128,000,000	363,000,000	-765,000,000
순공사비	892,222,600	287,434,620	-604,787,980
방호벽(방호벽+난간)	860,576,430	-	-860,576,430
방호벽(방호벽)	-	287,434,620	287,434,620
교면물빼기공	31,646,170	-	-31,646,170
제 잡 비	235,777,400	75,565,380	-160,212,020

□ 검토의견

⦁ 상기와 같이 검토한 결과 교량방호벽 난간 및 물빼기공 삭제 실정보고는 타당하다고 사료되며

확 인 자	강남순환도시고속도로(4공구) 전면책임감리용역 책 임 감 리 원 장 경 식 (인)

⦁ 위의 실정보고 사항에 대해서는 추후 설계변경 시 정산 반영하고자 함.