교면 측구배수로 개선(안)

1. 공사개요

2. 교면배수 개선시공 진행현황 및 개선방향

3. 측구 배수로 개선 내용

4. 측구 배수로 개선 시공현황 및 타현장 시공사례

1.공사개요

◈ 공 사 명 :	노량교 교면포장 개량공사(장기계속)-남부
◈ 총공사비 :	일금 사십팔업사천사백팔십구만원정 (￦4,844,890,000)
◈ 2차공사비 :	일금 일십육억팔천팔백오십만칠천칠백원정 (￦1,688,507,700)
◈ 총공사기간 :	2013.09.24 ~ 2016.09.22
◈ 금차공사기간 :	2014.07.15 ~ 2015.02.28
◈ 발주부서 :	서울특별시 남부도로사업소 : 차 식 환 (☎ 3284-5436)
◈ 감 독 처 :	서울특별시 시설관리공단 : 박 민 현 (☎ 2290-6937)
◈ 도 급 사 :	㈜유진컨스트택 대표 : 이 귀 천 홍용종합건설(주) 대표 : 이 춘 택

2.교면배수 개선시공 진행현황 및 개선방향

1. 교면배수 개선시공 진행현황

▷노량교 교면배수 개선방안 제안 (진단본부-3000, 2013.10.21.)

▷노량교 교면배수 개선반안 작업지시(교량보수과, 2013.10.22.)

▷노량교 교면포장 2차 착공 회의시 추가 개선방향 협의(2014.8.19)

2. 개선 방향 내용.

▷1차 개선방향 시공시 문제점

- 측구배수로에 토사 및 쓰레기 적체되고, 청소곤란(청소차량 세척솔 미접근)

- 방수재가 대기상에 노출되어 산화진행 발생 우려(향후 유지보수 필요 예상)

▷대 책 : 배수로 깊이조정에 따른 토사적치 방지(청소원활) 및 방수재 보호.

(당초 : 방수층 마무리 => 변경 : 1개층 포장(t=4cm)마무리)

3.측구 배수로 개선 내용

○ 측구수로 부분 아스팔트포장 변경.(두께변경 포함 : t=0cm => t=4cm)

당초 개선시공	변경 개선시공(안)

4.측구 배수로 개선 시공현황 및 타현장 시공사례

○ 당초 측구 시공현황(노량교 시공현황)

배수로 시공현황(원경)	배수로 시공현황(원경)
배수로 설치현황(토사 및 잔재물 적치, 근경)	배수로 설치현황(토사 및 잔재물 적치, 근경)

○ 타현장 측구 개선 시공현황

내부순환로(홍제천고가) 배수구 시공현황	내부순환로(홍제천고가) 배수구 시공현황