2-4-9		청소년을 위한 과학관 건립

□  사업개요

○ 건립위치 : 서울시 노원구 한글비석로 168 일대

○ 건립규모 : 연면적 12,330.81㎡(지하 1층, 지상 3층)

○ 총사업비 : 43,474백만원 (국비 70%, 시비 30%)

○ 사업기간 : 2011년 ～ 2016년

□  추진현황(‘15년도)

○ ’15. 02.28 : 지하층 공사완료

○ ’15. 09.14 : 전시설계 착수

※ ’15. 12월 현재 : 내 외부 건축 마감공사중

	자체평가결과
□ 평가결과 : 정상 ○ 현재 골조 공사완료후 내·외부 건축 마감공사 진행중이며 전시설계 진행중

□  문제점 및 개선대책

○ 공사 과정중 각종 설계변경 요인 발생에 따른 추가예산 확보 필요

－  중앙부처와 총사업비 변경 협의를 통하여 추가예산 확보 등 추진

□  추진계획(‘16년도)

○ 전시물 제작설치 착수                             : ’16. 03

○ 건축공사 완료                                    : ’16. 05

○ 전시물 제작설치 완료                             : ’16. 09

□ 연차별 추진계획

주요내용		2014(실적/계획)	2015	2016	2017
서울과학관 건립	목 표	지하층 공사/골조공사	골조공사 (당초 마감공사)	공사완료	개관 및 운영
	소요예산(백만원) (국비)	5,714 /5,714 (4,000)/(4,000)	11,460 (8,000) [당초 23,010 (15,959)]	8,293 (5,557)	5,700 ( - )

작 성 자	경제정책과장 :이해우 ☎ 2133-5210 산업기반팀장 : 김국진 ☎ 5237 담당 : 이종권 ☎ 5239