2-4-9		청소년을 위한 과학관 건립

□  사업개요

○ 건립위치 : 서울시 노원구 한글비석로 168 일대

○ 건립규모 : 연면적 12,330.81㎡(지하 1층, 지상 3층)

○ 총사업비 : 47,076백만원 (국비 70%, 시비 30%)

○ 사업기간 : 2011년 ～ 2016년

□  추진실적(‘15년 상반기)

○ ’15. 02.28 : 지하층 공사완료

○ ’15. 05.28 : 전시 제안서 평가

※ ’15. 7월 현재 : 지상3층 골조 공사중

	자체평가결과
□ 평가결과 : 정상 ○ 현재 지상3층 골조 공사진행중으로 정상적으로 공사진행 중임

□  문제점 및 개선대책

○ 공사 과정중 각종 설계변경 요인 발생에 따른 추가예산 확보 필요

－  중앙부처와 총사업비 변경 협의를 통하여 추가예산 확보 등 추진

□  추진계획(‘15년 하반기)

○ 전시설계 및 제작·설치 업체 선정                 : ’15.08

○ 전시설계 완료                                   : ’15.12

□ 연차별 추진계획

사 업 명	구 분	2014년 (실적/계획)	2015년 (상반기실적/계획)	2016년	2017년
서울시립 과학관건립	청소년을 위한 과학관건립	지하층 골조완료/ 건축골조 공사완료	2층 골조공사완료/ 건축공사완료	공사완료 과학관 개관	운영
	소요예산(백만원)	2,300/19,113	11,260	8,293	5,000

작 성 자	경제정책과장 :이해우 ☎ 2133-5210 산업기반팀장 : 김국진 ☎ 5237 담당 : 이종권 ☎ 5239