- 2016년 발생한 교통사고 다발 어린이보호구역 -

합동점검 결과 세부 정비계획

2017. 8.

서울특별시

(보행정책과)

- 교통사고다발 어린이보호구역 -

민･관 합동점검결과 세부 정비계획

Ⅰ		정비계획 총괄

연번	위치			조치내용	소요금액	완료(예정)
	시도	시군구	어린이 보호구역
1	서울시	구로구	신구로초교	과속방지턱 높임 보행자용 방호울타리 설치(연결)	25백만원	’17. 11월
2	〃	종로구	창신초교	・속도저감시설 ・무단횡단 금지시설 2개소 ・횡단보도 재도색	26백만원	’17. 12월
3	〃	강북구	수유초교	• 고원식교차로 유색포장 신설 등	3백만원	’17. 9월
4	〃	강동구	길동초교	주거지 주차면 삭선, 보호구역 통합표지 설치, 고원식 교차로 설치 등	3.5백만원	’18. 3월
5	〃	관악구	애동 유치원	- 통합표지(#324,#224) 설치 - 일시정지 안전표지(#227) 및 노면표시(#521) 설치 - 노면표시 단선으로 변경	3.5백만원	’17. 12월
6	〃	동작구	중대부속초등학교	교통신호기 이설 및 교통안전표지판(#322) 설치	8.2백만원	’18. 5월
7	〃	성북구	미아초교	속도단속카메라신설 등	18백만원	’17. 10월
8	〃	성북구	장위초교	보행자 신호등 설치 등		’17. 12월
9	〃	은평구	유진 유치원	교통안전시설 설치	18백만원	’18. 12월
				도로안전시설 정비	6백만원	’17. 12월

Ⅱ		어린이 보호구역별 세부 정비계획

1	신구로초등학교

ㅇ 시설 개요

연 번	1	대상학교	신구로초등학교
주 소	구로구 가마산로27길 69				관리기관	구로구청
						구로경찰서
시설규모	28학급				수용 인원	605명
점검일자	2017. 07. 04.			어린이사고 발생현황		발생	사망	부상
점 검 자	구로구청 조용상,송수정,한세라, 구로경찰서 김여수, 도로교통공단 서울지부 강수철,김중배,황정현					2	0	2

ㅇ 지적사항 정비계획

개선안 집계표	계	도로구조	도로안전시설	교통안전시설
개선안 (개소)	2			2
소요예산 (백만원)	2.5			2.5

ㅇ 세부 조치내용

연번	문제점 요지	위치	정비계획
1-1	과속방지턱이 낮아 속도저감 기능 저하	구로구 가마산로27길 아스타빌 아파트 앞	과속방지턱 높임
1-2	방호울타리 미설치	구로구 가마산로27길 아스타빌 아파트 앞	방호울타리 설치

ㅇ 소요금액 : 2.5백만원

- 산출근거

□과속방지턱 높이 상향 조정 : 1.5백만원

□보행자용 방호울타리 관급자재 구매 : 1백만원(6m x 152,000원)

- 재원조달방안 :  자체 정비예산 활용

❖ 아래 세가지 유형 중 해당사항 기재

① 자체 정비예산 활용 ② ’17년 보호구역 집행잔액 활용 ③ ’18년 보호구역 개선사업 반영

※ ’18년 보호구역 개선사업 반영은 도로구조 개선 등 예산이 많이 소요되거나 관계기관 및 지역 주민 의견 수렴 등으로 기간이 많이 소요되는 경우에 한함

❖ 두 가지 이상이 중복될 경우, 소요 재원을 구분하여 기재

자체 정비예산 활용 000백만원, ‘17년 보호구역 집행잔액 000백만원

ㅇ 추진일정

- ‘17. 08.  : 관급자재 구매(보행자 방호울타리) 및 과속방지턱 작업지시

- ‘17. 09.  : 보행자 방호울타리 설치 완료

- ‘17. 11.  : 과속방지턱 설치 완료

2	창신 초등학교

ㅇ 시설 개요

연 번	2	대상학교	창신초등학교
주 소	서울 종로구 창신동 지봉로 73				관리기관	종로구청
						혜화경찰서
시설규모	30학급				수용 인원	619명
점검일자	2017. 07. 03.			어린이사고 발생현황		발생	사망	부상
점 검 자	국민안전처 강석도, 서울시 손준호, 혜화경찰서 주현, 종로구청 이대섭, 도로교통공단 강수철, 곽기영, 황정현					2	0	2

ㅇ 지적사항 정비계획

개선안 집계표	계	도로구조	도로안전시설	교통안전시설
개선안 (개소)	4	-	2	2
소요예산 (백만원)	26		6	20

ㅇ 세부 조치내용

연번	문제점 요지	위치	정비계획
1-1	어린이보호구역내 속도저감시설 부족	종로구지봉로73 창신초등학교 정문	・과속경보시스템(DFS) 설치
1-2	도로안전시설미비(무단횡지 금지시설)	종로구지봉로73 창신초등학교 정문	・간이중앙분리대 설치 요청 (서울시 북부도로사업소)
1-3	보도간 보행동선 단절	종로구지봉로73 창신초등학교 정문	・횡단보도 재도색(노면표시)
1-4	도로안전시설미비(무단횡지 금지시설)	종로구지봉로73 창신초등학교 정문	・보행자방호울타리 설치

ㅇ 소요금액 :   26백만원

- 산출근거

□과속경보시스템(DFS) : 1개소당 2,000만원

□보행자방호울타리 : 30m × 20만원/m = 600만원

□횡단보도 도색 : 자체 연간단가 활용

- 재원조달방안 :

□과속경보시스템(DFS) : ‘18년 보호구역 개선사업 반영

□보행자방호울타리 : ‘18년 보호구역 개선사업 반영

□횡단보도 도색 : 자체 정비예산 활용

ㅇ 추진일정

- ‘17. 9.월  : 횡단보도 도색 완료

- ‘17. 10.월 : 과속경보시스템, 보행자방호울타리 ’18년 예산반영

ㅇ 지연사유 (연내 정비가 불가능한 경우 기재)

- 과속경보시스템 및 보행자방호 울타리는 별도의 예산편성이 필요한 사업으로, 내년도 사업예산에 반영하여 정비실시

3	수유초등학교

ㅇ 시설 개요

연 번	3	대상학교	수유초등학교
주 소	강북구 삼양로 74길 39				관리기관	강북구청
						강북경찰서
시설규모	36학급				수용 인원	832명
점검일자	2017. 7. 3.			어린이사고 발생현황		발생	사망	부상
점 검 자	국민안전처 강석도, 서울시 손준호, 강북경찰서 천성현, 강북구청 이수환, 도로교통공단 강수철, 곽기영, 황정현					3	0	3

ㅇ 지적사항 정비계획

개선안 집계표	계	도로구조	도로안전시설	교통안전시설
개선안 (개소)	10	0	0	10
소요예산 (백만원)		0	0	3

ㅇ 세부 조치내용

연번	문제점 요지	위치	정비계획
3-1	도로재포장으로 고원식교차로 유색포장 미비	삼양로 74다길 2 수유우리문구	• 고원식교차로 유색포장 신설
3-2	보도간 보행동선 단절	도봉로 69길29 수유마을시장공영주차장	• 횡당보도(노면표시) 신설 • 노상장애물(노면표시) 신설
3-3	노면표시 퇴색으로 속도저감 효과미비	도봉로 67길 34 수유태평양약국	• 어린이보호구역(노면표시) 재도색 • 서행(노면표시) 제거 • 속도제한(노면표시) 신설
3-4	안전표지(어린이보호구역 시점부 및 해제)미비로 운전자 혼란 초래		• 어린이보호구역 시작표지 신설 • 어린이보호구역 해제표지 신설 • 속도(30)해제 표지 신설
3-5	안전표지 위치 부적적로인해 운전자 혼란 초래	도봉로 67길 29 달팽이부동산	• 어린이보호구역 철거

ㅇ 소요금액 : 3백만원

- 산출근거

□2017년 교통안전시설(노면,안전표지) 유지보수 연간단가

- 재원조달방안 :  2017년 어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 사업예산

❖ 아래 세가지 유형 중 해당사항 기재

① 자체 정비예산 활용 ② ’17년 보호구역 집행잔액 활용 ③ ’18년 보호구역 개선사업 반영

※ ’18년 보호구역 개선사업 반영은 도로구조 개선 등 예산이 많이 소요되거나 관계기관 및 지역 주민 의견 수렴 등으로 기간이 많이 소요되는 경우에 한함

❖ 두 가지 이상이 중복될 경우, 소요 재원을 구분하여 기재

자체 정비예산 활용 000백만원, ‘17년 보호구역 집행잔액 000백만원

ㅇ 추진일정

- ‘17. 8.  2. :  작업 지시

- ‘17. 8. 16. :  공사 착수

- ‘17. 8. 18. :  어린이보호구역 안전표지 작업 완료

- ‘17. 9.     :  어린이보호구역 노면표시 작업 예정

ㅇ 지연사유 (연내 정비가 불가능한 경우 기재)

- 없음

4	길동초등학교

ㅇ 시설 개요

연 번	4	대상학교	길동초등학교
주 소	서울시 강동구 양재대로116길 57(길동)				관리기관	강동구청
						강동경찰서
시설규모	40학급				수용 인원	990명
점검일자	2017. 0. 00.			어린이사고 발생현황		발생	사망	부상
점 검 자	강동구청 교통행정과(오병삼, 남승연), 강동경찰서 경비교통과(임택균), 서울시 보행정책과(손준호), 도로교통공단 등					0	0	1

ㅇ 지적사항 정비계획

개선안 집계표	계	도로구조	도로안전시설	교통안전시설
개선안 (개소)	3		1	1
소요예산 (백만원)	3.5		3	0.5

ㅇ 세부 조치내용

연번	문제점 요지	위치	정비계획
1-1	차량 통행속도 감속필요	길동초 후문	고원식교차로 설치(2018.)
1-2	보호구역 안내표지 부족	길동초 후문	보호구역 통합표지 추가설치(2017.11예정)
1-3	교차로 횡단보도 시야 미확보	길동초 후문	주거지주차면 1면 삭선(2017.9.말)

ㅇ 소요금액 :  3,500천원

- 산출근거

□ 고원식 교차로 : 3,000천원

□ 보호구역 통합표지 : 500천원(1개소)

□ 주거지주차면 삭선 : 도시관리공단 협조

- 재원조달방안 : 연간단가

ㅇ 추진일정

- ‘17. 9.~10. : 보호구역 통합표지 및 고원식 교차로 설치 등 관계기관 협의(강동경찰서)

- ‘17. 11. : 보호구역 통합표지 설치

- ‘17. 12. : 고원식 교차로 설계

- ‘18. 3.  : 고원식 교차로 설치

ㅇ 지연사유 (연내 정비가 불가능한 경우 기재)

- 고원식 교차로는 인근 보도 미확보 등으로 인해 횡단보도 삭선 등 추가적인 검토가 필요함에 따라 경찰서와 협의 후 설치가능여부 결정예정

5	애동유치원

ㅇ 시설 개요

연 번	5	대상학교	애동유치원
주 소	관악구 법원단지길 56				관리기관	관악구청
						관악경찰서
시설규모	2학급				수용 인원	명
점검일자	2017. 07. 04.			어린이사고 발생현황		발생	사망	부상
점 검 자	관악구청 김봉호, 관악경찰서 오동환, 도로교통공단 서울지부 강수철					1	1	0

ㅇ 지적사항 정비계획

개선안 집계표	계	도로구조	도로안전시설	교통안전시설
개선안 (개소)	3	-	-	3
소요예산 (백만원)	3.5	-	-	3.5

ㅇ 세부 조치내용

연번	문제점 요지	위치	정비계획
1-1	안전표지(#324,#224통합표지) 미설치	난곡동 법원단지길 벧엘세탁앞	8월29일 교통안전시설 설치심의(관악경찰서)후 9월30일까지 설치예정
1-2	안전표지(#227;일시정지) 및 노면표시(#521;일시정지)	난곡동 법원단지10길 센븐일레븐옆	8월29일 교통안전시설 설치심의(관악경찰서)후 9월30일까지 설치예정
1-3	노면표시 이중설치로 보행자 및 운전자혼란	난곡동 법원단지길 법원종합설비앞	법원단지길 10월 포장공사 예정으로 10월 재도색 예정

ㅇ 소요금액 : 3.5백만원

□ 통합표지(부착형) 1개 : 400,000원

□ 안전표지(정지, 지주형) 1개 노면표시(정지)

- 안전표지 300,000원, 노면표시 1개(40m) 200,000

□ 노면표시(삭선) 200m : 200m × 8,000원 = 1,600,000

- 노면표시(재도색) 200m : 200m × 5,000 = 1,000,000

- 재원조달방안 : 자체 정비예산 활용

❖ 아래 세가지 유형 중 해당사항 기재

① 자체 정비예산 활용 ② ’17년 보호구역 집행잔액 활용 ③ ’18년 보호구역 개선사업 반영

※ ’18년 보호구역 개선사업 반영은 도로구조 개선 등 예산이 많이 소요되거나 관계기관 및 지역 주민 의견 수렴 등으로 기간이 많이 소요되는 경우에 한함

❖ 두 가지 이상이 중복될 경우, 소요 재원을 구분하여 기재

자체 정비예산 활용 000백만원, ‘17년 보호구역 집행잔액 000백만원

ㅇ 추진일정

- ‘17.  8. 29. : 교통안전시설설치 심의위원회(관악경찰서)

- ‘17.  9. 01. : 교통안전시설 설계시행

- ‘17.  9. 04. : 교통안전시설 착수

- ‘17.  9. 30. : 교통안전시설 완료(예정)

- ‘17.  9. 20. : 법원단지길 포장공사 시행 계획 수립

- ‘17. 10. 11. : 법원단지길 포장공사 착수

- ‘17. 10. 30. : 법원단지길 포장공사 완료

ㅇ 지연사유 (연내 정비가 불가능한 경우 기재)

-

6	중대부속초등학교

ㅇ 시설 개요

연 번	6	대상학교	중대부속초등학교
주 소	동작구 서달로 135				관리기관	동작구청
						동작경찰서
시설규모	30개 학급				수용 인원	755명
점검일자	2017. 07. 04.			어린이사고 발생현황		발생	사망	부상
점 검 자	국민안전처 강석도, 서울시 손준호, 경찰청 이동연, 교육부 김미영, 도로교통공단 강수철, 동작경찰서 김태호, 동작구청 이경철					3	0	3

ㅇ 지적사항 정비계획

개선안 집계표	계	도로구조	도로안전시설	교통안전시설
개선안 (개소)	2			2
소요예산 (백만원)	8.2			8.2

ㅇ 세부 조치내용

연번	문제점 요지	위치	정비계획
1-1	신호기 위치 부적합	서달로 중대병원 후문 앞	동작경찰서 교통안전시설물 심의위원회 상정 및 실시설계 완료 후 남부도로사업소 설치
1-2	보도 내 차량진입 금지시설(볼라드)설치	서달로 정의학원 앞	해당지점 볼라드 설치 시 잦은 훼손으로 유지관리에 어려움이 예상되므로 보도침범 차량에 대해 지속적인 주차단속을 통해 차량진입 예방
1-3	안전표지(#322:횡단보도) 미설치	서달로 우리은행 앞	#322횡단보도 표지판 설치완료(‘17.7.15.)

ㅇ 소요금액 :  8.2백만원

- 산출근거

□신호기이설 : 8백만원

□교통안전표지판 1개소 : 0.2백만원

- 재원조달방안 : 신호기 이설은 남부도로사업소 예산으로 시행

교통안전표지판은 자체 정비예산 활용

ㅇ 추진일정

- ‘17. 11월 : 동작경찰서 교통안전시설물 심의위원회 상정

- ‘18.  2월 : 실시설계 완료 및 착공(예정)

- ‘18.  3월 :  완료(예정)

ㅇ 지연사유

- 신호기 이설에 필요한 경찰서 규제심의 및 실시설계 관련 시일이 소요됨에 따라 연내완료 불가

7	미아 초등학교

ㅇ 시설 개요

연 번	6	대상학교	미아초등학교
주 소	서울 성북구 삼양로77				관리기관	성북구청
						성북경찰서
시설규모	48학급				수용 인원	1,243명
점검일자	2017.07.03.			어린이사고 발생현황		발생	사망	부상
점 검 자	국민안전처 강석도, 서울시 손준호 성북경찰서 김민수, 성북구청 구현모 도로교통공단 강수철, 곽기영, 황정현					2	0	2

ㅇ 지적사항 정비계획

개선안 집계표	계	도로구조	도로안전시설	교통안전시설
개선안 (개소)	5	2	1	2
소요예산 (백만원)	18	-	-	1

ㅇ 세부 조치내용

연번	문제점 요지	위치	정비계획
1-1	어린이보호구역내 속도저감시설 미비	삼양로76 대광빌딩	○ 속도단속카메라 신설(장기안) ⇒ “과속경보표지판” 설치 예정 (※ 성북구 예산확보 추진)
1-2	정문앞 속도저감시설 미비	삼양로 77 미아초교 정문앞	○ 고원식 횡단보도 변경 1개소 ⇒ 경사진 도로 기하구조상 고원식 횡단보도 설치 불가. (※ 유관부서 협의 의견)
1-3	도로안전시설 미비 (무단횡단 금지시설)	길음동 1136 디자인뱅크	○ 보행자용 울타리 추가 설치 ⇒ 양측으로 설치 불가 (※ 편측으로 보행자용 울타리 기설치 됨, 양측 설치는 상가 민원 등으로 설치 불가)
1-4	보행공간 미비로 보차사고 우려	삼양로 74 명덕유치원 북측(삼양로12길)	○일방통행 및 보행공간 확보(장기안) ⇒ 일방통행 등 장기 검토 추진 (※ 종암경찰서 의견)
1-5	우회전시 전화박스로 인한 시야불량으로 보차사고 우려	삼양로 88 빠리바게트앞	○전화박스 위치 이전, KT에 요청

ㅇ 소요금액

· 과속경보표지판 설치, 18백만원 소요(市예산 확보)

ㅇ 추진일정

· 과속경보표지판 설치

- ‘17. 10   : 과속경보표지판 설치예정

· 전화박스 이전

- ‘17. 8.~10   : KT 이전 요청 중

ㅇ 지연사유 (연내 정비가 불가능한 경우 기재)

- 고원식 횡단보도 변경

: 경사진 도로 기하구조상 고원식횡단보도 설치 불가

- 보행자 방호울타리 추가설치

: 편측으로 보행자용 울타리 기설치 되어 있으며, 양측 설치는 상가 민원 등으로 설치 불가

- 일방통행 및 보행공간 확보

: 통행체계 변경은 지역 주민들에게 불편을 초래할 수 있는 사항으로 의견수렴 절차 등을 거쳐 종암경찰서에서 장기적으로 검토하여 추진예정

8	장위 초등학교

ㅇ 시설 개요

연 번	7	대상학교	장위초등학교
주 소	서울 장월로8가길 41				관리기관	성북구청
						종암경찰서
시설규모	36학급				수용 인원	832명
점검일자	2017.07.03.			어린이사고 발생현황		발생	사망	부상
점 검 자	국민안전처 강석도, 서울시 손준호 성북경찰서 김민수, 성북구청 구현모 도로교통공단 강수철, 곽기영, 황정현					2	0	2

ㅇ 지적사항 정비계획

개선안 집계표	계	도로구조	도로안전시설	교통안전시설
개선안 (개소)	3	-	1	2
소요예산 (백만원)	-	-	-	-

ㅇ 세부 조치내용

연번	문제점 요지	위치	정비계획
1-1	보행신호등 미비로 보차사고 우려	장위로40길 5 따봉포차	○ 보행자 신호등 설치 (※ `17.08.01 서울지방경찰청 교통안전시설심의 완료)
1-2	가상과속방지턱이 설치되어 감속효과 미비	장위로 131 장위2동새마을금고	○ 원호형 과속방지턱 설치 불가 ⇒ 주변 오래된 노후건물의 피로균열, 소음 민원 등으로 불가 (※ 지자체 도로과 검토 의견)
1-3	보행신호등 미비로 보차사고 우려	장위로 126 장위쇼핑	○ 보행자 신호등 ⇒ 경보등 설치 (※ `17.08.01 서울지방경찰청의 교통안전시설심의 완료)

ㅇ 소요금액

· 보행자 신호등 및 경보등 설치(市 북부도로사업소 시행예정)

ㅇ 추진일정

· 보행자 신호등 및 경보등 설치

- ‘17. 9.~12   : 市 북부도로사업소 시행예정

ㅇ 지연사유

· 원호형 과속방지턱 설치

- 주변의 오래된 노후건물 피로균열 및 소음 관련 민원 등으로 설치 불가