문서번호	도로보수과-2955
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
협조	주무관
	주무관

2014교통사고잦은곳

개 선 공 사 시 행 계 획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5. 22

남부도로사업소

도로보수과

2014년 교통사고 잦은곳 개선공사 추진계획

『서울교통대책 업무보고시 시장 요구사항』에 따라 서울지역 교통사고 사망자 줄이기 대책의 일환으로, 교통사망사고 즉시 대응체계를 구축하여 신속한 합동조사를 통하여 사망사고 지점을 개선토록 요구됨에 따라, 우리도로사업소 관내에서 발생한 『교통사고 잦은곳 개선공사』실시설계 용역결과가 제출․이관되어 아래와 같이 분야별 공종별로 시행·추진에 만전을 기하고자 함.

관련 근거

○ 교통운영과-4946호(2014.03.14) : 교통사망사고지점 시설개선예산 재배정

○ 교통운영과-7515호(2014.04.23) : 교통사고 잦은곳 개선사업 예산 재배정

○ 교통운영과-7554호(2014.04.23) : 교통사고 잦은곳 개선사업 예산 재배정

○ 교통운영과-7699호(2014.04.24) : 교통사고 잦은곳 개선사업 예산 재배정

○ 교통운영과-7974호(2014.04.29) : 교통사고 잦은곳 개선사업 추가 재배정

예산 재배정 현황

○ 재배정예산 : 258,529천원                               단위 : 천원

위 치	총 액	노면표시	도로부속물	교통부속물	비고
신풍시장앞	50,169	12,706		37.463	소통개선
가산동우편취급소~디지털단지오거리	18,500	7,520		10,980	교통사고잦은곳
금천구 독산동길	12,109	12,109
반포쇼핑타운	4,795	4,795
고속터미널앞교차	29,970	3,132	26,838
반포동교차로	52,568	2,972	49,596
이수교차로(도로)	63,165	11,540	51,625
동작구 사당로	5,401	5,401
은천길입구	220	220
관악구청앞교차로	2,402	2,402
한남대교남단기능개선	19,230	19,230
합 계	258,529	82,027	128,059	48,443

○ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통소통및안전관리강화, 도로교통소통개선, 시설비

○ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통소통및안전관리강화, 교통사고잦은곳개선, 시설비

시행상의 문제점

○ 도로교통소통사업 및 교통사고잦은곳 개선공사는 전체 공사비가 분야별 소액으로 종합공정으로 구성되어 있으며, 5개 구청 시도구간에 산재되었으며, 전문공사업으로 별도 발주시 부실 시공업체 난립으로 현장 상황유지 및 유기적인 협조 등 성실시공이 어려운 실정이고

○ 본공사(토목) 및 부대공사가 기관별(시청, 구청)로 시공토록 되어 모든 공종이 동시에 시공되어야 하는 공사임, 따라서 선 작업 후 다음공정이 이루어 질수 있도록 유기적인 협조가 필요함.

예)구청에서 보도정비 등 가각정비 후 신호등이설 후 횡단보도 노면표시작업 및 안내표지판 설치 및 무단횡단 방지시설 설치 등 동시작업

시행상의 문제점 해소방안

○ 도로교통소통개선 및 교통사고 잦은곳 개선공사의 작업물량이 소량으로 5개구 시도에 산재되어 있어 공사 현장 상황유지 및 정밀시공코자 우리도로사업소 연간단가 계약되어 있는 공사에 포함하여 공사 시행함으로서, 현장 공정에 맞추어 적기에 시공함으로서 민원 및 안전사고를 사전에 방지하는 장점이 있음

- 횡단보도 등 노면표시작업 → 2014노면표시일상유지보수공사(연간단가)

- 교통부속물(무단횡단방지시설)설치 → 관급자재 구매(설치)

- 미끄럼방지 등 도로부속물설치 → 2014도로부속물유지보수공사(연간단가)

- 아스팔트 소규모 포장정비 → 2014년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)

공종별 세부추진계획

○ 노면표시 공사------------→ 2014노면표시유지보수공사(연간단가)

- 총사업비 82,027,000원(관급비 포함)

․ 신풍시장 앞 노면표시 : 차선제거 설치 2,110m -------→ 12,706천원

․ 가산동우체국~디지탈오거리 차선설치 1,357m ---------→ 7,520천원

․ 금천구 독산동길 차선 제거설치 1,647m --------------→ 12,109천원

․ 반포쇼핑타운 차선 제거설치 712m --------------------→ 4,795천원

․ 고속터미널 앞 교차로 제거설치 654m -----------------→ 3,132천원

․ 반포동교차로 차선제거 설치 797m --------------------→ 2,972천원

․ 이수교차로 차선 제거설치 1,668m ------------------→ 11,540천원

․ 동작구 사당로 차선 제거설치 1,089m -----------------→ 5,401천원

․ 은천길 입구 차선 제거설치 30m -------------------------→ 220천원

․ 관악구청앞 교차로 차선제거 설치 346m ---------------→ 2,402천원

․ 도시고속도로기능개선(한남대교남단)3,305m-----------→ 19,230천원

○ 도로부속물설치공사 -----→ 2014도로부속물유지보수공사(연간단가)

- 총사업비 128,879,000원

․ 고속터미널 앞 미끄럼방지포장 783㎡  ----------------→ 26,838천원

․ 반포동교차로 미끄럼방지포장 1,174㎡  --------------→  40,206천원

․ 이수교차로미끄럼방지765㎡ 구루빙328㎡ 가드레일30경간

충격흡수시설1개--------------------------------------→ 51,625천원

․ 금천구 가산동우편취급소~디지털단지오거리 충격흡수시설1개,

중앙분리대 현광시설철거 및 설치50m------------------→ 10,210천원

○ 반포동 포장공사 ----------→ 2014도로파손긴급복구공사(연간단가)

- 총사업비 9,390,000원

․ 반포동교차로 포장공사 4.28@ 포장절단109m -------→  9,390천원

○ 교통부속물설치공사 --------------------→ 관급자재구매 (설치)

- 총사업비 37,463,000원

․ 신풍시장앞 무단횡단금지시설 440m  ---------------→  37,463천원

․ 시선유도봉(신풍시장18개, 이수교차로3개)

향후 행정상의 조치

○ 도로교통사고 잦은곳 개선사업은 교통시설물, 도로부속물을 개선하여 재설치하는 공사로서 작업물량이 소량으로 5개구 시도에 11개 사업장으로 산재되어 있어 선행공정에 의한 후임공정이 동시에 이루어져야 하는 특수한 공사임

○ 교통으로 인한 사망사고를 줄이기 위해 조속시공하고 현장 공정에 맞추어 적기에 시공함으로서 민원 및 안전사고를 사전에 방지코자 우리사업소에 연간단가공사 사업으로 추진중인 공사에 포함하여 선 작업지시하고 추후에 정산 시행하고자 함

【 공사장별 포함될 공종시행 현황】

- 2014노면표시일상유지보수공사(연간단가)

→ 횡단보도 등 노면표시작업

- 2014도로부속물유지보수공사(연간단가)

→ 미끄럼방지 등 도로부속물설치

- 2014년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)

→ 아스팔트 소규모 포장정비

- 교통부속물(무단횡단방지시설)설치

→ 관급자재 구매(설치)

붙임 : 1 . 사업비 재배정 통보 공문 1부.

2. 공사대상 위치도 및 설계도서1부.(별도 붙임).   끝.