교통소통대책 변경 내역

□ 변경내용

◯ 공사기간 변경

구 분	단 계	공사내용	공사기간		비고 (도로점용)
			변경전	변경후
L10E환기구 (아리랑고개)	1단계	복공판철거 지장물 복구 포장 환기덕트 설치	2015.10.01. ~2015.12.10 (71일간)	2015.10.01. ~2016.02.10 (133일간)	성신여대 방면 1개차로 및 보도(9.3m)
L11정거장(성신여대)	1단계	복공판철거 환기덕트 설치 2번 출입구 복구	2015.07.21. ~2015.07.25 (5일간)	2015.07.21. ~2015.12.14 (147일간)	교차로내부 점용
	2단계	복공판철거 지장물 복구 포장	2015.07.26. ~2015.08.14 (20일간)	2015.12.15. ~2016.01.03 (20일간)	도로 중앙부 점용(8.0m)
	3단계	복공판철거 지장물 복구 포장 2번 출입구 복구 및 보도 복구	2015.08.15. ~2015.11.12 (90일간)	2016.01.04. ~2016.04.02 (90일간)	정릉방면 보도 및 차로 점용(8.0m)
	4단계	복공판철거 지장물 복구 포장	2015.11.13. ~2016.01.01 (50일간)	2016.04.03. ~2016.05.22 (50일간)	신설동역방면 보도 및 차로 점용(8.3m)
	5단계	복공판철거 지장물 복구 포장	2016.01.02. ~2016.01.21 (20일간)	2016.05.23. ~2016.06.11 (20일간)	교차로 내 가각부

구 분	단 계	공사내용	공사기간		비고 (도로점용)
			변경전	변경후
L11E환기구 (경동고 사거리)	1단계	복공판철거 지장물 복구 포장 환기덕트 설치	2015.09.01. ~2015.09.20 (20일간)	2015.09.01. ~2015.11.20 (81일간)	교차로 내부점용(신설동역 방면)
	2-1단계	복공판철거 지장물 복구 포장	2015.09.21. ~2015.10.05 (15일간)	2015.11.21. ~2015.12.05 (15일간)	교차로 내부점용(신설동역 방면)
	2-2단계	복공판철거 지장물 복구 포장	2015.10.06. ~2015.10.10 (5일간)	2015.12.06. ~2015.12.10 (5일간)	교차로 내부점용(신설동역 방면)
	3단계	복공판철거 지장물 복구 포장	2015.10.11. ~2015.10.30 (20일간)	2015.12.11. ~2015.12.30 (20일간)	교차로 내부점용
	4단계	복공판철거 지장물 복구 포장	2015.10.31.. ~2015.11.19 (20일간)	2015.12.31. ~2016.01.19 (20일간)	교차로 내부점용
L12정거장(보문역)	1단계	복공판 철거 출입구 복구 환기덕트 설치	2015.08.01.. ~2015.08.31 (31일간)	2015.08.01. ~2015.09.30 (61일간)	도로중앙 1개차로 점용(9.3m)
	2단계	복공판 철거 기존 지장물, 출입구 복구	2015.09.01.. ~2015.10.31 (61일간)	2015.10.01. ~2015.11.30 (61일간)	정릉방면 1개차로 점용(7.5m)
	3단계	복공판 철거 환기구, 엘리베이터 설치	2015.11.01.. ~2016.04.23 (175일간)	2015.12.01. ~2016.05.23 (175일간)	신설동역 방면 1개차로 및 보도 (5.5m)
	4단계	주형보 철거 지장물 복구	2016.04.24.. ~2016.04.30 (7일간)	2016.05.24. ~2016.05.30 (7일간)	신설동역 방면 1개차로 및 보도 (8.7m)

구 분	단 계	공사내용	공사기간		비고 (도로점용)
			변경전	변경후
L12E환기구 (동대문 세무서 별관)	1단계	복공판철거 지장물 복구 포장 환기덕트 설치 동대문 세무서 화단 복구	2015.06.01. ~2015.06.30 (30일간)	2015.06.01. ~2015.07.31 (61일간)	정릉방면 1개차로 및 보도(8.2m)
	2단계	복공판철거 지장물 복구 포장	2015.07.01. ~2015.07.20 (20일간)	2015.08.01. ~2015.08.20 (20일간)	중앙부 1개차로(7.5m)
	3단계	복공판철거	2015.07.20. ~2015.08.19 (30일간)	2015.08.21. ~2015.09.19 (30일간)	신설동방면 1개차로 및 보도(7.3m)