㈜도화엔지니어링외 1개사	감 리 검 토 의 견 서	2015. 02.
공 사 명	구리암사대교연결도로건설공사	작성자 : 곽경표
검 토 건 명	교통신호기공사 검토

1. 검토사유

본선 2구간(정수장사거리～훈련원사거리) 교통처리계획에 대한 경찰청 교통규제 심의결과에 의하여 교통신호기 설치공사를 검토함

o 관련근거 : 교통관리과-30192(2014.10.30)

신성암사 제2015-16(2015.01.19)

o 위치도

2. 검토내용

가. 수량검토

내용	수량			비 고
	당초	변경	증,감
제어기완성품	-	1대	증)1대	공사중 교통처리계획에 대한 규제심의에 따른 반영 및 현장조사에 의한 물량 반영
제어기 부분품	-	6EA	증)6EA
아스팔트횡단굴착 1.2M (야간)	-	31m	증)31m
아스팔트횡단굴착 0.8M	-	25m	증)25m

내용	수량			비고
	당초	변경	증감
소형고압블럭 굴착배관	-	255m	증)255m	공사중 교통처리계획에 대한 규제심의에 따른 반영 및 현장조사에 의한 물량 반영
전선관 PE 54mm 1열 지중	-	47m	증)47m
전선관 PE 100mm 2열 지중	-	217m	증)217m
전선관 PE 100mm 2열 지중(야간)	-	31	증)31
차량등 LED 1면4색	-	4조	증)4조
차량등 LED 1면3색	-	10조	증)10조
차량신호등 이설 LED 1면3,4색	-	14조	증)14조
보행신호등,잔여표시기 (1면2색)	-	4조	증)4조
보행신호등,잔여표시기 이설 (1면2색)	-	7조	증)7조
디자인 차량신호등주(단방향) Φ300 × 8.5m	-	1본	증)1본
디자인 차량신호등주(단방향) Φ250 × 8.5m	-	3본	증)3본
디자인 차량신호등주(단방향) Φ200 × 8.5m	-	3본	증)3본
디자인 보행신호등주(단방향) Φ125 × 4m	-	1본	증)1본
디자인 지주부착대 13M	-	1본	증)1본
디자인 지주부착대 11M	-	3본	증)3본
디자인 지주부착대 6M	-	3본	증)3본
맨홀 600x600x800mm	-	4본	증)4본
맨홀 800x800x800mm	-	8본	증)8본

나. 공사비증감 검토

공 종	당초	변경			비 고
		1안 설계가 (100%)	2안 협의율 (90.403%)	3안 낙찰율 (80.405%)
1. 직접공사비	-	127,790	115,269	102,750
2. 제 경 비	-	43,440	39,233	34,971
3. 설 계 비	-	12,447	12,447	12,447
4. 감 리 비	-	10,168	10,168	10,168
5. 이 전 비	-	519	519	519
공 급 가 액	-	194,364	177,636	160,855
부가가치세	-	19,436	17,764	16,085
도급공사비	-	213,800	195,400	176,940
시공사요구안		◎

3. 결론

☐ 본선 2구간(정수장사거리～훈련원사거리) 교통처리계획의 경찰청 교통규제 심의결과에 의       하여 신호기 이설 및 설치공사로서

☐ 단가적용은 협의결과에 따른 단가로 공사비를 산정하여야 하며

☐ 관련부서인 발주처 설비부서의 검토와 심의를 거쳐 확정된 공사비증액은 추후 설계변경시        반영하고자 함.

붙임 : 시공사 관련공문 사본 1부

암사대교건설공사 외1건

통합전면책임감리용역

책임감리원 우 재 경