하자제로 품질만족 불신제로 고객감동
		서울특별시 SH공사
수신	강서도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사 기간연장(신정4 보금자리)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전과 번영을 기원하오며, 서울지방경찰청 교통관리과-8305호(2016.03.30), 서울특별시 강서도로사업소 기전과-5766호(2016.05.04)와 관련입니다.

2. 교통안전 시설물 원인자 부담공사를 아래 내용과 같이 기간연장 하고자 하오니 처리(협조)하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

가. 공 사 명 : 신정4 보금자리주택지구 아파트 및 택지조성 전기공사

나. 공사 기간: 승인일로부터 ~ 2016.08.01

공사기간 연장	당초 공사기간 : 승인일로부터 ~ 2016.08.01
	변경 공사기간 : 승인일로부터 ~ 2016.08.31

다. 위    치 : 서울시 양천구 신정동 831번지 일원

라. 원 인 자 : 서울특별시 SH공사 전기공사부

마. 시 공 사 : (유)일석

바. 연기사유 : 토목공사 지연에 따른 공사기간 연장. 끝.

							서울특별시 SH공사 사장
부 원										파트장										부장
협조자
시행			전기공사부-2993									(	2016.08.01.					)		접수			기전과-9922								(	2016.8.2.					)
우	06336					서울특별시 강남구 개포로 621 SH공사 10층 전기공사부															/			www.i-sh.co.kr
전화		02-3410-8981						/전송			02-3410-8993					/	myk192@i-sh.co.kr												/	대시민공개