문서번호	토목부-4251
결재일자	2016.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	터널건설과장	토목부장

교통안전시설 개선사항 등 검토 보고

(서울역 주변 교차로 개선공사)

2016. 3.

도시기반시설본부

(토목부)

교통안전시설물 개선사항 등 검토 보고

(서울역주변 교차로 개선공사)

서울역주변 교차로개선공사와 관련, 교통안전시설물 개선(보완)요청 및 민원사항에 대한 검토 결과 보고임.

Ⅰ		관련 근거

○ 교통운영과-1589(2016.1.27.):서울역주변 교차로 개선공사 관련 교통안전시설물 개선 설치요청

○ 교통운영과-3127(2016.2.19.):서울역주변 교차로 개선공사 관련 교통안전시설물 개선 설치요청

○ 용산구토목과-2192(2016.2.8.):숙대입구 교차로 개선공사 관련 저지대 노면수 유입 차단 민원

○ 교통운영과- 3688(2016.3.2.):서울역주변교차로개선공사 관련 회의참석

Ⅱ		공사 개요

○ 위 치 : 서울역 주변 교차로 등 4개소

○ 규 모 : 교차로 및 가로 개선(서울역, 염천교, 중림동, 숙대입구)

○ 사업비: 2,011백만원

○ 기 간 : 2015.8.7.∼ 2016.5.31.

○ 도급사: 유호산업개발(주)

○ 공정율: 85%

Ⅲ		검토 사항

○ 서울지방경찰청 교통안전시설 개선(보완) 사항

- 서울역교차로,염천교교차로 등 교통소통개선과 사고예방을 위한

교통안전시설 개선 및 보완 요청사항 설계반영

- 교차로별 추가분 세부내역

위 치	개선 및 보완사항		소요예산
염천교 교차로	개선	① 노면표시 변경(8개소)	26,154,000원
		ㆍ 시청, 서울역 → 명동, 퇴계로
		ㆍ 용산 → 공덕동, 경찰청 추가 등
		② 차로안내표지판 설치
	보완	③ 노면표시 신설(칠패로→ 통일로방면)	710,000원
		ㆍ 우회전→ 직·우공용차로변경
		④ 교차로내 유도선 신설 4개소
	소계		26,864,000원
서울역 교차로	개선	① 보조표지 신설(3개소)	91,122,000원
		② 노면표시 문자기호 변경(1개소)
		③ 차로안내표지판 교체
		④ 염천교방향 노면표시수정 및 표시설치
		⑤ 숭례문→염천교우회전 노면표시 수정(2개소)
		⑥ 서울역→염천교 죄회전 차로증설
	보완	① 표지판 위치조정(1개소)	16,579,000원
		② 유도선 신설
		③ 노면표시 문자기호변경(7개소)
		④ 퇴계로 버스전용차로해체 및 차로재구획
		⑤ 버스전용안내표지판이설(1개소), 철거(1개소)
		⑥ 차로규제봉 설치(8m)
		⑦ 남대문경찰서 차로개선(중앙선,안전지대 등)
	소계		107,701,000원

○ 숙대입구 교차로 저지대 침수민원에 따른 중앙분리대(경계석) 인상

위 치	민원사항 처리방안	소요예산
숙대입구 교차로	기존녹지대를 철거하고 중앙분리대 1단 경계석으로 설치하여 저지대로 노면수 유입되니 경계석을 높여 침수피해 예방하고자 함 (2단 경계석 설치)	21,002,000원

○ 서울역 교차로 전면 재포장후 임시차선 도색 등

위 치	문제점 및 사고예방 대책	소요예산
서울역 교차로	교통신호기 지중화 공사 후 아스콘 평삭 및 전면재포장공사후 본 차선 융착식 도색전까지 교통사고예방하기 위해 임시차선 도색 (상온형페인트)	9,042,000원

Ⅳ		소요 확보방안

○ 소요예산 : 164,600천원

- 확보방안 : 교통운영과 소요예산 확보 협조요청

Ⅴ		조치계획

○ 서울지방경찰청 교통안전시설물 개선(보완)사항 등에 대해 대하여는 예산확보 후 도급자로 하여금 선 시공토록 하고, 추후 설계변경 심의후 본공사에 설계변경 반영 하고자 함

Ⅵ		향후계획

○ 2016. 3.  ∼ 3. 31.  : 서울역교차로 신호기 지중화(설비부 시행)

○ 2016. 3. ∼  5. 20. : 염천교교차로, 서울역교차로, 숙대앞교차로

추가 개선 및 보완공사

○ 2016. 4.  ∼ 4. 30. : 서울역교차로 아스콘 평삭 및 재포장

붙임 : 1) 교통운영과 개선(보완) 요청사항 공문 및 도면 각 1부.

2) 용산구 민원사항 공문 및 현장사진 1부.

3) 추가 공사비 산출내역서 1부.  끝.