도로기전시설물 일상유지보수공사

(글로브 세척작업)

교통처리계획

2015.  4

북부도로사업소

(기 전 과)

제1장 사업의 개요

1. 일반사항

1) 세척목적 : 차량통행에 의한 매연, 먼지 등으로 더러워진 터널 및 지하차도 조명                    등기구에 대한 세척을 실시하여 밝고 쾌적한 도시환경을 유지

2) 세척개요 : 자하문터널 등 10개소, 등기구 2,876개 대상

터널명	둥종별	개수	터널명	둥종별	개수
자하문	상∙하행 FL32W/3등용	333	삼청	상∙하행 NH250W	313
사직	상행 NH250W 하행 NH250W 교행 NH250W	24 124 157	공릉	상∙하행 NH250W	509
동망봉	상행 NH250W NH150W 하행 NH250W NH150W	312 90 312 90	솔샘	상∙하행 NH250W	318
지하차도명	둥종별	개수	지하차도명	둥종별	개수
솔샘지하차도	상행 NH250W 하행 BL160W	20 20	하계지하차도	상∙하행 NH250W 가로등CDM250W	147 32
월계지하차도	상∙하행 NH250W 가로등CDM250W	34 33	월계2지하차도	상∙하행 NH250W 가로등CDM250W	84 24

3) 세척기간

2015.  5. 6 ~ 2015.  5. 20(예정)

2. 교통처리방안

1) 공사현장에 공사 안내판을 전후에 설치하고, 교통안전 표지판 및 휀스를

설치하여 교통안전사고 발생을 예방한다.

2) 라바콘을 설치하여 차선변경 시 차량을 유도하고, 사고방지 조치를 한다.

3) 자체 교통정리원을 배치하여 교통소통과 보행자 통행에 지장이 없도록 한다.

4) 공사현장의 자재 등을 방치하지 않고 점용면적을 최소화하며, 도로를

불결하게 하는 일이 없도록 한다.

3. 교통관리계획 요약

공 사 명	2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사 (연간단가)	공 사 시 행 처	서울시 북부도로사업소
공사세부사항	터널 및 지하차도 조명등 글로브 세척공사
감독부서	기전과	담당자 및 전화번호	백윤광 02-944-5473
주 소	서울시 강북구 한천로 913(번2동 365-1)
시 공 사	(주)청호파워텍 이 순 형	담당자 및 전화번호	현장대리인 박용락 ************* 소장 이민용 *************
주 소	서울특별시 서초구 언남로 17길2(양재동)
대상도로	자하문, 삼청, 사직, 공릉, 동망봉, 솔샘터널(6개소) 하계,월계,월계2,솔샘지하차도 (4개소)	차 로 수	1차로(부분통제),교행차로
점용기간	2015. 5. 6 ~ 5. 20(15일간)	점 용 시 간	야 간 23:00～익일 05:00
공사기간	14일	비 고

4. 작업공정계획

위 치	야 간 공 사		비 고
공릉터널	2015.5.6 ~ 5.7(수~목)	23:00～05:00	세부일정 수립중
사직터널	2015.5.8 ~ 5.9(금~토)	23:00～05:00	세부일정 수립중
삼청터널	2015.5.10 ~ 5.11(일~월)	23:00～05:00	세부일정 수립중
동망봉터널	2015.5.11 ~ 5.12(월~화)	23:00～05:00	세부일정 수립중
자하문터널	2015.5.12 ~ 5.13(화~수)	23:00～05:00	세부일정 수립중
솔샘터널	2015.5.14 ~ 5.16(목~토)	23:00～05:00	세부일정 수립중
솔샘지하차도	2015.5.14 ~ 5.16(목~토)	23:00～05:00	세부일정 수립중
하계지하차도	2015.5.17. ~ 5.18(일~월)	23:00～05:00	세부일정 수립중
월계지하차도	2015.5.19. ~ 5.20(화~수)	23:00～05:00	세부일정 수립중
월계2지하차도	2015.5.19. ~ 5.20(화~수)	23:00～05:00	세부일정 수립중

5. 문제점 및 개선방안

1) 차도점용에 따른 차로 폭 조정

2) 차로통제에 따른 공사 전 주요지점에 공사안내표지판을 설치하고 차로구간에        차량유도장치를 설치하고 차량상충이 예상되는 지점에는 교통유도원(통제수)을       배치하여 교통소통 및 안전에 만전을 기함.

6. 공사안내 현수막 게첨계획

1) 현수막 설치개소

- 터    널 : 자하문, 삼청, 사직, 공릉, 동망봉, 솔샘

지하차도 : 하계, 솔샘, 월계1, 월계2

2) 게첨시기 : 2015. 5. 6 - 2015. 5. 20

3) 현수막 내용

◈ 현수막 설치 형태 ◈

	본 공사는 서울시 북부도로사업소에서 시행하는 청소 및 보수 공사입니다. 불편하신 사항은 아래로 연락주시기 바랍니다. 공사감독:기전과 백윤광 944-5473, 시공사:청호파워텍 소장 이민용 *************

▣ 바탕 : 흰색, 글씨 : 검정색( 1m × 5m )

-공사는 성실하게 주변은 깨끗하게-

공   사   안   내

공 사 명 : 2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사-북부

공사기간 : 2015. 5.  ～ 2015. 12.

시 공 자 : (주)청호파워텍  이 순 형

현장소장  이민용(*************)

발 주 청 : 서울특별시 북부도로사업소

공사감독 : 서울특별시 북부도로사업소

기전과  백윤광(944-5473)

<공사 중 통행에 불편을 드려 죄송합니다.>

서울특별시 북부도로사업소

▨ 공사예고표지판(운전자용)(900×1800)

문안 및 규격

제원 및 크기

①전방100m

②공사중

구분

색상

크기(높이:mm

B형

①

청색

180

②

녹색

140

③

청색

110

바탕

흰색

설치지점 및 방법

○ 도시고속도로,간선 및 보조간선도로,집산 및 국지도로 : 도로공사장 교통안내표지판 설치 순서 참조

▨ 공사예고표지판(900×1800)

문안 및 규격

제원 및 크기

①공사안내

②전방 00m

구분

색상

크기(높이:mm)

B형

①

청색

250

②

흑색

250

공사장

적색

110

지시선

적색

110

차선

흑색

100

바탕

황색

설치지점 및 방법

○  보조간선도로,집산 및 국지도로 :    도로공사장 교통안내표지판 설치 순서   참조

▨ 우회도로예고표지판(운전자)(900×1800)

문안 및 규격

제원 및 크기

①전방00m

②00공사중

구분

색상

크기(높이:mm)

B형

①

흑색

300

②

청색

250

바탕

흰색

설치지점 및 방법

○ 도시고속도로,간선 및 보조간선도로,집산 및 국지도로 : 도로공사장 교통안내표지판 설치 순서 참조

문안 및 규격

제원 및 크기

①공사안내

②전방00m공사중

③2015년12월   일 까지

시행청:

북부도로사업소

구분

색상

크기(높이:mm)

B형

①

청색

200

②

흑색

200

③

적색

180

④

흑색

120

⑤

흑색

100

바탕

흰색

설치지점 및 방법

○ 도시고속도로,간선 및 보조간선도로,집산 및 국지도로 : 도로공사장 교통안내표지판 설치 순서 참조

▨ 공사안내표지판(운전자)(900×1800)

6. 교통통제 계획도

공사구간 교통관리 및 안전시설 설치 예시도

(* 공사현장의 도로를 차선까지 표시하고 안전표지판을 설치한 상세한 도면)

자하문터널 위치도

전 경 사 진

동망봉터널 위치도

전 경 사 진

사직터널 위치도

전 경 사 진

공릉터널 위치도

전 경 사 진

솔샘터널 위치도

전 경 사 진

삼청터널 위치도

전 경 사 진

하계지하차도 위치도

전 경 사 진

월계지하차도 위치도

전 경 사 진

월계2지하차도 위치도

전 경 사 진