광화문광장 일대 문화재 시굴조사에 따른 교통통제 개요

□ 사업부서 : 서울특별시 도시재생실 광화문광장추진단

□ 사업목적 : 새로운 광화문광장 조성사업 관련 문화재 시굴조사

□ 시굴조사 개요

단계	점용위치	점용기간	비고
1	세종대로(서측)	5.7~5.30	기 완료
2	사직로((정부서울청사 측 1개차로) / 세종대로(율곡로 우회전 1차로)	7.9.~7.31.	금회 시행(23일)
3	사직로8길-세안문로5길	8.5.~8.26.	21일
4	세종대로(동측)	8.26~9.26	32일
5	세종대로(동측)	9.27~10.30	34일
6	사직로,율곡로.효자로,삼청로	10.31~11.29	30일

□ 시굴조사 위치

2

3

4

5

6

2

1

3

금회 차로통제구간