1. 구조대증축 및 수궁119안전센터 등 개선공사

Ⅰ.  사업개요

○  사업기간 : 2014. 2. 1. ~ 2014. 9. 30.

○  규    모 : 증축 2층 78㎡, 환경개선 1,236.54㎡

- 구조대 증축 2층 78㎡

- 수궁·시흥119안전센터 환경개선 1,105.5㎡

- 구로소방서 15인승 승강기 설치 및 체력단련실 환경개선 131.04㎡

○  추진방식 : 서울시 재무과 계약의뢰(전기, 폐기물 자체발주)

○  총사업비 : 금569,005천원

Ⅱ. 추진결과

○  예산집행 실적

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	원인행위액	집행액	집행잔액	집행율
계	569,005	19,500	19,500	549,505	3.43%
시 설 비	569,005	19,500	19,500	549,505

○  사업추진 실적

- 사업추진율 : 계획 20% / 실적 25%

	0%		10%		20%		30%		40%		50%		60%		70%		80%		90%		100%
계 획
실 적

- 세부추진 사항

추진계획	추진실적
◦추진계획수립 : 1월 ◦기술용역타당성심사 : 1월 ◦설계계약 및 입찰 : 2월 ◦설계준공 : 3월 ◦공사계약심사 : 4월 ◦공사입찰 및 계약 : 5월 ◦착공 : 6월 ◦준공 : 9월 ◦공부정리 등 : 10월	◦방침수립 : 1월 ◦기술용역타당성심사 완료 : 1월 ◦설계용역 계약 : 2월 15일 ◦설계용역 준공 : 3월 28일 ◦계약심사 : 5월

Ⅲ. 사업추진 애로 및 개선방향

○  애로사항

- 사무실 등 석면 철거 및 공사기간 단축을 위한 임시청사 운영에 필요한

컨테이너 임대 및 배치에 따른 추가 예산소요

○  개선방향

- 24시간 현장출동 대기를 위한 임시청사의 난방시설 설치 등 예산       절감을 위하여 6월 착공

작 성 자	소방행정과 장비회계팀장 : 김상현 담당자 : 천완주