(주)도화종합기술공사 (주)제일엔지니어링	감 리 검 토 의 견 서			2015.5.28
검 토 건 명	기존구조물깨기 및 폐기물처리 검토
관 련 근 거	신성암사 제2015-154(15.05.28)	검토자	곽경표

1. 검토 개요

암사대교 연결도로 전구간의 기존구조물 깨기 및 폐기물처리에 대하여 각각의 개소마다 발생

구조물을 확인하고 수량을 산출하여 보고함

☐ 위치 : 연결도로 전구간

2. 검토내용

가. 구조물깨기 수량내용 검토

구분		공종	당초(㎥)	변경(㎥)	사 유
1구간	1	포장깨기	-	41.305	암사 RAMP-C 정수장 진입로 아스팔트 포장 (암사대교현장 경계부 누락)
	2	경계석 깨기	-	20.663	암사 RAMP-C 정수장 진입로 경계석 (암사대교현장 경계부 누락)
	3	옹벽깨기	-	12.81	암사 RAMP-C 정수장 진입로 기존옹벽 (암사대교현장 경계부 누락)
	4	세륜세차시설	37.7	26.80	수량정산
	5	안내표지판 기초	-	7.3	암사 RAMP-C 정수장 진입로 안내표지판 기초 (암사대교현장 경계부 누락)
	6	가옥철거	-	210.64	서원마을 완충녹지 서원슈퍼
	7	가옥철거	-	54	서원마을 완충녹지 주은물산
2구간	8	가옥철거	112.475	219.5	성현사(사찰) 현장수량 확인
	9	측구, 배수관	66.221	102.315	현장실측 (측구하부 두께증가 실측)
	10	철조망기초	-	76.726	정수장 철조망 기초 누락
	11	집수정 도수로	7.556	7.556	변경없음
	12	휀스 및 표지판기초	16.192	16.192	정수장사거리~훈련원사거리 변경없음
	13	보도경계석	40.620	4.233	정수장사거리~훈련원사거리 재사용
	14	보차도경계석	135.585	97.693	롯데케슬~훈련원사거리 존치
구분		공종	당초(㎥)	변경(㎥)	사 유
2구간	15	우수받이	14.82	8.58	롯데캐슬측 존치
	16	아스팔트 포장깨기	96	720.99	• 정수장사거리~훈련원사거리 당초: 위치이동된 녹지구간 변경 : - 녹지구간, - 좌우 보차도경계석 제거후 아스팔트절단, - 명덕초교-훈련원사거리구간 표층 (5cm)절삭
	17	보도헐기 (㎡)	4,.089	3,.558	롯데캐슬측 일부존치 (폐기물 50% 외부반출 활용)
	18	맨홀	23.67	-	정수장사거리~훈련원사거리 존치
3구간	19	포장깨기(㎡)	993.643	1,012.282	수로암거매설부+도로확장(미도래)
	20	우수받이	13.320	12.916	수량감소 (미도래분 포함)
	21	맨홀	59.972	29.972	표기 오차 (미도래)
	22	우수관	84.932	165.006	우수관로 기초콘크리트존재 (120〫〬 )
	23	경계석	192.875	236.017	우수관로시공시 철거복구(확장공사 미도래)
	24	옹벽	405.060	405.060	시공시기 미도래
	25	보도헐기	3,288.35	3,497.22	수로암거매설부시공 + 확장부 미도래
	26	자전거도로 교통섬	22.566	23.346	기존포장 투수콘
	27	자연석헐기	12.04	35.00	하천 저수호안 연장증가
	28	호안블럭헐기	31.24	93.72	하천 고수호안 연장증가
	29	안내표지판	8.6	13.6	실측
	30	타공종이기	190.886	190.886	고덕교 및 세륜기 (시기 미도래)

나. 수량증감

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
폐콘크리트처리	4,114ton	5,759ton	1,645ton
폐아스콘처리	2,058ton	4,393ton	1,885ton
철근콘크리트깨기(T=30cm 미만)	104㎥	614㎥	510㎥
철근콘크리트깨기(T=30cm 이상)	506㎥	481㎥	-25㎥
무근콘크리트깨기(T=30cm 미만)	695㎥	753㎥	58㎥
무근콘크리트깨기(T=30cm 이상)	31㎥	259㎥	228㎥
아스팔트포장깨기	1,093㎥	1,443㎥	350㎥
보도블럭헐기	7,378㎡	7,055㎡	-323㎡
아스팔트 포장절단	550m	1,166m	616m
호안블럭헐기	31㎡	94㎡	63㎡
자연석헐기	12㎡	35㎡	23㎡

다. 공사비

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비	205,590,000	292,930,000	87,340,000
Ⅰ공통공사	3,962,828	6,067,093	2,114,265
Ⅱ 토공	63,854,120	89,433,765	25,579,645
직접공사비 계	67,806,948	95,500,858	27,693,910
제경비	34,933,052	48,489,142	13,556,090
도급금액	102,740,000	143,990,000	41,250,000
폐기물처리비	102,850,000	148,940,000	46,090,000

3. 결론

☐ 현장 지장구조물깨기 및 폐기물수량은

- 현장실측으로 인한 수량 변동사항을 정산하였고

- 서원마을 대체녹지조성을 위한 가옥철거 2채 등 추가물량과 암사대교현장 경계부의 누락수량      이 추가 되었으며

- 3구간(강일삼거리 확장구간)의 미시공분은 당초대로 계상하였음

- 단가구성은 기존단가를 적용하였으며 발주처승인을 거쳐 추후 설계변경시 반영하고자            합니다.

붙임 : 1.폐기물 발생 위치도

2. 시공사 관련공문 사본 끝.