		한국가스공사
수신	도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	구리~군자(천호대로) 가스관 이설공사 TIE-IN관련 협조 요청

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원하오며, 천연가스의 안전하고 안정적인 공급에 협조하여 주심에 감사드립니다.

2. 우리공사에서 추진중인 구리∼군자(천호대로)구간 가스관 이설공사는      당초 4월 말운영중인 가스배관망과 연결작업(TIE-IN)을 추진중에 있었으나, 귀 시에서 시행중인 천호대로 확장공사의 선행공정 지연으로 전국 천연가스 공급계통을 고려하여6월중으로 최대한 연기한 실정입니다.

3. 상기와 관련하여, 천호대로 가스관 이설공사 인근 대치공급기지의 가스히터 교체공사 등의 공사시행(5/26∼8/28)에 따른 가스공급중단의 공급계통상 문제점이 예상되어, 귀 시의 시공사와 5월말 우회도로 개설 및 6월중 천연가스관 연결작업(TIE-IN)이 완료토록 협의하였으나 지속적으로 도로공사가 지연되고 있음을 확인하였습니다.

4. 가스배관 이설공사의 연결작업(TIE-IN)이 6월말 완료가 불가능 할 경우 전국 천연가스 가스공급계통 일정에 의하여, 불가피하게 8월 중순 이후에 TIE-IN 작업이 가능한바, 동 공사의 어려움을 감안하시어 적기 TIE-IN 작업 여부를 판단할 수 있도록 5월 28일 限  귀 시의 의견을 회신요청드리오니 적극 협조 부탁드립니다.

? 당초 예정공정

- 6월 15일 限 : 천호대로 상행차로(어린이대공원 방향) 통행차단 및 우회도로 개설

- 6월 15일 ∼ 6월 30일 : 천연가스관 연결작업 완료

첨부 : 1. 공사평면도 1부.

2. 현장사진대지(15.05.18) 1부.

3. 수도권 천연가스 공급배관망도 1부.  끝.

							한국가스공사 사장
직원										차장										팀장									지역본부장
협조자
시행			서울지역본부-3054									(	2015.05.19.					)		접수			토목부-10287								(	2015.5.19.					)
우	157-280					서울특별시 강서구 공항대로 340															/			http://www.kogas.or.kr
전화		02-2657-1054						/전송								/													/	공개