문서번호	토목부-751
결재일자	2015.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
협조

구조물 균열유발 줄눈설치 조치내용 보고

- 천호대로(광나루역)확장공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

도시기반시설본부

(토 목 부)

구조물 균열유발 줄눈설치 조치내용 보고

- 천호대로(광나루역)확장공사 -

수화열, 온도변화에 의한 건조수축 등으로 불가피하게 발생하는 균열을 제어하여 구조물의 안전성과 품질을 확보하기 위해서는 지하차도 구조물(U-TYPE, BOX형)에 균열유발 줄눈을 설치하는 것이 바람직하나 설계도서간 상호 모순(도면과 시방서에 명시, 물량 내역서 누락)되어 이에 대한 조치내용 보고임.

※ 관련근거 : 천호수 제2014-819호(‘14. 12. 30.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역)확장공사

○ 공사규모 : 폭 6차로 → 10차로 연장 900m(지하차도 580m 포함)

○ 도 급 비 : 45,446백만원

○ 공사기간 : ′10.10.12. ~ ′15.12.31.

○ 시 공 사 : ㈜해동건설외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링

□ 감리단 보고내용

○ 지하차도 구조물공사 중 구조물에 발생하는 균열을 제어하도록 시방서 및 도면에는 균열유발줄눈을 설치토록 명기되어 있으나 물량내역서에 수량이 누락되어 설계도서간 상호 모순이 발생함에 따라,

○ 공사계약일반조건 제19조의2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경) 제2항3호에 의거하여 물량내역서에 수축줄눈을 반영하여 설계도서간 상호일치시키고 품질관리를 확보하는 것이 적정할 것으로 판단됨.

○ 주요 검토내용

구 분	변 경 사 유	관 련 근 거
설계도서 누 락	ㅇ설계도면과 공사시방서 : 균열유발줄눈 표기됨 (35mmx35mm), 5m마다 ㅇ수량 및 내역서 : 누락 ㅇ시방서 및 “공사계약일반조건 제19조의2 제2항 3호”에 의거하여 내역에 반영함.	ㅇ[설계도면] ㅇ[공사시방서] ㅇ[공사계약일반조건]
품질확보	ㅇ지하차도 구조물(U-TYPE, BOX형)에 대해 수화열, 건조수축, 온도변화, 외력 등의 원인에 따라 불가피하게 발생하는 균열을 제어하여 구조물의 안전성과 품질을 확보하고자 함	ㅇ[공사시방서] ㅇ[콘크리트표준시방서 해설, 한국콘크리트협회]
현장점검 조치결과	ㅇ[기술지원감리원 현장점검 결과, 13.06.27]에 따라 구조물의 균열유발줄눈설치를 지적 하였으며 이에 따른 조치결과임	ㅇ[기술지원감리원 현장 점검 결과, 13.06.27]

○ 균열유발줄눈(수축줄눈) 설치 상세도

	수축줄눈(5M간격) 설치

	수축줄눈 상세도

	수축줄눈 설치현황도

○ 공사량 증·감 대비표

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 · △감	비 고
· 구조물공
수축줄눈	35mm*35mm	m		4,347	4,347

○ 단가적용

- 기존 품목 : 해당사항 없음

- 신규 품목 : 설계가×협의율(86.352%) 적용

※ [공사계약일반조건] 제20조 ②항 "계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우“에 해당

○ 공사비 증·감 대비표

(금액단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증 · △감	비 고
· 구조물공
수축줄눈		28,651	28,651
직접공사비	0	28,651	28,651
간접공사비		11,049	11,049
도 급 액		39,700	39,700
관급자재비
공 사 비 계		39,700	39,700

□ 조치계획

○ 감리단에서 제출한 실정보고의 검토의견이 적정하므로 승인 조치하고

○ 향후 본부 설계변경자문위원회(소위원회)를 거쳐 설계변경 반영코자 함

붙  임 : 감리단 검토보고서 1부.  끝.