국가하천(안양천) 유지관리

사 업 계 획 서

( 유지관리 및 보수 등)

2015.  10.

서울특별시

양  천  구

< 별표 제3-2 >

국가하천(안양천) 유지관리

사 업 계 획 서

□  보조사업자 : 양천구청장(공원녹지과장)

□  사업의 필요성

ㅇ 이용객들의 안전성 확보 및 민원예방

ㅇ 노후시설 보수 및  안전사고 사전예방

□ 사업개요

ㅇ. 사 업 명 : 국가하천(안양천) 유지관리 사업

ㅇ. 위    치 : 안양천

ㅇ 사업기간 : 2015. 10월 ~ 2015. 12월

ㅇ. 사업내용

(단위 : 천원)

구 분	사 업 량	사업비	비 고
계		300,000
국가하천유지관리	․둔치 자전거길 5.4km 주변 보행로 안전성 확보 등 ․노후 배수로 257m 정비 ․실개천 1개소 성능개선 ․불량계단 1개소 보수 ․뚝방 산책로 1km 보완 ․시설 및 녹지 유지관리 등	300,000

ㅇ  사 업 비

(단위 : 천원)

총사업비	국 비	도 비	시ㆍ군 비
300,000	300,000	0	0

□ 추진계획

ㅇ 2015. 10 ∼ 12. 20 : 하천 둔치 등 시설 정비 등

ㅇ 2015. 10 ∼ 12. 31 : 기존 시설 및 녹지 유지관리 등

□ 사업효과

ㅇ 이용객들의 안전성 확보 및 민원예방 등

ㅇ 노후시설 보수를 통한 안전사고 사전에 예방

□ 사업추진현황

(단위 : 천원)

구 분	전 체		‘13까지		'14년도		‘15요구액		장 래
	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
계		300,000						300,000
인 건 비	1식	40,000					1식	40,000
일반운영비	1식	20,000					1식	20,000
시 설 비	1식	240,000					1식	240,000

□ 예산산출

○ 안양천 제방, 둔치 유지관리 및 정비 300,000천원

- 유지관리 등 60,000천원

․기간제 근로자 인건비 : 15명×1,334,000천원×2개월 = 40,000천원

․작업 물품 구입 : 20종×1,000천원 = 20,000천원

- 안양천 둔치 시설 정비 240,000천원

․둔치 자전거길 주변 보행로 안전성 확보 등 5.4km×9,000천원 = 48,600천원

․노후 배수로 정비 : 257m×160천원 = 41,120천원

․실개천 성능개선 : 1식×50,280천원 = 50,280천원

․불량계단 보수 : 1개소×50,000천원 = 50,000천원

․뚝방 산책로 보완 등 : 1km×50,000천원 = 50,000천원

□ 위 치 도

오금교

신정교

오목교

양화교

양평교

목동교

□ 현황사진

◦ 불량시설

□ 현황사진

◦ 불량시설