사업명 : 지하역사공기질 개선사업

2018. 3 .

시․도명 (사업자명)	서울특별시 (서울교통공사)

작성자 : 보건환경처 직급 6급 성명  김 준 현 (인)

(TEL : 02-6311-9518 Email : subcl@smrt.co.kr)

확인자 : 보건환경처 직급 2급 성명  조 진 환 (인)

(TEL : 02-6311-9500 Email : jinhwan@seoulmetro.co.k)

1. 사업 개요

가. 개 요

o 목    적 : 지하역사 공기질 개선사업

o 기    간 : 2018년 ~ 2022년

o 총사업비 : 2,514억원(국비 765억원, 시비 1,749억원)

- 사업년도 사업비

· 2019년도 : 696억원 (도상개량, 노후역사 환경개선 공사 등)

· 2020년도 : 578억원 (도상개량, 본선환기설비 교체 등)

· 2021년도 : 677억원 (도상개량, 노후역사 환경개선 공사 등)

· 2022년도 : 563억원 (도상개량, 노후역사 환경개선 공사 등)

o 사업규모 : 자갈도상을 콘크리트 도상으로 개량 등 13건

나. 현 황

o 일반현황(조직, 인력, 시설현황 등)

- 조    직 【 본사 】 : 사장, 감사, 5본부(4임원), 7실, 1단, 1원, 44처

【 현업 】 : 1원, 3단, 56센터, 43소

- 인    력 : 총 정원 17,306명

- 시설현황

· 역  사 : 277개 역사(지하 254개역, 지상 23개역)

· 총연장 : 840.6km(본선 : 612.8km, 측선 : 227.8km)

o 사업 추진 현황 : 연도별 추진 실적 및 계획

사 업	실적			계획
	’16	’17	’18	’19	’20
자갈도상 개량(km)	3.0	0.6	6.3	3.0	3.0
살수배관 설치(km)	9.65	14.06	16.91	32.86	32.86
집진차량 구매(대)	-	-	-	1	-
친환경 모터카 구매(대)	-	1	1	4	4
터널 인력 물청소(km)		54	50	586	586
역사 환경개선공사(역)	-	-	-	1역	1역
환기설비 교체 등 개선(대)	-	19	-	20	-
필터 개량(대)	-	8	8	20	20
지하역사 방풍문 설치(역)	-	-	-	55	55
전동차 공기질 개선장치 설치(신조)(대)	-	100	300	200	548
전동차 공기질 개선장치 설치(기존)(대)	-	-	-	336	336
공기정화설비 설치 지원(대)	-	-	-	762	762

다. 사업의 필요성

o 자갈도상 개량

- 지하 터널내 건설당시 부설된 자갈도상이 장기간 사용으로 자갈이 파쇄, 마모 등 세립화(細粒化)되었으며, 열차운행 시 분진 등으로 터널내 비산되어 공기질 저하 우려

- 이러한 터널내 자갈을 근본적으로 철거하고, 콘크리트 시설물로 개량하여 지하 터널내 공기질을 개선하기 위하여 사업추진이 필요함

o 살수배관 설치

- 승강장 스크린도어 설치 등으로 정체된 터널 내 미세먼지가 증가 및 승강장, 대합실로 확산되어 승객 및 근무직원의 건강악화 우려로 터널 물청소 시행을 위한 배관설치가 필요

o 집진차량 구매

- 한국철도기술연구원에서 R&D 사업으로 개발하여 시험작업 및 효과분석 예정인 고효율 집진차량 도입으로 터널 미세먼지 개선이 필요

o 친환경모터카 구매

- 장기사용에 따른 특수차 운행 안전성 저하 및 유지보수 비용 증가

- 디젤특수차 운행으로 매연 등으로 인한 터널 내 공기질(미세먼지) 악화 발생등에 따른 배터리 또는 하이브리드형 친환경 모터카로   교체하여 지하 터널내 공기질(미세먼지) 개선이 필요

o 터널 물청소

- PSD 설치로 터널이 역사와 단절되어, 발생된 터널 미세먼지가 지속적으로 잔존하거나 침착되어, 터널 미세먼지 개선이 필요

o 역사환경 개선공사

- 역사 시설물 장기간 사용으로 인한 노후화 ⇨ 공기질 저하, 리모델링 필요

- 건설당시 설치하지 못한 냉방시설 신설과 시설노후로 인한 공기질 저해시설 개선(건축 마감재, 환기시설 등)으로 쾌적한 역사 환경 개선

o 환기설비 교체 등 개선

- 지하철 본선(터널) 환기설비는 ‘83년~’85년 개통되어 29년 이상된 노후 시설물로 성능 및 기능상 문제점 노출에 따른 전면 교체 필요

․본선송풍기 설치 이후 약 29년 이상 경과되어 시설물 노후화로 효율저하

․소음 민원발생 개소 송풍기 제한 가동으로 소음기 설치 필요

․터널 내 화재발생, 공사시행 등 집중배기 필요시 배출 기능저하장 등으로 환기기능 유지 곤란

o 필터 개량

- 당초 설치된 공기조화기 내부 필터장치의 노후 및 성능 저하로 유지관리가 어려움에 따라 성능이 개선된 필터로 개량 교체 필요

- 공기조화기 내부의 성능이 떨어지는 여재정전식 필터 등을 철거하고 성능이 뛰어난 미디엄 백필터(비색법 85%) 설치

o 지하역사 방풍문 설치

- 외기 악화 시 역사 내 미세먼지 유입으로 이용시민(노인, 영유아, 임산부 등) 및 종사자의 건강에 악영향 ⇨ 방풍문 설치로 외기 영향 최소화 필요

- 방풍문 미설치로 인한 냉난방 효율 저하 ⇨ 하절기, 동절기 외기 유입으로 인하여 이용승객의 불편 초래 방풍문 설치로 인한 냉·난방 효율향상으로 쾌적한 역사 환경 조성 필요

o 전동차 공기질 개선장치 설치

- 신규 도입되는 전동차 내 공기질 개선을 위한 공기질 저감시설 설치

- 기존 운영되는 전동차 내 공기질 개선을 위한 공기질 저감시설 설치

- 대중교통 도시철도 차량의 실내 공기질 권고기준 만족

- 전동차 이용승객에게 쾌적한 객실공기 제공으로 고객만족도 향상

- 전동차 객실 내 미세먼지 제거로 국민건강 증진에 기여

라. 사업효과

공기질 개선사업	사업효과
자갈도상 개량	- 지하 터널 내에 자갈을 근본적으로 철거함으로써 발생될 수 있는 미세먼지 오염원을 제거하여 지하 공기질 개선 - 자갈을 콘크리트로 개량 시, 지하 터널 내 미세먼지 27.9%(382.3→275.6㎍/㎥) 저감효과 확인 - 콘크리트도상 궤도구조의 고성능 탄성패드 적용으로 열차운행 시 진동 14.0~14.7dB 감소효과 확인
살수배관 설치	- 살수배관을 이용한 터널 인력물청소 상시화로 터널내 미세먼지 저감에 따른 공기질 향상으로 승객 및 근무 직원에게 보다 쾌적한 환경을 제공
집진차량 구매	- 고효율 집진차량 도입으로 터널 미세먼지 개선
친환경 모터카 구 매	- 작업시 매연 등 오염물질이 발생되는 디젤 모터카를 친환경 모터카로 교체하여 터널 내 공기질 개선 개선
터널 인력물청소	- 터널 내 인력물청소를 통한 터널 내 발생 및 잔류하고 있는 미세먼지 등 제거로 터널내 공기질 개선
역사 환경개선공사	- 환기시설 등 교체로 지하역사 공기질 개선 ․급기환기구 데미스터 신설 및 개량 공기조화기 설치 ․역사 대합실, 승강장, 기능실 환기 덕트 전면 교체 (환기용량 증대) - 역사 냉방으로 인한 쾌적한 환경 조성
환기설비 교체 등 개선	- 지하철 터널 환기시설 전면 개량, 정상기능 유지로 터널 내 공기질 개선 - 인버터 설치에 따른 동력비 절감(적정 환기량 가동(50Hz)시 약 40% 동력비 절감) - 본선송풍기 가동 소음을 기준치 이하로 유지하여 인근주변 상가민원 해소
필터 개량	- 미세먼지(PM-10) 저하 등 지하역사 공기질관리 효율성 증대
지하역사 방풍문 설치	- 외부 미세먼지 차단 효과 : 외기 악화시 먼지유입 감소 효과 - 동절기 역사 온도유지 효과 : 쾌적한 역사환경 조성 및 시설물 보호 ․ 외기의 영향을 최소화하여 쾌적한 역사환경을 조성하고, 동파 방지 등 시설물 보호 효과
전동차 공기질 개선장치 설치 신규, 기존(2대/량)	- 신규 및 기존 전동차에 대한 공기질 개선장치 설치 - 신규도입 전동차 측정결과 : 평균 8.15%, 최대 34.2% 감소

마. 기타 특이사항

o 구매 설치, 개량 및 공사는 실시설계, 공사 추진기간이 필요하여

o 계속비 사업(2~3년)으로 예산을 편성하여 추진

사. 재원부담비율

(국고 : 30(40)%, 지방비 : 35(30)%, 기타 : 35(30)%)

(단위 : 억원)

계	계	’19	’20	’21	’22
총사업비	2,514	696	578	677	563
국비(30%)	765	212	176	206	171
지방비(35%)	875	242	201	236	196
기타(35%)	874	242	201	235	196

2. 연차별 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분		사업 기간	총사업비	연차별 투자소요
				’19		’20
합 계			127,358		69,588		57,770
세부내역	o 터널 미세먼지 발생 차단 및 저감 - 자갈도상 개량 - 살수배관 설치 - 집진차량 구매 - 친환경 모터카 구매 - 터널 인력물청소 o 역사 미세먼지 관리 - 역사환경개선공사 - 환기설비 교체 등 개선 - 필터 개량 - 지하역사 방풍문 설치 - IOT 기반 환기설비 연동제어 o 지하철 차량 공기질 관리(1량/2대) - 전동차 공기질 개선장치 설치(신조) - 전동차 공기질 개선장치 설치(운영) o 제도개선 - 공기정화설비 설치 지원	'19~'20	18,000 16,294 6,000 7,200 2,344 59,718 4,620 400 3,850 550 1,122 2,688 4,572	3km 32.86km 1대 4대 586km 1역 20대 20대 55역 - 200대 336대 762대	9,000 8,149 6,000 3,600 1,172 30,992 4,620 200 1,925 - 300 1,344 2,286	3km 32.86km - 4대 586km 1역 - 20대 55역 55대 548대 336대 762대	9,000 8,145 - 3,600 1,172 28,726 - 200 1,925 550 822 1,344 2,286

(단위 : 백만원)

구 분		사업 기간	총사업비	연차별 투자소요
				’19		’20
합 계			127,358		69,588		57,770
재원별	o 국고 ( 30%) o 지방비 (35%) - 시․도비 o 기타 - 서울교통공사 (35%)	'19~'20	36,836 42,975 42,975		20,191 23,556 23,556		16,645 19,419 19,419
	o 국고 (40%) o 지방비 (30%) - 시․도비 o 기타 - 서울교통공사 (30%)		1,829 1,372 1,372		914 686 686		914 686 686

※ 세부내역은 사업성격에 따라 필요한 항목으로 새로이 작성 가능

3. 사업년도 세부추진계획

(단위 : 백만원)

세부내역	금 액	산출내역	국고지원비율
합 계	69,588		21,105
o 터널 미세먼지 발생 차단 및 저감	27,921		(30%) 8,377
- 자갈도상 개량	9,000	○ (궤도 2,549백만 +전기 400백만 +신호50백만+통신1백만)/km * 3km	2,700
- 살수배관 설치	8,149	○ 248백만원/km * 32.86km	2,445
- 집진차량 구매	6,000	○ 1대 * 6,000백만원	1,800
- 친환경 모터카 구매	3,600	○ 궤도모터카 : 2대 * 1,200백만원 전기모터카 : 2대 * 600백만원	1,080
- 터널 인력물청소	1,172	○ 1식 * 586km * 2백만/km	352
o 역사 미세먼지 관리	37,737	30%	(30%) 11,321
- 역사환경개선공사	30,992	○ ‘16년 설계용역 (건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 전자 등)	9,298
- 환기설비 교체 등 개선	4,620	○ 설치 기준(20대) - 설계용역 : 23백만원 - 환기설비 개량 공사(기계) : 1,077백만원 - 지급자재(송풍기) : 935백만원 - 지급자재(MCC) : 588백만원 - 지급자재(댐퍼) : 410백만원 - 지급자재(소음기) : 230백만원 - 본선환기(토목,건축) : 575백만원 - 본선환기(전기) : 782백만원	1,386
- 필터 개량	200	○ 9.75백만원/대(공기조화기) * 20대	60
- 지하역사 방풍문 설치	1,925	○ 35백만원/역 * 55역	578
o 지하철 차량 공기질 관리	1,644		(30%) 493
- 전동차 공기질 개선 장치 설치(신조)	300	○ 200대(100량) * 장치 1.5백만원	90
- 전동차 공기질 개선 장치 설치(기존)	1,344	○ 336대(168량) * (장치 1.5백만원+설치 2.5백만원)	403
o 제도개선	2,286		(40%) 914
- 공기정화설비 설치 지원	2,286	762대 * 3백만원(산업용, 벽면형)	914

4. 사업추진일정 계획('19년 기준 : 계속사업)

구 분	추 진 일 정 (월)												비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	계속사업
자갈도상 개량
	방침 및 기본실시설계				계약 및 착공		공사 시행
살수배관 설치
	설계, 계약 및 착공				공사 시행
집진차량 구매
	R&D 용역 완료				방침, 계약		제작 등 구매
친환경모터카 구매
	구매방침 수립			규격 등 방침 수립					계약		제작등 구매
터널 인력물청소													일자리 창출
	방침수립		설게,게약		인력물청소 시행
역사환경개선공사
	공사발주				계약 및 착공		공사시행
환기설비 교체 등 개선
	설계, 계약 및 착공					공사 시행
필터 개량
			설계 및 발주				게약		공사시행
방풍문 설치
	설계 및 발주			계약		공사시행
전동차공기질 개선장치(신조)
	설계 및 발주
전동차공기질 개선장치(기존)
	설계 및 발주				계약		공사시행
공기정화설비 설치 지원
	설계 및 발주				계약			공사 시행

5. 기 타

o 전동차 공기질 개선장치는 현재 일부 전동차에 대해 대폐차가 진행되고 있어 신조전동차에 신규로 설치하는 비용에 대한 지원이 필요하며,

o 역사 내 공기정화설비는 설치 후 유지보수에 따른 비용증가가 예상되어, 설치 운영 시 유지보수 비용 지원 검토가 필요함.