국회대로 지하차도 및 상부공원화

□ 사업개요

○ 위    치 : 양천구 신월IC ~ 영등포구 국회의사당 교차로

○ 규    모 : 연장 7.6㎞, 폭 40~55m (친환경공간 약 11만㎡)

- 지하차도 및 중앙공원화 구간 : 신월IC ~ 목동운동장, 연장 4.1㎞

- 도로다이어트 구간 : 목동운동장 ~ 국회의사당, 연 3.5㎞

○ 사업기간 : 2013 ~ 2024.6.

○ 총사업비 : 4,015억

□ 추진현황

○ ˈ12.11.20.	: 국회대로 친환경공간 조성방안 수립

○ ˈ13.03.~ˈ13.10. : 아이디어공모 시행 (시민, 대학생)

○ ˈ13.05.~ˈ15.02. : 타당성조사 및 기본계획 시행

○ ˈ16.07.~ˈ17.07. : 제물포터널 구조물 중첩 구간 설계 (신월IC)

○ ˈ18.08.02.	: 제물포터널 구조물 중첩 구간 착공

○ ˈ17.11.~ˈ20.09. : 지하차도 및 도로다이어트 구간 설계

○ ˈ20.11. 현재 : 제물포터널 중첩구간 지하차도 공사 중(공정률 17%)

상부공원화 기본 및 실시설계 중

□ 향후계획

○ ˈ21.06. : 상부 공원화 설계 완료

○ ˈ23.06. : 지하차도(구조물) 완공

○ ˈ24.06. : 상부 공원화 완공

□ 위치도