김현아 국회의원(국토교통위원회, 자유한국당)

요구번호 1350번

18. 물순환안전국(하수관로) 100억원이상 SOC사업 현황

- 100억원이상 SOC사업 현황

- 100억원이상 SOC사업 준공기간 초과 사업현황

- 100억원이상 SOC사업 지체사업 사업별 지체일수, 사업비 초과지출금액 등

- 100억원이상 SOC사업 지체사업 지체사유

의원님께서 요구하신 100억원이상 SOC사업(물순환안전국, 하수관로) 현황 등을 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 100억원이상 SOC사업(물순환안전국, 하수관로) 현황 등 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (물재생계획과)	담당사무관	김준형 이인규 이두환
	☎ 02)2133-3792 02)2133-3795	담 당 자	김영희 정재윤
	작성일 : 2017.9.29.(금)

붙임		100억원 이상 SOC사업 현황

○ 16년. 1월 이후 준공(예정)사업

구분	사업명	사업개요	사업기간		사업비(백만원)			지연사유
			당초	변경	당초	변경 (지출예정)	증감
완료사업 : 5건
1	성수2 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 광진구 자양동, 화양동 일대 - 규모: D=300~□3.5×1.5m, L=40.1㎞	2008 ~ 2012-12	2008 ~ 2016-12	46,240	58,036	+11,796	- 예산부족에 따른 연차별 투자액 변경 - 지하매설물 이설에 따른 지연 등
2	수유2 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 강북구 수유동, 인수동, 번동 삼양동, 미아동 일대 - 규모: D=300~□2.0×1.5m, L=63.2㎞	2008 ~ 2012-12	2008 ~ 2016-12	61,840	63,229	+1,389	- 예산부족에 따른 연차별 투자액 변경 - 지하매설물 이설에 따른 지연 등
3	녹번2 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 은평구 역촌동, 대조동 일대 - 규모: D=300~□1.2×1.2m, L=26.3㎞	2009 ~ 2012-12	2009 ~ 2016-12	41,154	41,273	+119	- 예산부족에 따른 연차별 투자액 변경 - 지하매설물 이설에 따른 지연 등
4	시흥저지 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 금천구 시층1,3동 일대 - 규모: D=300~□3.0×2.0m, L=8.6㎞	2013 ~ 2015-12	2013 ~ 2016-12	16,562	21,088	+4,526	- 예산부족에 따른 연차별 투자액 변경 - 지하매설물 이설에 따른 지연 등
5	풍납펌프장 유입관로 개량	- 위치: 송파구 풍납동 일대 - 규모: D=450~□2.5×2.0m, L=4.99㎞	2012 ~ 2015-12	2012 ~ 2016-12	16,520	17,796	+1,276	사업구간내 지장물 이설지연 및 이설공사 비용 증가
진행사업 : 26건
1	필동 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 중구 명동, 필동, 광희동 일대 - 규모: D=300~□2.5×2.0m, L=19.5㎞	2011 ~ 2017-12	2011 ~ 2018-12	38,880	34,400	- 4,480	- 지하매설물 이설에 따른 지연 등
2	구의 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 광진구 구의동, 자양동 일대 - 규모: D=300~□1.5×2.0m, L=55.2㎞	2012 ~ 2021-11	2012 ~ 2021-11	64,160	64,626	+466
3	동선 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 성북구 동선동, 돈암동 일대 - 규모: D=300~□1.5×1.5m, L=18.5㎞	2011 ~ 2017-12	2011 ~ 2017-12	31,969	31,877	- 92
4	창동2 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 도봉구 창동, 쌍문동 일대 - 규모: D=300~□3.0×1.5m, L=28.4㎞	2012 ~ 2016-12	2012 ~ 2018-12	33,098	33,098	-	- 지하매설물 이설에 따른 지연 등
5	하계 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 노원구 공릉, 하계, 중계동 일대 - 규모: D=300~1350㎜, L=28.4㎞	2012 ~ 2017-12	2014 ~ 2019-12	37,157	37,157	-	- 지하매설물 이설에 따른 지연 등
6	신월2 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 양천구 신월1,3,4,5,7동 일대 - 규모: D=300~1500㎜, L=25.2㎞	2015 ~ 2019-12	2015 ~ 2019-12	44,511	44,511	-
7	신월3 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 양천구 신월동, 강서구 화곡동 일대 - 규모: D=300~1200㎜, L=34.7㎞	2015 ~ 2019-12	2015 ~ 2019-12	57,900	57,900	-
8	화곡2 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 양천구 신월동, 신정동, 목동 일대 강서구 화곡 1,2,4,8동 일대 - 규모: D=300~□3.6×2.7m, L=74.3㎞	2014 ~ 2020-12	2014 ~ 2020-12	77,187	77,187	-
9	신월1 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 강서구 화곡 1,3동 일대 - 규모: D=450~1350㎜, L=17.0㎞	2011 ~ 2018-12	2011 ~ 2019-12	28,469	28,469	-	- 지하매설물 이설에 따른 지연 등
10	화곡1 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 강서구 화곡본동, 화곡4,6동 일대 - 규모: D=300~□3.0×2.5m, L=29.5㎞	2010 ~ 2020-12	2010 ~ 2020-12	55,435	55,435	-
11	오류1 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 구로구 개봉동, 오류동 일대 - 규모: D=300~□3.5×2.0m, L=21.1㎞	2012 ~ 2017-12	2012 ~ 2017-12	27,493	24,421	- 3,072
12	오류2 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 구로구 궁동, 온수동, 오류동 일대 - 규모: D=300~1500㎜, L=19.64㎞	2014 ~ 2020-12	2014 ~ 2020-12	40,275	40,275	-
13	오류4 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 구로구 개봉동, 오류동 일대 - 규모: D=300~□3.0×2.0m, L=14.4㎞	2011 ~ 2017-12	2011 ~ 2017-12	32,617	26,675	- 5,942
14	가리봉 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 금천구 가산동 일대, 구로구 가리봉동 일대 - 규모: D=300~□2.0×2.0m, L=23.5㎞	2011 ~ 2018-12	2011 ~ 2018-12	34,772	34,772	-
15	도림1 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 영등포구 대림동 일대 - 규모: D=300~1500㎜, L=49.5㎞	2010 ~ 2020-12	2010 ~ 2023-12	74,441	74,441	-	- 지하매설물 이설에 따른 지연 등
16	신림4 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 관악구 조원동, 신사동, 미성동, 난곡동 일대 - 규모: D=450~□4.0×2.5m, L=19.8㎞	2012 ~ 2019-12	2012 ~ 2019-12	40,700	40,700	-
17	삼성1 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 강남구 삼성동, 대치동, 역삼동 일대 - 규모: D=300~1200㎜, L=11.9㎞	2014 ～ 2017-12	2014 ～ 2019-12	14,289	14,289	-	- 지하매설물 이설에 따른 지연 등
18	대치 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 강남구 대치동, 도곡동 일대 - 규모: D=600~1000㎜, L=18.1㎞	2014 ~ 2018-12	2014 ~ 2019-12	42,597	42,597	-	- 지하매설물 이설에 따른 지연 등
19	성내 배수분구 하수관로 종합정비	- 위치: 강동구 성내동 일대 - 규모: D=300~1500㎜, L=21.5㎞	2013 ~ 2018-12	2013 ~ 2018-12	28,894	28,894	-
20	한강로 일대 방재시설 확충사업(유역분할)	위치: 용산구 한강대교 북단~남영역 규모: □2.0×2.0~D2400㎜, L=1.26㎞	2014 ~ 2015-12	2014 ~ 2018-12	19,300	19,760	+ 460	- 빗물펌프장 공사반대 주민민원 및 지하매설물 이설에 따른 지연 등
21	강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비	위치: 강서구 강서구청사거리~가양펌프장 규모: □1.8×1.5~5.6×2.5m, L=2.0㎞	2012 ~ 2014-12	2012 ~ 2018-11	48,410	54,118	+ 5,708	사업구간내 지장물(지하매설물) 이설협의 지연 및 이설공사 비용 증가
22	암사역 주변 침수해소	위치: 강동구 암사동 암사역 주변 규모: 2□3.0×2.5m, L=2.06㎞	2015 ~ 2018-12	2015 ~ 2018-12	27,471	27,242	- 229	-
23	방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설	위치: 서초구 방배역~반포천 규모: □3.0×2.5~4.0×4.0m, L=2.1㎞	2013 ~ 2016-12	2013 ~ 2018-12	23,531	39,687	+ 16,156	사업구간내 지장물(지하매설물)이설협의 지연 및 이설공사 비용 증가
24	둔촌로 일대 하수관로 신설	위치: 강동구 둔촌로 일원 규모: 2□2.5×2.0m, L=4.46㎞	2014 ~ 2017-12	2014 ~ 2020-12	38,600	58,395	+ 19,795	사업구간내 지장물 이설협의 지연 및 이설공사 비용 증가
25	목동 신시가지 남측 오수관로 정비	위치: 양천구 목1, 신정동 일원 규모: D300~1000㎜, L=21.9㎞	2016 ~ 2019-12	2016 ~ 2019-12	20,370	28,929	+ 8,559	사업구간내 지장물 이설비용 증가
26	신천펌프장 유입관로 개량	위치: 송파구 송파동, 방이동 일대 규모: □1.5×1.2~3.5×2.0m, L=2.7㎞	2013 ~ 2016-12	2013 ~ 2018-12	16,963	17,480	+ 517	사업구간내 지장물 이설공사 지연