주요 SOC 사업 추진현황

(’19년 9월말 기준)

연번	사 업 명	목 적	사업개요	계획 및 추진현황
1	강남순환도시 고속도로 건설	서남권 지역의 외곽을 통과하는 도시고속도로를 건설하여 동·서간 교통을 원활히 하고 남부순환로의 교통정체 완화 도모	- 위 치: 금천구 독산동(소하JT)~강남구 일원동(수서IC) - 규 모: 폭 6~8차로, 연장 22,9km(민자사업구간 12.4km) - 사업기간: 1997.~2020. - 사 업 비: 1조 6,573억원(민자 9,098 별도)	○ 정상추진 중 (공정률 95%)
2	국회대로 지하차도 및 상부 공원화	제물포터널 건설과 연계, 국회대로 지하화 및 상부 도로 축소 후 친환경 공간을 조성하여 지역간 단절 해소 및 주민 삶의 질 향상에 기여	- 위 치: 양천구 신월IC~영등포구 국회의사당 교차로 - 규 모: 폭 40~55m, 연장 7.6km(친환경공간 약 11만㎡) - 사업기간: 2013.~2024. - 사 업 비: 4,015억원	○ 정상추진 중 - 제물포터널 중첩구간 (공정률 10%) - 지하차도+도로다이어트구간 : 실시설계 중
3	동부간선도로 확장 (월계1교~녹천교)	동부간선도로 확장을 통한 병목으로 인한 상습정체 해소 및 서울 동북부 지역 교통여건 개선	- 위 치: 동부간선도로 월계1교~녹천교 - 규 모: 폭 4→6~7차로, 연장 1.4km - 사업기간: 1999.~2020. - 사 업 비: 1,137억원	○ 정상추진 중 (공정률 63%)
4	동부간선도로 확장 (녹천교∼의정부시계)	동부간선도로 확장을 통한 병목으로 인한 상습정체 해소 및 서울 동북부 지역 교통여건 개선	- 위 치: 동부간선도로 녹천교~의정부시계 - 규 모: 폭 4→6~7차로, 연장 5.45km - 사업기간: 1999.~2020. - 사 업 비: 4,108억원	○ 정상추진 중 (공정률 74%)
5	서초역~방배로간 도로개설	장기간 군부대로 단절된 서초로의 서초역~방배로 구간을 개설하여 강남지역 동·서축 도로망 체계 구축과 주변 간선도로 교통량 분산처리 및 교통여건 개선	- 위 치: 서초구 방배동 내방역~서초동 서초역(대법원앞) - 규 모: 폭 6차로, 연장 1.28km - 사업기간: 2007.~2019. - 사 업 비: 1,648억원	○ 공사완료 (공정률 100%)
6	서부간선도로 지하도로	서남부지역의 주요 교통축인 서부간선도로의 상습교통정체를 해소하고 자동차전용도로인 기존 서부간선도로의 일반도로화 및 공원, 녹지, 자전거 도로 등 친환경 공간 조성	- 위 치: 영등포구 양평동(성산대교남단)～금천구 독산동(금천IC) - 규 모: 폭 4차로, 연장 10.33km - 사업기간: 2010.~2021. - 사 업 비: 5,200억원(‘07.7월 불변가)	○ 정상추진 중 (공정률 53.7%)
7	서울제물포터널 건설	도로용량 불균형 및 병목현상 등으로 인해 발생되고 있는 제물포길의 상습정체 와화 및 자동차 전용도로인 제물포길로 인해 지역이 단절되고 도시환경이 낙후되어 불편을 겪고 있는 강서 및 양천지역의 균형발전 도모	- 위 치: 양천구 신월동~영등포구 여의도동 - 규 모: 폭 4차로, 연장 7.53km - 사업기간: 2010.~2020.10 - 사 업 비: 4,546억원(‘07.3월 불변가)	○ 공사 추진 중 (공정률 67%)
8	신림~봉천터널 건설	서울 남부지역 동·서간도로 확충으로 극심한 정체를 일으키고 있는 남부순환로의 교통량 분산하여 서남부 지역 통행불편 해소 및 지역균형발전	- 위 치: 관악구 신림동(시흥IC)~낙성대입구 - 규 모: 폭 4차로, 연장 5.6km - 사업기간: 2009.~2023. - 사 업 비: 5,507억원	○ 정상추진 중 (공정률 30%)
9	월드컵대교 건설	성산대교 교통량 분산처리로 상습 병목구간 교통체증 해소 및 강남순환 도시고속도로와 연계한 서부지역 간선도로망 체계 구축	- 위 치: 마포구 상암동~영등포구 양평동 - 규 모: 폭 6차로, 연장 1.98km - 사업기간: 1999.~2021. - 사 업 비: 3,550억원	○ 정상추진 중 (공정률 71%)
10	천호대로 (광나루역) 확장	천호~하남 광역BRT사업과 연계된 중앙버스전용차로 설치를 위한 천호대로 병목구간 확장 및 지하차도 상부 경관개선으로 천호대로로 단절된 아차산 녹치축 연결	- 위 치: 광진구 구의동~광진구 광장동 - 규 모: 폭 6→10차로, 연장 0.9km - 사업기간: 2007.~2019. - 사 업 비: 1,060억원(BRT사업 포함)	○ 정상추진 중 (공정률 99%)