공사 추진현황

□ 궤도0사업소

❍ 총괄                                                  (2018.12.00일 현재)

합 계	준공	공 사 중			발주 및 계약예정							비고
	계	계	정상	부진	계	설계	적정성 심사	계약 심사	서울시심사	일상 감사	계약 의뢰

❍ 사업별 세부추진 현황(신양식 적용)

사 업 명	주요사업물량	실적	잔량	추진현황(공사주요내용)	비고
				계획/실적/대비(%)
□ 2017년 2호선 궤도도상개량공사 (예산: 궤도처 ) - 공사기간 : ‘17.09.18~’19.2.19 - 시공회사 : ㈜대륙철도 - 공사금액 : 5,559,813,000 - 공사감독 : 조준곤	･ 자갈철거 3,176m ･ 침목교환 1,594개 ･ B2S판넬설치 1740개 ･ 콘크리트타설 3,167m ･ 레일교환 4,336m	1,564 1,000 744 1,516 1,783	1,603 594 996 1,651 2,553	❍ 실시사항 잠실나루~잠실(외) 자갈철거 콘크리트 충진 B2S판넬 설치 ❍ 예정사항 잠실나루~잠실(외) 자갈철거 콘크리트 충진 B2S판넬 설치
				70.9 / 53.4 / 75.3
□ 2017년 1,2호선 노후레일교환공사 (예산: 궤도처 ) - 공사기간 : ‘17.09.04~18.11.27 - 시공회사 : ㈜천경기업 - 공사금액 : 1,218,043,000 - 공사감독 : 이영현	･ 레일운반 18,788m ･ 레일교환(50kg) 12,154m ･ 레일교환(60kg) 6,634m ･ 테르밋트용접 186개소 ･ 가스압접 879개소 ･ 도상흡음재철거 580m ･ 초음파탐상 1,056개소	19,252 12,618 6,634 206 867 580 942	0,000 00 - - - - -	❍ 실시사항 발생레일 및 자재회수 ❍ 예정사항 - 발생레일 및 자재 회수 설계변경(제1회) E/S(제1회)재검토 현장대리인 변경예정
				97.7 / 100 / 102
□ 2018년 1,2호선 노후분기기 개량공사 (예산: 궤도처 ) - 공사기간 : ‘18.10.25~19.12.08 - 시공회사 : 대광공영㈜ - 공사금액 : 827,464,000 - 공사감독 : 윤상진	･ 분기기 교환 25틀 ･ 레일교환(50kg) 238m ･ 레일교환(60kg) 47m ･ 테르밋트용접(50) 91개소 ･ 테르밋트용접(60) 74개소 ･ 도상자갈교환 269.99㎥	- - - - - -	0,000 00- - - - -	❍실시사항 용접시편채취 및 시험의뢰 ❍ 예정사항 착공보고회(18/11/13)
				0.12 / 0.12 / 100

현안 및 보고사항

※ 현안 및 보고사항에 맞게 양식 변경하여 작성 바랍니다.

□ 현안사항(특이사항, 보고사항)

- 공사개요

- 현안사항(문제점 등)

□ 부진공정 관련사항

- 부진공정 현황

- 부진공정 만회대책

□ 사고이월 예상사업(신양식 적용)

연번	예산 과목	계약건명	계약일자	계약기간 (완료예정일)		공정 (%)	계약액	이월액	이 월 사 유
				당초	변경
1
2

□ 업무 협조사항

-

업무공지 및 협조사항

□ 업무 공지사항

□ 업무 협조사항