공사 추진현황

□ 궤도0사업소

❍ 총괄                                                  (2019.11.15일 기준)

합 계	준공	공 사 중			발주 및 계약예정							비고
	계	계	정상	부진	계	설계	적정성 심사	계약 심사	일상 감사	발주 예정	발주 의뢰

❍ 사업별 세부추진 현황

사 업 명	주요사업물량	실적	잔량	추진현황(공사주요내용)	비고
				계획/실적/대비(%)
□ 2017년 2호선 궤도도상 개량공사 (예산: 궤도처 ) - 공사기간 : ‘17.09.18~’19.8.28 - 시공회사 : ㈜대륙철도 - 공사금액 : 5,717,639,000 - 공사감독 : 황해준	･ 자갈철거 3,167m ･ 침목교환 1,594개 ･ B2S판넬설치 1739개 ･ 콘크리트타설 3,167m ･ 레일교환 4.336m	2,652 1,594 1,314 2,601 3.593	515 0 425 566 0.743	❍ 실시사항 서초~방배(내) 자갈철거 B2S판넬 설치, 콘크리트 충진 ❍ 예정사항 서초~방배(내,외) 자갈철거 B2S판넬 설치, 콘크리트 충진
				90.3 / 87.4 / 96.8
□ 6호선 신내역 임시승강장 궤도공사 (예산: 토목처) - 공사기간 : ‘19.02.07~19.08.04 - 시공회사 : 화성종합ENG - 공사금액 : 539,406,000 - 공사감독 : 윤영선, 정우석	･ 궤도부설 0.404km ･ 궤도철거 0.231km ･ 분기기부설 8틀	- 0.09 -	0.404 0.131 8	❍실시사항 용접시편채취 및 시험의뢰 ❍ 예정사항 - 입고선 #1 궤도 복구 및 102-1분기기 설치
				28.5 / 28.5 / 100

❍ 2019년 예산사업 설계추진현황

연번	사 업 명	누계 진도 (100%)	기초조사 (20%)	도면작성 (25%)	수량산출 (30%)	내역작성 (20%)	설계서작성 (5%)	비고
1	-사 업 명 : 신림~신대방 도상흡음블럭 제작설치공사 -예산과목: -소요예산: -공사내용: 도상흡음블럭 설치	96	01.07. ~04.10.	04.11. ~04.20.	04.21. ~04.30.	05.01. ~05.25.	05.25. ~06.20.	황해준, 이영현
			20	25	30	20	1
			-설계서 작성 중

현안 및 보고사항

※ 현안 및 보고사항에 맞게 양식 변경하여 작성 바랍니다.

□ 현안사항(특이사항, 보고사항)

- 공사개요

- 현안사항(문제점 등)

□ 부진공정 관련사항

- 부진공정 현황

- 부진공정 만회대책

□ 업무 협조사항

-

업무공지 및 협조사항

□ 업무 공지사항

□ 업무 협조사항