▢ 푸른도시국 금천구 투자사업 집행현황

(단위 :  백만원)

부서	사업명	예산 현액	집행액	추진현황 (개조식으로 간략하게 작성)
공원녹지 정책과	시공원 유지관리 및보수정비 (도시개발특별회계)	450	104	- 2017.01.12. : 계획 수립 - 2017.03.10. : 설계심의(조건부 가결) - 2017.03.17. : 공사비 요청 - 2017.03.20. : 공사비(446백만원) 재배정 - 2017.03.21. : 공사발주 - 2017.04.20. : 공사착공 - 2017.07.25. : 준공예정
공원조성과	동네뒷산 공원조성 (관악산 시흥동 산132-3일대)	2,100	0	-’17.04 : 사업방침 수립 - ’17.05~07현재 : 토지소유자와 협의 (캐나다 거주) ※ 토지소유자 분할보상 반대, 전체토지 보상요구 <향후계획> - ’17.08~12 : 토지소유자 토지보상협의 완료 후 보상 추진
조경과	가로수생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충 (남부순환로 3개소)	95	94	2017. 1 ∼ 4 : 설계시행 2017. 5. 8. 착공 2017. 6. 21. 준공
조경과	지정보호수 유지관리 (시흥동 100-24등 4개소)	20	19	2017. 3. 30. 공사착공 2017. 5∼9. 유지관리시행 2017. 9. 25. 준공예정
조경과	사계절 꽃길 조성(시흥대로)	32	18	2017. 4. 24. 걸이화분설치(1차) 2017. 9. 걸이화분설치예정(2차)
조경과	노후 마을마당 보수정비 (말뫼마을마당)	30	30	2017. 2. 계획수립 및 설계시행 2017. 4. 17. 착공 2017. 4 30 준공
조경과	공개공지 되살리기 (BYC하이씨티 등 3개소)	90	87	2017. 2. 14. 설계착수 2017. 3. 10. 설계완료 2017. 4. 27. 착공 2017. 5. 25. 준공
조경과	에코스쿨 조성(금동초)	100	97	2017. 2. 14. 설계착수 2017. 3. 8. 설계완료 2017. 4. 27. 착공 2017. 5. 25. 준공
조경과	품격있는 가로수 관리 (시흥대로 등 9개 노선)	10	10	2017. 2. 16. 착공 2017. 3. 1. 준공
조경과	금천구 호압사 보호수 정비 (주민참여)	45	44	2017. 6. 21. 공사착공 2017. 6.∼10. 유지관리시행 2017. 10. 30. 준공예정
조경과	오래된 녹지 밝고 쾌적한 숲길 조성 (주민참여)	100	5	- 2017. 1. 19. 계획수립 - 2017. 2. 24. 설계착수 - 2017. 3. 20. 설계완료 - 2017. 4. 25. 착공 - 2017. 9.~ 10. 공사예정 - 2017. 12.31. 준공예정
자연생태과	근교산 등산로 정비 (호암산 등)	150	58	- ’17. 2~4 : 설계용역 - ’17. 4~5 : 설계심의(전문가 자문) - ’17. 6~7 : 계약심사, 공사발주 - ’17. 7~10 : 공사 시행 및 준공
자연생태과	숲가꾸기 사업	30	15	- 2017. 1월 : 사업계획 수립 - 2017. 2~11월 : 사업시행
자연생태과	하천생태복원 및 녹화 (안양천(금천교~철산교))	700	138	- 2017. 1 사업추진계획 수립 - 2017.2~5 : 설계시행 - 2017.6~10 : 공사시행 및 준공