[작성사례]

월간 공정회의 자료(9월)

(보고일 2014. 9. 16)

□ 공사명 : 지하철 9호선 2단계 건설공사(917공구)

□ 기  간 : 2014. 9. 1 ∼ 2014. 9.30

1. 공종 진도율

전월까지(～9.01누계)			금 월			누 계(～9.30 누계)
계획	실적	대비(%)	계 획		대비(%)	계획	실적	대비(%)
			계획	실적
82.4	83.8	100.7	1.7	1.7	100	84.1	85.5	100.6

2. 공종별 추진내용 예시(공종별 특성에 맞게 작성)

위 치	공종명		단위	설계 수량	전 월(∼8.31누계)			금 월			누 계(～9.30누계)			작 업 내 용
					계획 수량	실적 수량	대비 (%)	계획 수량	실적 (예정)	대비 (%)	계획 수량	실적 수량	대비 (%)
926 정거장	배관		m	17,833	16,640	16,640	93.3	60	60	100	16,700	16,700	93.6	-E/S 지하2~4층용 측판마감작업 -지하1층 화장실 배관 및 덕트작업 -전층 보온 작업 -지하1층 소방배관, 덕트작업
	덕트		㎡	19,881	19,745	19,745	99.3	0	0	0	19,745	19,745	99.3
	E/S		set	19	12	12	100.0	4	4	100	16	16	64.0
	E/V		set	6	3	3	100	1	1	100	6	4	67.0
	공조기		set	6	6	6	100	0	0	0	6	6	100
	냉동기		set	2	2	2	100	0	0	0	2	2	100
	PSD		set	1	0.95	0.95	95.0	0.05	0.05	100	1	1	100
	송풍기(배기)		set	19	19	19	100				19	19	100
	송풍기(급기)		set	15	15	15	100				15	15	100
	자동제어	DDC	set	14
		종합제어반	set	2
		사령실	set	1
927 정거장	배관		m	17,833	16,640	16,640	93.3	60	60	100	16,700	16,700	93.6	-E/S 지하2~4층용 측판마감작업 -지하1층 화장실 배관 및 덕트작업 -전층 보온 작업 -지하1층 소방배관, 덕트작업
	덕트		㎡	19,881	19,745	19,745	99.3	0	0	0	19,745	19,745	99.3
	E/S		set	19	12	12	100.0	4	4	100	16	16	64.0
	E/V		set	6	3	3	100	1	1	100	6	4	67.0
	공조기		set	6	6	6	100	0	0	0	6	6	100
	냉동기		set	2	2	2	100	0	0	0	2	2	100
	PSD		set	1	0.95	0.95	95.0	0.05	0.05	100	1	1	100
	송풍기(배기)		set	19	19	19	100				19	19	100
	송풍기(급기)		set	15	15	15	100				15	15	100
	자동제어	DDC	set	14
		종합제어반	set	2
		사령실	set
본선 설비	본선송풍기		set	7	7	7	100				7	7	100	-배수펌프 시운전 -송풍기(S1,E2) 시운전
	본선배수펌프		set	8	8	8	100				8	8	100

3. 주요 작업내용

전월 작업사항(전체 / 전월 / 누계)	금월 작업사항
○ 배관 설치 작업 - 지하1층 소방 배관 작업 ( 10456 /50 / 9710 ) - 지하1,2층 배관 보온 작업 ( 7640 / 40 / 7040 ) ○ 덕트 설치 작업 - 지하1,2층 덕트 디퓨저 설치 작업 ○ 자동제어 작업 - 입선 및 결선 작업 ( 17248 / 0 / 25500 ) ○ PSD - 시운전 ○ 승강설비 - E/V – 1대 설치 ○ 본선 설비 - 집수정 배수 배관준비 작업 (6LINE/4LINE) - 본선 송풍기 E2 단동운전 (E1은 구조물 마무리중)	○ 배관 설치 작업 - 지하1층 소방 배관 작업 ( 10456 / 0 / 9710 ) - 지하1,2층 배관 보온 작업 ( 7640 / 50 / 7090 ) ○ 덕트 설치 작업 - 지하1,2층 덕트 디퓨저 설치 작업 ○ 자동제어 작업 - 입선 및 결선 작업 ( 17248 / 0 / 25500 ) ○ PSD - 종합시운전 ○ 승강설비 - E/S – 4대 입고설치 (외부2대,연결통로2대) ○ 본선 설비 - 집수정 배수 배관 입상작업 (6LINE/4LINE) - 본선 송풍기 E2 시운전

4. 공사추진 지장원인(중복체크 가능)

보상지연	민원발생	하도업체 부 도	공법변경	지장물 발 생	자재수급 차 질	시 방 변경설계	인력장비 부 족	기 타

5.현안사항

내 용
○ 환승통로 구조물 공사 지연 - 환승통로 토목공사 10월30일 완료후 11월말 까지 에스컬레이터 설치완료 예정 (시운전 및 관공서 검사일정 2개월 예상) ○ 정거장내 천정등 마감 지연 - 기구 설치 및 시운전 지연 예상 - 환승통로 천정공사완료(12월말)후 시운전기간 부족
	지하2층 공사전경