동부엔지니어링주식회사
139-201 서울특별시 노원구 상계동 1019번지 57호 연호빌딩 4층 402호 전화 : (02)930-1628 / 팩스 : (02)930-1629 / 책임감리원 윤 성 필, 담당 이 흥 균
문서번호: 동삼감 제2016 – 149 호	선결	부장		지시
시행일자: 2016. 09. 06.
보존기한: 년간 ( 년까지)
	접수	일자 시간	. . . :	결 재 ⋅ 공 람	과장
수 신: 서울특별시 도시기반시설본부
		번호
경 유:
	처 리 과
참 조: 설비부장
	담 당 자
제 목: 기계설비 건설사업관리기술자 추가투입 검토요청

1. 귀 본부의 발전을 기원합니다.

2. 동부간선도로확장공사(3공구) 전기관리실동 및 상도, 장암지하차도 기계설비 공사에 대한 예정공정표가 제출되어 첨부 계획공정대로 진행코자 기계설비 분야 현장 상주 건설사업 관리기술자 추가투입을 아래와 같이 요청하오니 기계설비 설계검토 및 공사품질관리 등 원활한 공정추진을 위하여 적극 투입 검토하여 주시기 바랍니다.

-     아   래     -

구 분	분 야	등 급	공 종	투 입 기 간		비고
				일 자	개월
상주	기계 설비	감리사보	전기관리실동 환기닥트설치, 상도 및 장암지하차도 집수정 배관 및 배수펌프 설치	2016.10.01. ~ 2016.11.30.	2.0	시공 일정에 따라 조정

가. 투입인원

나. 투입일정

구 분		감 리 기 간														투입개월	비고
감리사보 (기계설비)	당초	2016.01.01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016.12.31	0.0	증) 2개월
	변경	2016.01.01													2016.12.31	2.0

첨 부 : 1. 기계설비 공정추진계획 1부.

2. 설비공정 예정공정표 1부.

3. 감리 배치투입 계획 1부. 끝.

동부간선도로 확장공사(3공구)

책임 감리원 윤 성 필 (인)

(첨부#1)

기계설비 공정추진계획

(동부간선도로확장공사 3공구)

명칭 및 용도	형 식	수 량	설 치 위 치	투 입 계 획
집수정배수펌프	수중형	10	장암, 상도 펌프실	2016.11
전기실 급기(팬)	IN-LINE	1	전기실동(전기실)	2016.10
펌프실 급기(팬)	WALL	2	장암, 상도 펌프실	2016.11
전기실 배기(팬)	IN-LINE	1	전기실동(전기실)	2016.10
펌프실 배기(팬)	WALL	2	장암, 상도 펌프실	2016.11
화장실 배기(팬)	WALL	1	전기실동(화장실)	2016.10
에어컨(전기실 냉방)	입형(공냉식)	1	전기실동(전기실)	2016.10
난방기	전기방열기	1	전기실동(화장실)	2016.10
전기온수기	순간식	1	전기실동(화장실)	2016.10

설비장비일람표 및 투입계획

공정 추진 현황 및 계획

○ 2015년 12월 오․배수공사 슬리브설치 및 배관공사

○ 2016년 10월 전기실동 급수배관공사 및 환기닥트설치공사

○ 2016년 10월 전기실동 설비 장비 반입 및 설치

○ 2016년 11월 장암, 상도 펌프실 장비 반입 및 설치

○ 2016년 11월말 장비시운전(전기실동 및 펌프장)

(첨부#2)

(첨부#3)