문서번호	정수시설과-3628
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
협 조
	주무관

기계설비 보수공사(연간단가) 2차 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

기계설비 보수공사(연간단가) 2차 설계변경 검토 보고

우리 정수센터 기계설비의 효율적인 유지보수를 위한 기계장치 등 보수공사(연간단가) 시행 중 물량 증·감 및 추가사항이 발생 하였기에 아래와 같이 설계변경 하고자 함.

Ⅰ		사 업 현 황

□ 사업개요

◯ 사 업 명 : 2014년 뚝도아리수정수센터 기계설비 보수공사(연간단가)

◯ 사업기간 : 2014. 4. 02 ~ 2014. 12. 31

◯ 계약금액 : 54,646,030원

◯ 계 약 자 : 덕원개발 대표 이철민

◯ 정비공사 계약 내역

- 송수펌프실 지배수펌프 및 밸브류, 배관 교체(3.7kw 2대)

- 구내식당 배수정펌프  및 밸브류, 배관 교체(1.5kw 2대)

- 샘플링펌프 배관시스템 개선 2개소

- 활성탄 저장탱크 에어배관 및 밸브류 교체

- 알류미늄 보온관 교체

- 각종 잡철물 제작 설치 및 기계설비 도장

□ 작업지시 현황

◯ 3차작업지시 내용 : 3계열 중염소투입기 가압수펌프 수리외 3건(2014.8.19)

○ 4차작업지시 내용 : 습식분말활성탄 정량투입장치 오버홀정비 외3건(2014.11.25)

※ 세부 작업지시내용은 첨부 작업지시서 참조

Ⅱ		설계변경 사항

□ 주요 변경 내역

○ 2014년 본부 재무회계과 설계심사 집행 이행실태 순회 점검 결과 지적사항 반영

- 고재처리비 정산 누락

→ 고재물량에 대하여 전반적으로 재조사하여 일괄 감액 처리

- 연간단가 안전관리비 오류 반영

→ 안전관리비 전액 감액 조치

○ 여과지 유입밸브 수리 내역 물량 증가(2개소→3개소)

○ 알류미늄 보온판 교체 작업 취소

- 작업 미시행 사항으로 신규공종 증가로 인한 전체 금액 감액

○ 각종 잡철물 제작 설치 기기도장

- 신규공종 증가로 인한 작업 물량 축소

○ 각종 잡철물 제작 설치 기기도장

- 작업 미시행 사항으로 신규공종 증가로 인한 금액 축소

→ 전체 물량 축소(금액 증가분 대비 축소)

○ 예상치 못한 기계고장으로 인한 신규 공종 증가

- 3계열 중염소 투입기 가압수펌프 수리

- 약품저장탱크 응집제 PAHCS배관 교체

- 가성소다 배관실내 가성소다 배관 교체

- 습식분말활성탄 정량투입장치(모노펌프) 오버홀 정비

- 배출수처리장 오수펌프 교체

□ 총괄변경 내용

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

○ 세부 물량 및 금액변경사항 : 첨부 내역서 참조

○ 변경내역                                         (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	49,678,209	54,500,000	증)4,821,791
부가가치세	4,967,821	5,450,000	증) 482,179
도급금액	54,646,030	59,950,000	증)5,303,970
결정금액	54,646,030	59,950,000	증)5,303,970

Ⅲ		조치계획

□ 상기 변경 내용에 대해 자체 설계변경 심의위원회 개최 결과

본안 통과로 결정됨에 따라 설계변경 시행하고자 함.

□ 작업완료한 사항에 대해서는 정산 및 대가(기성집행)지급 하고자 함.

붙   임 : 1. 변경내역서 1부.

2. 작업지시서(3차 및 4차) 1부.

3. 설계변경 심의관련 서류 각 1부.

4. 제경비 검증 1부. 끝.