(주)진우엔지니어링코리아

08506 서울시 금천구 가산디지털1로 151, 세진이노플렉스 전화:02-2156-3297 전송:02-2156-3118 www.jinwoo-eng.com 담당: 이다정

문서번호	진우 제 18 - 호
시행일자	2018. 09. 18.
수 신	북부도로사업소장
경 유
참 조	도로보수과장

선 결				지시
접 수	일 자
	시 간			결재 · 공람
	번 호
처 리 과
담 당 자

제  목 :

노후도로정비공사(1구역)-북부 제2회 기성검사 결과 제출

귀 소의 무궁한 발전을 기원합니다.

1. 익선-09-15(2018.09.17)호와 관련으로 “2018년 노후포장도로정비공사(1구역)-북부”의 제2회 기성검사를  시행하고 따로붙임괴 같이 기성검사 결과를 제출합니다

붙임 :  1. 공사기성부분 검사조서 1부.

2. 건설사업관리기술자(기성부분) 건설사업관리조서 1부.

3. 기성내역서 1부. .

4. 기성검사사진 대지 1부 끝.

주 식 회 사 진우엔지니어링코리아

대 표 이 사       김    명    철

F701-09(Rev.0)                                           JINWOO EngineeringKorea Co., Ltd

(주)진우엔지니어링코리아

03918 서울시 강북구 한천로 913, 도로굴착복구 및 노후포장정비공사 건설사업관리단(2권역)전화:02-989-8253 전송:02-989-8256

문서번호	북부 제 18 - 51호
시행일자	2018. 09. 18.
수 신	(주)진우엔지니어링코리아 대표이사
경 유
참 조	감리본부장

선 결				지시
접 수	일 자
	시 간			결재 · 공람
	번 호
처 리 과
담 당 자

제  목 :

노후도로정비공사(1구역)-북부 제2회 기성검사 결과보고

1. 지속적인 업무협조에 감사드립니다.

2. 익선-09-15(2018.09.17)호와 관련으로 “2018년 노후포장도로정비공사(1구역)-북부”의 제2회 기성검사를 시행하고 따로붙임괴 같이 그 결과를 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 :  1. 공사기성부분 검사조서 1부.

2. 건설사업관리기술자(기성부분) 건설사업관리조서 1부.

3. 기성내역서 1부. .

4. 기성검사사진 대지 1부 끝.

2018년 도로굴착복구 및 포장도로정비공사 건설사업관리용역(2권역)

책임건설사업관리기술자     김 경 복

사  진  대  지

기성준공서류 확인

기성준공서류 확인

사  진  대  지

아스팔트포장도로 폭 확인

아스팔트포장도로 연장 확인

사  진  대  지

아스팔트포장도로 폭 확인

아스팔트포장도로 연장 확인

[별지 제46호 서식]

건설사업관리기술자 ( 기성부분 ) 건설사업관리조서

공   사   명  : 2018년 노후포장도로정비공사(1구역) - 북부

2018년 02월 22일 (주)익산건설 대표 한 상헌과 계약분

위 공사의 건설사업관리기술자로 임명받아 2018년 04월 02일부터 2018년 09월 17일까지 실지 건설사업관리한 결과 공사전반에 걸쳐 공사설계 도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 기성(기성금액 : ￦583,410,000 원, 기성율 51.8%, 누계 85.1%.) 되었음을 인정함.

2018년 09월 17일

책임건설사업관리기술자    김 경 복 (인)

북부도로사업소 소장 귀 하

[별지 제47호 서식] 공사 기성부분 내역서 1. 공 사 명 : 2018년 노후포장도로정비공사(1구역)-북부 2. 도 급 액 : 일금 일십일억이천육백만 원정 (₩1,126,000,000원) 3. 기 성 금 액 : 일금 오억팔천삼백오십일만원정 (₩583,510,000) - 51,8% ○ 전회 기성금액 : 일금 삼억칠천사백팔십원정 (₩374,800,000) - 33.3% ○ 금회 기성금액 : 일금 오억팔천삼백오십일만원정 (₩583,510,000) - 51,8% ○ 누 계 금 액 : 일금 구억오천팔백삼십일만원정 (₩958,310,000) - 85.1% ○ 기성 대상 공사기간 : 2018.02.28. ~ 2018.12.31. - 전회까지 기성대상 공사기간 : 2018.02.28. ~ 2018.06.21 - 금 회 기 성 대 상 공사기간 : 2018.06.22. ~ 2018.09.17 4. 내 역 (갑) (단위 / 수량 : 식, 금액 : 천원, 비율 : %)
공사내역	규격	도 급 액		전회까지기성금액			금회 기성 금액			누계 금액			잔액	비고
		수량	금액	수량	금액	비율	수량	금액	비율	수량	금액	비율
1.포장공 2.부대공 순공사비 3.간접노무비 4.산재보험료 5.고용보험료 6.건강보험료 7.연금보험료 8.퇴직공제부금비 9.노인장기요양보험 10. 건설기계대여금 11.환경보전비 12 하도지급보증 13.기타경비 14.안전보건관리비 순공사원가 13. 일반관리비 14. 이 윤 공급가액 16. 부가가치세 도 급 비	11.3% 3.9% 0.87% 1.7% 2.49% 2.3% 6.55% 0.41% 0.9% 0.081 6.0% 6.0% 15%	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	750,308,998 6,991,348 757,300,346 34,053,139 13,080,926 2,918,052 - - 6,931,170 - - - - 31,538,696 17,391,129 863,213,458 51,792,807 108,630,099 1,023,636,364 102,363,636 1,126,000,000	1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1	256,810,750 3,311,964 260,122,714 11,471543 4,406,595 983,009 - - - - - - - 10,783,462 - 287,767,323 17,266,039 35,693,911 340,727,273 34,072,727 374,800,000	34.2 47.4 34.3 33.7 33.7 33.7 - - - - - - - 34.2 - 33.3 33.3 32.9 33.3 33.3 33.3	1 1 1 1 1 - - 1 - - - - 1 1 1 1	400,206,252 2,702,415 402,908,667 18,541,789 7,122,508 1,588,867 - - - - - - - 16,619,282 - 446,781,113 26,806,866 56,875,658 530,463,637 53,046,363 583,510,000	53.3 38.7 53.2 54.4 54.4 54.4 - - - - - - - 52.7 - 51.8 51.8 52.4 51.8 51.8 51.8	1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1	657,017,002 6,014,379 663,031,381 30,013,332 11,529,103 2,571,876 - - - - - - - 27,402,744 - 734,548,436 44,072,905 92,569,569 871,190,910 87,119,090 958,310,000	87.6 86.0 87.6 88.1 88.1 88.1 - - - - - - - 86.9 - 85.1 85.1 85.2 85.1 85.1 85.1	93,291,996 976,969 94,268,965 4,039,807 1,551,823 346,176 - - 6,931,170 - - - - 4,135,952 17,391,129 128,665,022 7,719,902 16,060,530 152,445,454 15,244,546 167,690,000

(을) (단위 / 수량 : a, 금액 : 원, 비율 : %)
공사내역	규 격	도급액		전회까지기성금액			금회 기성금액			누 계			비고
		수량	금액	수량	금액	비율	수량	금액	비율	수량	금액	비율
1. 포장공 절삭,덧씌우기 절삭,덧씌우기 절삭,덧씌우기 절삭,덧씌우기 절삭,덧씌우기 절삭,덧씌우기 절삭,덧씌우기 택 코 팅 택 코 팅 택 코 팅 택 코 팅 택 코 팅 택 코 팅 프라임코팅 야간공사조명비 야간공사조명비 미끄럼방지(그루빙) 코아채취 소 계 2. 부대공 가설사무실(컨테이너) 가설창고(컨테이너) 포장장비운반비 포장장비운반비 소 계 계	야,t5,산5a,2 야,t5,산5a,4 야,t5,산5a,6 야,t5,산5a,8 야,t5,산10a,6 야,t5,소20a,4 야,t5,소20a,6 2차로(기계) 4차로(기계) 6차로(기계) 4차로(인력) 6차로(인력) 8차로(기계) 8차로(기계) 25a/일 50a/일 종절단 개소당 6~12월 3*6 6~12월 3*6 연속L10km 불연속L1km	22 405.6 419.8 866.7 64.6 23.3 164.5 22 405.6 419.8 23.3 164.5 866.7 64.6 187.8 1778.7 4,305 140 1 1 5 3	6,677,550 121,262,231 123,595,901 251,220,793 16,925,767 10,714,015 74,327,186 551,158 9,856,079 10,150,837 690,936 4,823,962 20,748,796, 1,586,523 4,128,595 19,551,504 69,314,805 4,182,360 750,308,998 510,698 466,271 5,519,940 494,439 6,991,348 757,300,346	- 282.9 419 - - - - 282.9 419 - - - - - 701.9 1,500 - - - - 3 -	- 84,578,612 123,359,466 - - - - 6,874,468 10,131,420 - - - - - 7,715,284 24,151,500 - 256,810,750 - - 3,311,964 - 3,311,964 260,122,714	69.7 99.8 - - - - - 69.7 99.8 - - - - - 39.5 34.8 - 34.2 60.0 47.4 34.3	- 66.2 0.8 741.9 64.6 23.3 164.5 - 66.2 0.8 23.3 164.5 741.9 64.6 187.8 873.5 1,425 - - - 2 3	- 19,791,812 236,435 215,046,391 16,925,767 10,714,015 74,327,186 1,608,659 19,417 690,936 4,923,962 17,761,084 1,586,523 4,128,595 9,601,545 22,943,925 - 400,206,252 - - 2,207,976 494,439 2,702,415 402,908,667	- 16.3 0.2 85.6 100 100 100 - 16.3 0.2 100 100 85.6 100 100 49.1 33.1 - 53.3 - - 40.0 100 38.7 53.2	349.1 419.8 741.9 64.6 23.3 164.5 - 349.1 419.8 23.3 164.5 741.9 64.6 187.8 1,757.4 2,925 - - - 5 3	104,370,424 123,595,901 215,046,391 16,925,767 10,714,015 74,327,186 - 8,483,127 10,150,837 690,936 4,823,962 17,761,084 1,586,523 4,128,595 17,316,829 47,095,425 - 657,017,002 - - 5,519,940 494,439 6,014,379 663,031,381	- 86.1 100 85.6 100 100 100 - 86.1 100 100 100 85.6 100 100 88.6 67.9 - 87.6 - - 100 100 86.0 87.6	6,677,550 16,891,807 - 36,174,402 - - - 551,158 1,372,952 - - - 2,987,712 - - 2,234,675 22,219,380 4,182,360 93,291,996 510,698 466,271 - - 976,969 94,268,965