별지 제16호서식〕

문서번호

GEC21감리07 - 13호

공 사 명

한강 준설(저수로)정비공사

수   신

서울시 한강사업본부 치수과

담당 주무관

공   종

□건축 □기계설비 ■토목 □조경 □기타

구    분

□자체 제시 의견사항  □사업주체 검토 요구사항  ■시공자 제출사항

제    목

한강 준설토 수상운반거리 변경에 대한 검토 보고

1. 관산공 제JKJS– 022호(21.07.06) 관련 “수상운반거리 실정보고 제출 건“에 대한 검토 임.

2. 검토 배경

본 공사의 한강 준설토 수상운반거리(변경)의 설계거리가 실제 현장과 상당한 차이가 있어

현장 실정보고에 대한 타당성 의견을 설계 변경시 반영토록하여 준설공사에 만전을 기하고자 함.

3. 검토내용 : 각 현장 및 공종별 시공사 실정보고에 따른 공사비 내역 요약 임)

ο 준설토 수상운반거리(변경추가), 적용 내역

현 장 명		준설토 운반량	운반거리(㎞)	설계단가	도급단가	금 액	비 고 (낙찰율)
당산 수상 택시승강장	당초분	4,000㎥	8.75	2,199	1,908	7,632,000	87.004%
	증가분	〃	3.76	4,034	3,509	14,036,000
	계	〃	12.51			21,668,000
잠실 수상 택시승강장	당초분	5,000〃	8.75	2,199	1,908	9,540,000
	증가분	〃	20.82	9,139	7,951	39,755,000
	계	〃	29.57			49,295,000

(단위: 원)

▶ 추가거리 신규단가 : 일위대가 참조(운반 예인선 : 재료비, 노무비, 경비 적용)

▶ 도급단가 : 단가 산정(식)에 의한 설계가에 도급 낙찰율 적용(87.004%)

현 장 및 공 종	시공량	순공사비		간 접 비		도 급 비		비 고 (증가액)
		당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
당산수상택시승강장	4,000 ㎥	7,632	21,668	2,945	8,363	10,577	30,031	19,454
잠실수상택시승강장	5,000 〃	9,540	49,295	3,682	19,025	13,222	68,320	55,098
계	9,000 ㎥	17,172	70,963	6,627	27,388	23,799	98,351	74,552

ο 설계변경(추가) 예산내역(도급비)                                  (단위: 천원)

기술검토의견서

4. 검토결과 준설토 수상운반거리의 설계서와 현장여건의 변경 등에 대한 시공사의 실정보고에 따른 공사비의 검토의견으로 검토결과 차후 설계변경에 적용함이 타당할 것으로 사료 됨.
▢ 붙 임 : 시공사 실정보고서……… 1부.
상기와 같이 한강준설 정비공사의 실정보고에 대한 공사비 내역(증가분)의 검토의견서를 제출합니다. 2021년 7월 8일	한강 준설(저수로,취수장)정비공사 건설사업관리책임기술자 임 종 석 □