별지 제16호서식〕

문서번호

GEC21감리07 - 15호

공 사 명

한강 상수원 퇴적물 정비공사

수   신

서울시 한강사업본부 치수과

담당 주무관

공   종

□건축 □기계설비 ■토목 □조경 □기타

구    분

□자체 제시 의견사항  □사업주체 검토 요구사항  ■시공자 제출사항

제    목

강북취수장 준설토 수상운반거리 변경에 대한 검토 보고

1. 유호(한강) 제21- 08호(21.06.23) 관련 “수상운반거리 실정보고 제출 건“에 대한 검토 임.

2. 검토 배경

본 공사의 강북취수장 준설토 수상운반거리(변경)의 설계거리가 실제 현장과 상당한 차이로

현장 보고에 대한 타당성 의견을 설계 변경시 반영토록 하여 공사 준공에 만전을 기하고자 함.

3. 검토내용 : 설계서 대비 도급내역외 추가 운반거리 반영에 대한 검토 내역 요약 임)

ο 수상운반거리(변경추가), 적용 내역

공 종		운반량	운반거리	설계단가	도급단가	금 액	비 고
준설토 운반공	당초분	2,800㎥	4.71 ㎞	1.783	1,722	4,821,600	96.70%
	증가분	〃	8.30 ㎞	4,361	4,215	11,802,000
	계	〃	13.01 ㎞			16,623,600

(단위: 원)

▶ 추가거리 신규단가 : 일위대가 참조(운반 예인선 : 재료비, 노무비, 경비 적용)

▶ 도급단가 : 단가 산정(식)에 의한 설계가에 도급 낙찰율 적용(96.70%)

공 종	운반량	순공사비		간 접 비		도 급 비		비 고 (증가액)
		당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
준설토 운반공	2,800㎥	4,821	16,623	1,837	6,336	6,658	22,959	16,301

ο 설계변경(추가) 예산내역(도급비)                                   (단위: 천원)

4. 검토결과

준설토 수상운반거리의 설계서와 현장여건의 변경 등에 대한 시공사의 실정보고에 따른

공사비의 검토의견으로 검토결과 차후 설계변경에 적용함이 타당할 것으로 사료 됨.

▢ 붙 임 : 시공사 실정보고서……… 1부.

위와 같이 한강준설 정비공사의 실정보고에 대한    공사비 내역(증가분)의 검토의견서를 제출합니다.

2021년  7월  9일

한강 준설(저수로,취수장)정비공사

건설사업관리책임기술자   임  종  석 □

기술검토의견서