기술용역타당성심사 요청서

안건번호	제 호
구 분 도로(교량,터널),지하철,하천,건축,조경,설비(전기),도시계획,교통,소방,디자인 등으로 분야 표시	건축

건 명	남산골한옥마을 정문화장실 증축 및 리모델링공사 실시설계 용역

요청기관명	역사문화재과
제출년월일	2019년 01월 일

기술용역사업계획

용역개요	○용 역 명 : 남산골한옥마을 정문화장실 증축 및 리모델링 공사 실시설계 용역 ○용 역 비 : 16,502,000원 ○용역기간 : 착수일로부터 60일간 ○사업규모 : 92.7㎡(증축 25.2㎡, 리모델링 67.5m²) ○입찰참가자격(면허 등) : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제13조의 자격을 갖추고 건축사업무신고를 필한업체이고 전력기술관리법 제14조에 의한 전력전문설계업(전력전문설계 2종 이상)을 등록한 업체
자체시행 가능여부	○용역시행 목적 - 남산골 한옥마을내 정문화장실이 관람객 대비 화장실이 협소하고 악취 발생으로 이용객 불편을 초해하므로 화장실 리모델링 및 증 축하여 쾌적한 공간 확보함. ○추진근거(용역시행 방침서, 관련법령 등) - 2019년 남산골한옥마을 전통정원 관리계획 [역사문화재과-883(2019.01.15)]
	○자체시행 가능여부(해당 47개 공종 포함여부 □ 포함, ■ 미포함)
	○투자심사 여부, 중기재정계획 등 상위계획 반영여부 : 해당없음 (투자심사결과서, 상위계획 반영내용 첨부) ○2030 서울생활권계획 협의대상 여부( □ 대상, ■ 비대상) ○용역추진경위 - 2018. 6. 12 : 남산골한옥마을 정문여행자화장실 증축공사 추진계획(역사문화재과-9900호)
과업내용 (요약)	○과업의 기본방향 - 기존 협소한 화장실을 증축 및 리모델링하고 이용자들의 규모에 맞는 시설을 확장하여 이용자들에게 편의제공 ○과업의 범위 - 시 설계심의, 공사비 및 공사기간 산정, 공종별 상세설계, 시방서, 물량내역서 등 기타 발주청이 정하는 사항의 범위

	○ 주요 과업내용 - 현장 여건에 맞는 적정한 정비 방안 선정(관람객들의 요구사항 및 선호도 포함)하고 시공에 필요한 설계도서 작성 - 향후 설계내용이 현장여건에 지장이 없는지 검토 확인 - 건축시 저촉되는 조경 수목 등은 공사 전 이식하고 완료 후 원상복구 계획 설계도서 작성 등
사업추진계획 (절차)	○ 예비타당성조사, 타당성조사, 기본계획, 기본설계, 실시설계 등 년도별 추진 일정계획 - 2019. 1. : 기술용역타당성심사 의뢰(기술심사담당관) - 2019. 2. ∼ 5. : 실시설계용역 시행 및 공사발주 - 2019. 6. ∼ 9. : 공사착공 및 준공
유사용역 자료활용계획(최근5년 이내)	○ 해당사항 없음
리스크관리심사항목	○ 용역 수행 지연․중단 발생가능성 여부 -용역 추진 관련 이해당사자의 반대 등 민원이 발생될 소지가 있는지 : 없음 -용역 수행 중 민원이 발생되어 용역추진에 차질이 생길 경우 대책은 : 주민 편익 공간 조성임을 강조하여 민원인 적극 설득 -용역 수행 과정에서 외부 기관의 인․허가 또는 심의를 득하는데 지장이 없는 지 : 없음 ○ 용역비용, 과업기간 증가 발생여부 및 관리 대책 : 해당없음 ○ 기타 예상 리스크 발생요인 및 대책(대응) 방안 : 해당없음
사업의 예상효과	○ 남산골한옥마을 관람객에 쾌적하고 깨끗한 화장실 공간을 제공 함으로써 관광 편의 기여

<붙임> 1. 방침서(2019년 남산골 한옥마을 전통정원 관리계획 및 남산골

한옥마을 정문 여행자 화장실 증축공사 추진계획) 각 1부

2. 용역비 산출내역 1부

3. 과업지시서 1부

4. 현황사진 1부.  끝.