붙임1

기술용역타당성심사 요청서

안건번호	제 호
구 분 도로(교량,터널),지하철,하천,건축,조경,설비(전기),도시계획,교통,소방,디자인 등으로 분야 표시	도 로(사면)

건 명	2018년 도로사면 정밀점검용역(남산3호터널 앞)

요청기관명	서부도로사업소(도로보수과)
제출년월일	2018년 5월 일

기술용역사업계획

용역개요	○용 역 명 : 2018년 도로사면 정밀점검용역(남산3호터널 앞) ○용 역 비 : 16,000,000원 ○용역기간 : 2018. 7. ~ 2018. 8. ○사업규모 : 남산3호터널 앞 절토사면 안정성 검토
자체시행 가능여부	○용역시행 목적 - 정밀점검 등을 통하여 내재되어 있는 위험요인을 조사하여 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보 - 향후 시설물설계 및 공사 등 사업진행에 반영 ○추진근거(예산편성 전) - 도로사면 정밀점검 용역 사업대상 알림(도로관리과-7387)
	○자체시행 가능여부(해당 47개 공종 포함여부 □ 포함, ■ 미포함) - 자체시행대상임에도 외부용역으로 발주하는 사유 : 해당없음.
	○투자심사 여부, 중기재정계획 등 상위계획 반영여부 : 해당없음 ○2030 서울생활권계획 협의대상 여부 □ 대상, ■ 비대상 ○용역추진경위 - 2018.02.22 : 해빙기 도로사면 안전점검 추진계획 통보 (도로관리과-3041) - 2018.03.30 : 2018년 해빙기 도로사면(비탈면, 옹벽) 안전점검결과 보고(도로보수과-2935) - 2018.05.11 : 도로사면 정밀점검 용역 사업대상 알림 (도로관리과-7387)
과업내용 (요약)	○과업의 기본방향 - 대상 시설물의 물리적, 기능적 결함을 조사하고 그에 대한 적절한 보수, 보강 등의 방법 제시 ○과업의 범위 - 남산3호터널 앞 절토사면 안정성 검토 ○주요 과업내용 - 정밀점검을 통하여 보수․보강 및 유지관리 방안 제시

사업추진계획 (절차)	○ 2018. 6. : 정밀점검용역 예산재배정 요청 ○ 2018. 6. : 용역발주 및 계약 ○ 2018. 7. ~2018. 8. : 용역시행 및 준공
유사용역 자료활용계획(최근5년 이내)	○용 역 명 : 해당없음 ○발주기관 : 해당없음 ○유사용역 자료활용 계획 - 해당없음 ※ 당해 사업과 유사한 용역사업의 성과품 자료, 인근 지역의 지질조사보고서, 환경영향평가보고서, 교통영향평가보고서 등 활용 가능한 자료를 조사하고 활용계획 수립
리스크관리심사항목	○용역 수행 지연․중단 발생가능성 여부 : 해당없음 - 용역추진 관련 이해당사자의 반대 등 민원이 발생될 소지가 있는지 - 용역수행중 민원이 발생되어 용역추진에 차질이 생길 경우 대책은 - 용역수행과정에서 외부기관의 인․허가 또는 심의를 득하는데 지장이 없는 지 ○용역비용 및 과업기간 증가 발생여부 및 관리 대책 - 설계심의기간에 따라 과업기간 증가발생 가능함 ○기타 예상 리스크 발생요인 및 대책(대응) 방안 : 해당없음
사업의 예상효과	○ 도로사면의 손상구간에 대한 정밀안전점검을 실시함으로써 ○ 도로시설물에 대한 안정성 및 내구성 확보

※ 참고 : 기술용역 발주부서 자체시행 대상 47개 공종(행정2부시장 방침 제10058호 : ̀11.7.8)

【붙임 서류 】

1. 용역시행 관련문서 1부.

2. 용역 대가 산출근거 1부.

3. 용역 과업내용서 1부.