기술용역타당성심사 요청서

안건번호	제 756 호
구 분 도로(교량,터널),지하철,하천,건축,조경,설비(전기),도시계획,교통,소방,디자인 등으로 분야 표시	교 통

건 명	도심 안전속도5030 기본 및 실시설계 용역

요청기관명	도시교통본부 교통운영과
제출년월일	2018년 4월 6일

기술용역사업계획

용역개요	○ 용 역 명 : 도심 안전속도5030 기본 및 실시설계 용역 ○ 용 역 비 : 98,000천원 ○ 용역기간 : 착수일로부터 1년 ○ 사업규모 : 서울시 도심지역 및 연결도로 - 서울시 도심지역 : 율곡로~사직로~통일로~퇴계로~장춘단로 및 내부도로 - 도심 연결도로 : 도심지역으로 연결되는 주요 간선도로 ○ 입찰참가자격 - 엔지니어링산업진흥법 제21조에 따라 건설부분 중 전문분야(교통, 도로·공항, 도시계획)에 신고한 엔지니어링 사업자 또는 기술사법 제6조 규정에 의한 기술사사무소 개설 등록(동분야)한 업체로서 교통기술사를 보유한 업체이어야 하며, - 현재 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체
자체시행 가능여부	○ 용역시행 목적 - 서울시 교통사고 사망자 중 보행자 비율이 57%로서 보행자를 위한 안전대책의 일환으로 안전속도5030 추진 - 서울 사대문안이 녹색교통진흥지구로 지정됨에 따라 쾌적하고 안전한 도심 교통여건 조성을 위해 도심지 속도하향 추진 ○ 추진근거 - 교통운영과-2695(2018.2.14)호
	○ 자체시행 가능여부(해당 47개 공종 포함여부 □ 포함, ■ 미포함) - 자체시행대상임에도 외부용역으로 발주하는 사유 : 해당없음
	○ 투자심사 여부, 중기재정계획 등 상위계획 반영여부 : 해당없음 ○ 용역추진경위 - 2018. 2 : 2018년 교통안전사업 추진계획 수립 - 2018. 3~4 : 서울지방경찰청 등 관계기관 협의
과업내용 (요약)	○ 과업의 기본방향 - 서울시 도심 안전속도 적용을 위한 도로별 기능 분류 - 도로별 제한속도 적용 및 교통정온화 기법 도입 방안 ○ 과업의 범위 - 도심 안전속도5030 기본 및 실시설계 시행 - 사업효과 측정을 위한 사업시행 전후 모니터링 시행

사업추진계획 (절차)	○ 기술용역 심의 : 2018. 4 ○ 실시설계 시행 : 2018. 4 ~ 2018. 7 ○ 교통안전시설 심의 : 2018.7 ~ 2018.8 ○ 공사 시행 : 2018. 8 ~ 2018. 11 ○ 모니터링 시행 : 2018.6~7, 2018.12~2019.3
유사용역 자료활용계획(최근5년 이내)	○ 용 역 명 - 제3차 서울시 교통안전 기본계획 ※ 과업대상의 성격 및 현장 여건이 달라 성과품 활용이 어려움
리스크관리심사항목	○ 용역 수행 지연․중단 발생가능성 여부 - 용역추진 관련 이해당사자의 반대 등 민원이 발생될 소지가 있는지 : 본 용역은 교통사고 잦은 지점에 대한 교통사고 예방을 위한 시설개선을 목적으로 하는 사업으로 반대 민원발생 소지가 거의 없음 - 용역수행중 민원이 발생되어 용역추진에 차질이 생길 경우 대책은 : 교통사고 사전예방과 시민의 생명 보호 등 교통안전을 위한 사업임을 설명하여 이해 설득 - 용역수행과정에서 외부기관의 인․허가 또는 심의를 득하는데 지장이 없는지 : 서울지방경찰청 교통안전시설 심의 예정 ○ 용역비용 및 과업기간 증가 발생여부 및 관리 대책 : 해당없음 ○ 기타 예상 리스크 발생요인 및 대책(대응) 방안 : 해당없음
사업의 예상효과	○ 도심 통행속도 하향을 통해 보행자 교통사고 예방 및 교통사고 발생시 보행자 피해 최소화

【붙임 서류 】

1. 용역시행 방침서 1부

2. 용역 대가 산출근거 1부