기술용역타당성심사 요청서

안건번호	제 46 호
구 분	교 통

건 명	도심연결 자전거간선망 구축 시범사업 기본 및 실시설계

요청기관명	보행자전거과
제출년월일	2015년 1월 일

기술용역사업계획

용역개요	○용 역 명 : 도심연결 자전거간선망 구축 시범사업 기본및실시설계 ○용 역 비 : 140,000천원 ○용역기간 : 착수일로부터 210일(7개월) ○사업규모 : 양화로외 2개노선 등 자전거도로 4.2㎞ ○입찰참가자격(면허 등) : 엔지니어링산업진흥법 제21조 및 동법 시행령 제3조의 규정에 의거 산업통상자원부에 건설부문 중 4개 전문분야(도로·공항, 구조, 교통, 도시계획)에 엔지니어링사업 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조에 의거 건설분야 중 4개 기술범위(도로·공항, 구조, 교통, 도시계획)의 기술사사무소를 개설 등록한 업체
용역의 필요성	○용역시행 목적 - 도심내 진입 가능한 자전거도로망의 조속한 확충을 위하여 단기간 추진 가능하고 이용 수요가 많은 한강과 도심을 연결하는 간선기능의 도로망을 점진적으로 구축하여 자전거 이용활성화 유도하고자 설계용역을 시행코자 함 ○추진근거 : 보행자전거과-12938호(2014.11.13)
	○자체시행 가능여부(해당 47개 공종 포함여부 □ 포함, ☑ 미포함)
	○투자심사 여부, 중기재정계획 등 상위계획 반영여부 (해당없음) ○용역추진경위 : - ‘13년 4월 : 서울시 자전거도로 정책 종합계획 마련 □ 편리하고 안전하며 효율적인 생활교퉁으로서의 자전거 위상정립 -‘14. 7. : 도심내 진입 가능한 비젼수립(시장요청사항648호) -‘14. 8. : 자전거 정책 집중토론회 개최 -‘14. 10. : 자전거 정책 관련 현안사항 보고(시장보고) -‘14. 11. : 자전거도로 간선망 구축계획 수립

과업내용 (요약)	○과업의 기본방향 - 시민들에게 녹색교통수단인 자전거에 대한 친밀감을 확대시키고, 도심내의 이용활성화를 위해 안전하고 쾌적한 자전거 이용을 제공 ○과업의 범위 : 양화로외 2개노선(연장 4.2km) ○주요 과업내용 - 자전거도로의 서울형 모델 및 효과적 설치방안 검토 - 시범사업지역 문제점 분석 및 개선 방안 수립 - 자전거도로 운영에 필요한 세부 가이드라인 제시 검토 - 설계도면, 시방서, 수량산출서, 내역서 등 설계 성과품 작성 등
사업추진계획 (절차)	○2015. 1월 : 기술용역타당성심사 ○2015. 2월 : 용역 발주, 계약 및 착수 ○2015. 7월 : 용역준공 ○2015. 8월 : 공사발주 ○2015. 8월 ~ ‘16년 8월 : 공사시행 및 준공
유사용역 자료활용계획(최근5년이내)	○용 역 명 : 도심연결 자전거간선망 구축 시범사업 기본및실시설계 ○발주기관 : 보행자전거과 ○유사용역 자료활용 계획 - 자전거도로관련 최근 용역자료는 지역별 교통환경 및 위치, 현장여건 등이 상이하여 기존 용역자료 활용이 곤란함
리스크관리 심사항목	○용역 수행 지연․중단 발생가능성 여부 - 해당없음 - 용역추진 관련 이해당사자의 반대 등 민원이 발생될 소지가 있는지 - 용역수행중 민원이 발생되어 용역추진에 차질이 생길 경우 대책은 - 용역수행과정에서 외부기관의 인․허가 또는 심의를 득하는데 지장이 없는 지 ○용역비용 및 과업기간 증가 발생여부 및 관리 대책 - 해당없음 ○기타 예상 리스크 발생요인 및 대책(대응) 방안 - 해당없음
사업의 예상효과	○ 자전거의 도심 접근성 확대를 통한 자전거 활성화 도모 ○ 시민들의 여가‧문화‧교통수단으로써의 자전거 이용 증대 ○ 시범사업의 효과 분석 및 평가를 통해 점진적 확대 추진

※ 참고 : 기술용역 발주부서 자체시행 대상 47개 공종(행정2부시장 방침 제10058호 : ̀11.7.8)

【붙임 서류 】

1. 용역시행 방침서 1부

2. 용역 대가 산출근거 1부