붙임1

기술용역타당성심사 요청서

안건번호	제 호
구 분 도로(교량,터널),지하철,하천,건축,조경,설비(전기),도시계획,교통,소방,디자인 등으로 분야 표시	조 경

건 명	소규모 저류녹지 및 자연정화시설 설치사업 실시설계용역

요청기관명	한강사업본부(생태환경과)
제출년월일	2019년 1월 일

기술용역사업계획

용역개요	○용 역 명 : 소규모 저류녹지 및 자연정화시설 설치사업 실시설계용역 ○용 역 비 : 14,246천원(시비) ○용역기간 : 착수일로부터 50일간 ○사업규모 : 소규모 저류녹지 및 자연정화시설 설치 ○입찰참가자격(면허 등) : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 자격을 갖추고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자로서 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체 -「기술사법」에 따른 건설부문 조경분야 기술사사무소 -「엔지니어링산업진흥법」에 따른 건설부문 조경엔지니어링사업자
자체시행 가능여부	○용역시행 목적 - 『2030 한강 자연성 회복 기본계획』에 의거 추진하는 사업으로 한강의 자연성 회복을 위하여 물을 활용한 생물서식기능 보완 및 오염물질 임시저장 및 자연정화를 통하여 한강 수질 개선에 기여 ○추진근거(용역시행 방침서, 관련법령 등) - 2030 한강 자연성 회복 기본계획 : 시장방침 93호(2014. 4. 2.) - 2030 한강 자연성회복 기본계획(중기계획) : 행정2부시장 방침 제366호(2018.10.04.) - 시행방침 : 생태환경과-58(2019.1.15.)
	○자체시행 가능여부(해당 47개 공종 포함여부 □ 포함, ☑ 미포함)
	○투자심사 여부, 중기재정계획 등 상위계획 반영여부 (투자심사결과서, 상위계획 반영내용 첨부) ○2030 서울생활권계획 협의대상 여부 □ 대상, ☑ 비대상 ○용역추진경위 -2030한강 자연성회복 기본계획[시장방침93호(2014.4.2.)]

과업내용 (요약)	○과업의 기본방향 - 우천시 강변도로에서 유입되는 비점오염물질 정화를 위한 소규모 저류녹지 및 자연정화시설 설치 ○과업의 범위 - 사업위치 : 반포, 이촌, 잠실 - 과업기간 : 착수일로부터 50일 이내 - 목표연도 : 2019년도 ○주요 과업내용 - 현황조사 및 분석 - 설계방향 및 설계방안 제시 - 공종별 상세 설계 - 설계도서 및 보고서 작성
사업추진계획 (절차)	○ ’19. 1. : 서울시 기술용역타당성 심사 요청 ○ ’19. 2. ~ 3. : 실시설계용역 시행 ○ ’19. 3. ~ 4. : 계약심사, 공사발주 ○ ’19. 4. ~ 6. : 공사시행 및 준공
유사용역 자료활용계획(최근5년 이내)	○용 역 명 : 해당없음 ○발주기관 : 해당없음 ○유사용역 자료활용 계획 ※ 당해 사업과 유사한 용역사업의 성과품 자료, 인근 지역의 지질조사보고서, 환경영향평가보고서, 교통영향평가보고서 등 활용 가능한 자료를 조사하고 활용계획 수립
리스크관리심사항목	○용역 수행 지연․중단 발생가능성 여부 : 없음 - 용역추진 관련 이해당사자의 반대 등 민원이 발생될 소지가 있는지 - 용역수행중 민원이 발생되어 용역추진에 차질이 생길 경우 대책은 - 용역수행과정에서 외부기관의 인․허가 또는 심의를 득하는데 지장이 없는 지 ○용역비용 및 과업기간 증가 발생여부 및 관리 대책 : 없음 ○기타 예상 리스크 발생요인 및 대책(대응) 방안 : 없음
사업의 예상효과	○ 우천시 강변도로에서 유입되는 비점오염물질 정화를 통한 한강 수질 개선