기술용역타당성심사 요청서

안건번호	제 호
구 분 도로(교량,터널),지하철,하천,건축,조경,설비(전기),도시계획,교통,소방,디자인 등으로 분야 표시	설비(전기)

건 명	영등포아리수정수센터 태양광발전시설 설치 실시설계용역

요청기관명	영등포아리수정수센터
제출년월일	2019년 05월 일

기술용역사업계획

용역개요	○ 용 역 명 : 영등포아리수정수센터 태양광발전시설 설치 실시설계 ○ 용 역 비 : 금21,626,000원(금이천일백육십이만육천원) ○ 용역기간 : 2019. 6. ~ 2019. 7. ○ 사업규모 : 태양광발전시설 220kW(4개소) ○ 입찰참가자격(면허 등) : 공개경쟁입찰 - 전력기술관리법시행령 제27조제1항에 의거 종합설계업, 또는 전력전문설계업 1종 등록업체
자체시행 가능여부	○ 용역시행 목적 - 건축물 옥상에 태양광발전시설을 설치하는 사업으로 시설의 운영 및 구조물 안전성 확보와 최대의 발전효율을 얻을 수 있는 전문성, 기술력 등이 확보된 설계를 실시하기 위함 ○ 추진근거(용역시행 방침서, 관련법령 등) - 전력기술관리법 제11조(전력시설물의 설계도서의 작성 등)
	○자체시행 가능여부(해당 47개 공종 포함여부 □ 포함, ■ 미포함) - 자체시행대상임에도 외부용역으로 발주하는 사유 : ※ 알림 : 주요공종이 자체시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체 추진
	○투자심사 여부, 중기재정계획 등 상위계획 반영여부 - 해당 없음 ○2030 서울생활권계획 협의대상 여부 □ 대상, ■ 비대상 ※ 협의대상시 관련부서 의견조회(기술심사담당관 → 생활권계획추진반) ○ 용역추진경위 - 2019.5.20. : 태양광발전시설 설치 실시설계용역 시행계획 보고
과업내용 (요약)	○ 과업의 기본방향 - 기존 건축물 옥상에 태양광발전시설을 설치하는 사업으로 수직하중, 풍하중, 적설하중 등 구조물 안전 적정성 여부 검토 ○ 과업의 범위 : 1정수 송수펌프동 외 3개동(총 220kW) ○ 주요 과업내용 - 태양광발전시설 내역서 : 1식 - 전기공사 내역서 : 1식

사업추진계획 (절차)	○ ‘19. 6. ~ ’19. 7. : 실시설계 및 구조안전진단 시행 ○ ‘19. 7. ~ ’19. 8. : 계약심사 요청 ○ ‘19. 8. ~ ’19. 9. : 개발행위허기 신청 및 발주 ○ ‘19. 9. ~ ’19. 12 : 태양광발전시설 준공 및 발전
유사용역 자료활용계획(최근5년 이내)	○ 유사용역 자료활용 계획 - 해당사항 없음
리스크관리심사항목	○ 용역 수행 지연․중단 발생가능성 여부 - 용역추진 관련 이해당사자의 반대 등 민원이 발생될 소지가 있는지 - 용역수행중 민원이 발생되어 용역추진에 차질이 생길 경우 대책은 - 용역수행과정에서 외부기관의 인․허가 또는 심의를 득하는데 지장이 없는 지 ○ 용역비용 및 과업기간 증가 발생여부 및 관리 대책 ○ 기타 예상 리스크 발생요인 및 대책(대응) 방안
사업의 예상효과	○ 태양광발전시설 발전효율 최대화 및 안정적인 운영을 위해 설계전문가에 의뢰하여 설계실시로 안전성 확보 ○ 기존 건축물 옥상에 설치되는 태양광발전시설의 각종 하중에 대한 구조기술사 검토로 시설물의 안전성 확보

【붙임 서류 】

1. 용역시행 방침서

2. 용역 대가 산출근거

가. 공사비요율에 의한 방식 : 개략공사비 산출근거

나. 각종 적용요율 근거