기술용역타당성심사 요청서

안건번호	제 호
구 분 도로(교량,터널),지하철,하천,건축,조경,설비(전기),도시계획,교통,소방,디자인 등으로 분야 표시	조 경

건 명	이촌한강공원 녹지 정비사업 실시설계용역

요청기관명	한강사업본부(생태환경과)
제출년월일	2019년 1월 일

기술용역 사업계획

용역개요	○ 용 역 명 : 이촌한강공원 녹지 정비사업 실시설계용역 ○ 용 역 비 : 14,061천원(시비) ○ 용역기간 : 착수일로부터 50일 ○ 사업규모 : 약 20,000㎡ ○ 사업내용 : 한강변에 어울리는 초화류 및 꽃 식재 등 ○ 자격기준 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 자격을 갖추고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자로서 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체 -「기술사법」에 따른 건설부문 조경분야 기술사사무소 -「엔지니어링산업진흥법」에 따른 건설부문 조경엔지니어링사업자
자체시행 가능여부	○ 용역시행 목적 - 이촌한강공원 녹지에 한강변에 어울리는 초화류 및 꽃을 식재 하여 한강변 경관을 개선하여 공원이용 만족도를 높이고자 함. ○ 추진근거(용역시행 방침서, 관련법령 등) - 이촌한강공원 녹지 정비사업 시행계획(생태환경과-44호, 2018.1.14.)
	○ 자체시행 가능여부(해당 47개 공종 포함여부 □ 포함, ■ 미포함)
	○ 투자심사 여부, 중기재정계획 등 상위계획 반영여부 : 해당없음 ○ 용역추진경위 - 이촌한강공원 녹지 정비사업 시행계획(생태환경과-44호, 2018.1.14.)
과업내용 (요약)	○ 과업의 기본방향 - 자연성 회복사업 시행지 주변 이촌한강공원 녹지에 물억새, 수크령, 띠, 꽃창포 등 집중적으로 식재하여 자연성 회복사업 효과 제고 - 산책로, 자전거 도로변 다양한 꽃 식재로 공원이용 활성화에 기여 ○ 과업의 범위 - 공간적 범위 : 이촌한강공원 - 시간적 범위 : 착수(계약)일부터 50일간 - 내용적 범위 : 실시설계 ○ 주요 과업내용 - 현황조사 및 분석 - 설계방향 및 설계방안 제시 - 공종별 상세 설계 - 설계도서 및 보고서 작성

사업추진계획 (절차)	○ 2019. 1 : 기술용역타당성심사 ○ 2019. 2 ~ 3 : 실시설계용역 시행 ○ 2019. 4 : 계약심사, 설계완료 및 공사발주 ○ 2019. 5 ~ 7 : 공사시행 및 준공
유사용역 자료활용계획(최근5년 이내)	○ 해당 없음
리스크관리심사항목	○ 용역 수행 지연․중단 발생가능성 여부 : 없음 - 용역추진 관련 이해당사자의 반대 등 민원이 발생될 소지가 있는지 - 용역수행중 민원이 발생되어 용역추진에 차질이 생길 경우 대책은 - 용역수행과정에서 외부기관의 인․허가 또는 심의를 득하는데 지장이 없는 지 ○ 용역비용 및 과업기간 증가 발생여부 및 관리 대책 : 해당없음 ○ 기타 예상 리스크 발생요인 및 대책(대응) 방안 : 해당없음
사업의 예상효과	○ 자연성 회복사업 시행지 주변 이촌한강공원 녹지를 집중적 으로 시행하여 자연성 회복사업 효과 제고 ○ 산책로, 자전거 도로변 다양한 꽃 식재로 공원이용 활성화에 기여

【붙임 서류】

1. 용역비 산출조서 및 개략공사비 산출근거 각 1부.

2. 추진계획 방침서 1부.