기술용역타당성심사 요청서

안건번호	제 1109 호
구 분	교 통

건 명	청계천로 자전거우선도로 구축

요청기관명	보행자전과
제출년월일	2014년 11월 일

기술용역사업계획

용역개요	○용 역 명 : 청계천로 자전거우선도로 구축 ○용 역 비 : 15,000천원 ○용역기간 : 착수일로부터 30일 ○사업규모 : 자전거우선도로 구축 3.4㎞ ○입찰참가자격(면허 등) : 교통분야 엔지니어링 신고 업체 또는 교통기술사 등록 업체
용역의 필요성	○용역시행 목적 - 저탄소 녹색성장 정책의 일환으로 추진하고 있는 자전거 이용활성화에 부흥하고, 지역상권 활성화 및 청계천과 연계된 여가 생활을 위한 자전거도로 구축과 지역교통여건 및 안전대책 마련 등 검토가 필요한 전문성이 필요함으로 관련 설계용역을 시행코자 함 ○추진근거 : 보행자전거과-13219호(2014.11.20)
	○자체시행 가능여부(해당 47개 공종 포함여부 □ 포함, ☑ 미포함)
	○투자심사 여부, 중기재정계획 등 상위계획 반영여부 (해당없음) ○용역추진경위 : - ‘13년 4~11월 : 청계천로 일요일 자전거도로 시범운영(총 7회) - ‘13. 8. : 자전거도로 설치를 규제심의 신청(시→경찰청) □ 자전거전용차로 도입 신청(청계광장~청계7가) -‘13.10. : 자전거도로 설치 곤란 회신(경찰청→시) -‘14.4.~8. : 청계천로 자전거우선도로 도입 추진(경찰청협의) -‘14. 7. : 도심내 진입 가능한 비젼수립(시장요청사항648호) -‘14.10. : 자전거우선도로 설치관련 규제심의 요청(시→경찰청)
과업내용 (요약)	○과업의 기본방향 - 시민들에게 녹색교통수단인 자전거에 대한 친밀감을 확대시키고, 도심내의 이용활성화를 위해 안전하고 쾌적한 자전거 이용을 제공 ○과업의 범위 : 청계천로(청계광장~청계7가, 3.4km) ○주요 과업내용 - 설계개요 및 법령 등 각종 기준 검토 - 교통여건 우선도로관련 안전성(교차로 통행방법) 확보방안 검토 - 우선도로 운영에 필요한 세부 가이드라인 제시 검토 - 설계도면, 시방서, 수량산출서, 내역서 등 설계 성과품 작성 등

사업추진계획 (절차)	○2014. 11월 : 기술용역타당성심사 ○2014. 11월 : 용역 발주, 계약 및 착수 ○2014. 12월 : 용역준공 ○2015. 1월 : 공사발주 ○2015. 2월 ~ 3월 : 공사시행 및 준공
유사용역 자료활용계획(최근5년이내)	○용 역 명 : 청계천로 자전거우선도로 구축 ○발주기관 : 보행자전거과 ○유사용역 자료활용 계획 - 자전거우선도로관련 최근 용역자료는 지역별 교통환경 및 위치, 현장여건 등이 상이하여 기존 용역자료 활용이 곤란함
리스크관리 심사항목	○용역 수행 지연․중단 발생가능성 여부 - 해당없음 - 용역추진 관련 이해당사자의 반대 등 민원이 발생될 소지가 있는지 - 용역수행중 민원이 발생되어 용역추진에 차질이 생길 경우 대책은 - 용역수행과정에서 외부기관의 인․허가 또는 심의를 득하는데 지장이 없는 지 ○용역비용 및 과업기간 증가 발생여부 및 관리 대책 - 해당없음 ○기타 예상 리스크 발생요인 및 대책(대응) 방안 - 해당없음
사업의 예상효과	○ 자전거의 도심 접근성 확대를 통한 자전거 활성화 도모 ○ 시민들의 여가‧문화‧교통수단으로써의 자전거 이용 증대

※ 참고 : 기술용역 발주부서 자체시행 대상 47개 공종(행정2부시장 방침 제10058호 : ̀11.7.8)

【붙임 서류 】

1. 용역시행 방침서 : 내부시행품의 및 투자심사 요청 서류

2. 용역 대가 산출근거 : 엑셀문서로 작성

가. 실비정액가산방식 : 공종(항목)별 등급기술자 투입인원 수 산출근거

나. 공사비요율에 의한 방식 : 개략공사비 산출근거

다. 각종 적용요율 근거

3. 기 수행(유사)용역 보고서