기술용역타당성심사 요청서

안건번호	제 호
구 분 도로(교량,터널),지하철,하천,건축,조경,설비(전기),도시계획,교통,소방,디자인 등으로 분야 표시	조 경

건 명	‘18년 한양도성 주변 수목 및 담쟁이 정비 실시설계 용역

요청기관명	문화본부 한양도성도감
제출년월일	2018년 3월 7일

기술용역사업계획

용역개요	○ 용 역 명 : ‘18년 한양도성 주변 수목 및 담쟁이 정비 실시설계 ○ 용 역 비 : 9,890,000원 ○ 용역기간 : 착수일로부터 90일간 ○ 사업규모 : 한양도성 백악, 인왕, 남산, 낙산 구간(5km)
자체시행 가능여부	○ 용역시행 목적 - 사적 제10호 서울 한양도성 주변의 각종 위험수목, 고사목, 잡관목, 담쟁이(기생식물) 등을 정비하여 문화재를 보존하고 성벽 주변의 자연경관을 쾌적하고 아름답게 가꾸고자 함. ※ 필요성 : 문화재 보호구역내 수목 정비는「문화재 수리등에관한 법률」 제2조에 의거 “문화재 수리” 범위에 해당, 동법 제5조 “문화재수리 및 실측설계 제한”에 따라 문화재실측설계 면허 소지자가 설계. ○ 추진근거(용역시행 방침서 등) - 서울한양도성 주변 수목 보존·관리계획(행정1부시장방침,‘13.6.24) - ‘18년 한양도성 주변 수목 및 담쟁이 정비(한양도성도감-1099,’18.2.2)
	○ 자체시행 가능여부(해당 47개 공종 포함여부 □ 포함, ■ 미포함)
	○ 투자심사 여부, 중기재정계획 등 상위계획 반영여부 : 해당없음 ○ 용역추진경위 - ‘12. 06 : 한양도성 보존·관리활용 종합계획 수립 - ‘13. 06 : 한양도성 수목 보존·관리 지침 마련 - ‘18. 02 : ’18년 한양도성 주변 수목 및 담쟁이 정비계획 수립
과업내용 (요약)	○ 과업의 기본방향 - 문화재인 성벽에 영향을 주지않는 범위내에서 선별적으로 정비 ○ 과업의 범위 : 백악, 인왕, 남산, 낙산 구간(5km) ○ 주요 과업내용 - 수목 등 현황 분석 및 가이드라인을 통한 설계 방향 등 결정 - 현장에 맞는 적정 공법을 선정하고 시공에 필요한 최적의 설계도서 작성 - 기본 공정표 및 상세 공정표의 작성 - 그 밖에 발주처에서 요구하는 자료 및 식생 전문가 의견 수렴 등

사업추진계획 (절차)	○ ‘18. 3 ~ 6 : 기술용역타당성심사 및 실시설계 용역 시행 ○ ‘18. 6 ~ 8 : 식생 전문가 의견 수렴 및 관련 기관 협의 등 ○ ‘18. 9 ~ 11 : 공사 시행 및 사업완료
유사용역 자료활용계획(최근5년 이내)	○ 용 역 명 : 한양도성 보존관리 종합 계획 ○ 발주기관 : 문화본부 한양도성도감(서울시) ○ 유사용역 자료 활용 계획 - 한양도성 보존·관리 종합 계획(정비 방안 등) - 한양도성 주변 수목 및 담쟁이 정비 지침
리스크관리심사항목	○ 용역 수행 지연․중단 발생가능성 여부 - 용역추진 관련 이해당사자의 반대 등 민원이 발생될 소지가 있는지 : 민원 발생 요인 없음(불편 민원 해소) - 용역수행중 민원이 발생되어 용역추진에 차질이 생길 경우 대책은 : 주민들의 의견사항을 최대한 수렴하고 적극적인 이해설득 추진 - 용역수행과정에서 외부기관의 인․허가 또는 심의를 득하는데 지장이 없는 지 : 지장 없음 ○ 용역비용 및 과업기간 증가 발생여부 및 관리 대책 : 증가 요인 발생 가능성 없음 ○ 기타 예상 리스크 발생요인 및 대책(대응) 방안 : 해당사항 없음
사업의 예상효과	○ 세계유산 등재를 위한 한양도성 주변의 자연경관을 아름답게 정비 ○ 탐방하는 시민들에게 안전하고 쾌적한 탐방 환경 제공

【붙임 서류 】

1. 용역비 산출조서(용역설계 내역서) 및 개략공사비 산출조서 각1부. 끝.